【별표 1】

후분양 관련 표준건축 공정률

건축 공정율(%)	공정완료 부문	공정미완료 부문
40%	◦ 굴토공사 ◦ 지하골조공사	◦ 지상골조공사：65% ◦ 전기공사：30% ◦ 설비공사：25% ◦ 조적공사：20% ◦ 창문틀설치공사：30% ◦ 벽체보온공사：20% ◦ 방수공사：25% ◦ 벽체미장공사：5% ◦ 석고보드공사：준비 ◦ 수장공사：준비
60%	◦ 굴토공사 ◦ 지하골조공사	◦ 지상골조공사：95% ◦ 전기공사：50% ◦ 설비공사：40% ◦ 조적공사：70% ◦ 창문틀설치공사：60% ◦ 벽체보온공사：65% ◦ 방수공사：60% ◦ 벽체미장공사：55% ◦ 석고보드공사：45% ◦ 수장공사：45% ◦ 방바닥미장공사：35% ◦ 타일공사：5%
80%	◦ 굴토공사 ◦ 지하골조공사 ◦ 지상골조공사 ◦ 옥탑골조공사 ◦ 조적공사 ◦ 창문틀설치공사 ◦ 벽체보온공사 ◦ 석고보드공사 ◦ 방바닥미장공사	◦ 전기공사：70% ◦ 설비공사：70% ◦ 방수공사：95% ◦ 벽체미장공사：95% ◦ 수장공사：65% ◦ 타일공사：60% ◦ 창호공사：60% ◦ 도장공사：20% ◦ 도배공사：5% ◦ 가구공사：20% ◦ 바닥재：준비

* 「표준건축공정율」은 20층 아파트를 기준으로 건축공정율을 작성하였음