<별지5>

정성적 평가기준

1. 평가항목

① 경험중시형, 일반형

구분	계(점)	대안제시	시공관리계획
배점	40(50)	20(30)	20
위원별 점수 편차	0.8(0.8)	0.4(0.5)	0.4(0.3)

※ ( )外는 경험중시형, ( )內는 일반형

② 창의력중시형

구분	계(점)	대안제시의 우수성	예산절감	시공관리계획
배점	80	50	20	10
위원별 점수 편차	1.0	0.7	0.2	0.1

2. 세부 평가기준

(1) 시공관리계획

경험중시형 또는 일반형 : 20×평점/30 방식으로 평가

능력중시형 : 10×평점/30 방식으로 평가

소수점이 있는 경우 셋째자리에서 반올림

□ 공사관리계획(15점)

평가요소	배점	주요 평가내용	평가방법
품질관리계획의 적정성	4	∙품질관리계획 또는 품질시험계획의 적정성 - 건설기술관리법 및 당해공사 시방서 요구사항과의 부합성 - 시험품목, 시험기관 및 시험항목 제시 ∙시험기구비치계획의 적정성 - 주요품목에 대한 소요량, 공정상 소요시기, 발주예정 및 반입예정시기 등	정성적 평가
안전관리계획의 적정성	4	∙안전교육계획의 적정성 - 월간, 주간, 일일, 수시교육 계획제시 - 건설기술관리법, 산업안전보건법 및 당해공사 시방서 요구사항 등과의 부합성 ∙안전관리비사용계획의 적정성 - 안전관리비의 항목별 사용내역 및 기준제시 - 표준안전관리비 계상 및 사용기준(노동부 고시)에 따른 내역 및 기준과의 부합성	정성적 평가
환경관리계획의 적정성	4	∙분진, 소음등 환경보전계획의 적정성 - 관련 환경법령 및 당해공사 시방서 요구사항과의 부합성 ∙건설폐기물처리 계획의 적정성 - 관련 법령 및 당해공사 시방서 요구사항과의 부합성	정성적 평가
작업장 및 현장주변 가설계획의 적정성	3	∙합리적인 가설계획 수립의 적정성 - 주요 가시설물 설치계획 - 공사 단계별 자재야적장 계획 - 가설전기 및 용수 시설의 용량, 배치, 운영계획 - 주요 공종 및 가설재에 대한 공종별 가설계획 - 기타 발주기관이 요구하는 사항	정성적 평가

□ 현장관리계획(9점)

평가요소	배점	주요 평가내용	평가방법
현장대리인 배치예정자 경력	2	∙기술자 등급 ∙해당공종 경력 ∙현장대리인 수행 경력 등	정성적 평가
품질관리자 배치예정자 경력	2	∙기술자 등급 ∙품질관리 경력 등	정성적 평가
현장관리조직 구성의 적정성	2	∙현장관리조직의 구성 및 배치인원의 적정성 - 현장대리인, 자재관리, 공무관리, 공사관리, 안전관리, 품질관리, 노무관리 등	정성적 평가

□ 공정관리계획(6점)

평가요소	배점	주요 평가내용	평가방법
공정관리계획의 수립 및 적정성	3	∙체계적인 공정표와 효율적이고 통합적인 관리계획이 제시되었는지를 다음의 요소에 대하여 평가 - 전 공정의 예정공정표(C.P 표기) - 주요 공종에 대한 상세 공정계획 - 공사불능일 적용계획 - 기타 발주기관이 요구하는 사항	정성적 평가
장비․자재․인력 운영계획의 적정성	3	∙공정계획과 연계한 공종별/월별 주장비 투입 및 운영계획의 적정성 ∙공정계획과 연계한 공종별/월별 주자재 투입 및 운영계획의 적정성 ∙공정계획과 연계한 핵심인력(직원/노무) 투입 및 운영계획의 적정성	정성적 평가

(2) 대안제시 또는 예산절감방안

○ 대안제시 또는 예산절감방안은 심사위원이 정성적으로 평가