[별표 1]

외자구매계약 표준행정 소요일수

-----------------------------------

(단위: 일)

단 계 별	경쟁 입찰						수의 계약
	협정 물자		비협정 물자		2단계와 규격ㆍ 가격 동시
	표준	목표	표준	목표	표준	목표	표준	목표
요청서접수 규격공개 규격, 조건검토 공고규격 협의 구매결의, 공고 공고기간(견적기간) 입찰서와 내역서 작성 입찰서(견적서)검토 가격개찰과 검토 예산협의와 감가시담 계약체결 합계(1차 낙찰) 재공고구매결의와 공고 재공고기간 입찰서검토(재공고) 합계(2차 낙찰)	1 7 2 5 2 40 1 10 - 10 2 80 2 10 8 100	1 3 2 3 2 15 1 5 - 10 2 44 2 10 5 61	1 7 2 5 2 20 1 10 - 10 2 60 2 10 8 80	1 3 2 3 2 10 1 5 - 10 2 39 2 10 5 56	1 7 2 15 2 40 1 10 5 15 2 100 2 15 8 125	1 3 2 10 2 20 1 5 3 10 2 59 2 15 5 81	1 - 2 5 2 15 1 5 - 10 2 43 - - - 43	1 - 2 3 2 7 1 4 - 5 2 27 - - - 27

주) 1. 공고규격과 입찰서(견적서)검토 시 수요기관에 의해 검토가 지연된 기간은 별도 가산

2. 가격자료 미제출, 부당한 고가요구 등 업체가 감가시담에 불응할 경우 지연일수 별도 가산

3. 신용조사(신규업체) 필요 시 5일 가산

4. 합동회의 개최나 민원제기 등에 따라 입찰서 재검토 시 10일 가산

5. 경쟁계약에서 10품목을 초과하는 경우 매 10품목 초과 시마다 각 5일씩, 50품목 초과 건은 총 25일, 100품목 초과 건은 총 30일 가산

6. 지하철장비, 헬기 등 특수성이 있는 사업은 표준행정소요일수 대상에서 제외

7. 구매관 위임분은 문서 실 송·수신 기간 가산

8. 재공고의 경우 재공고기간 및 입찰서 검토기간 가산