【별표 제Ⅱ-2호】

무기체계 연구개발사업관리 기본절차도

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

선행연구

진화적 개발 2단계

진화적 개발 3단계

소

요

결

정

❶   ❷  ❸

❹    ❺

체계개발

양산

❶

❷

❸

개발/운용 시험평가

운용/유지

운용성확인

전력화평가

탐색개발

▲작전운용요구능력

▲작전운용성능(결정)

(진화적 단계별 ROC결정)

▲작전운용성능(수정)

그림 1. 연구개발 무기체계 획득절차 기본체계도

▲ 주요의사결정 시점 : 사업 단계 진입 및 종료 결정

① : 사업추진방법 결정 및 탐색개발단계 진입승인

② : 탐색개발결과 종료 확인 및 체계개발단계 진입승인

③ : 시험평가 완료/전투용 적합․부적합 판정 및 국방규격화 승인 후

양산/배치단계진입 승인

※ 필요 시, 초도생산과 후속양산으로 구분하여 승인

<사업진행 중 주요 이벤트>

❶ : 기본설계검토(PDR, Preliminary Design Review) : 상세설계 진입여부 결정

❷ : 상세설계검토(CDR, Critical Design Review) : 시제품 제작여부 결정

❸ : (필요 시) 초도생산 승인을 위한 잠정 전투용 적합․부적합 판정

※ 초도생산(LRIP, Low Rate Initial Production) 결정 : 초도생산의

선착수가 필요한 경우 체계개발단계와 중첩하여 수행 가능

❹ : 초도생산 착수

❺ : 전력화 평가 확인 및 후속양산

FOC