[별표 3]

감항인증 수행 절차도

소요결정

구분	선행연구	탐색개발	체계개발	양산	운용/유지
사업관리	①	운용성 확인 ②③	개발/운용 시험평가 ④ ⑤ ⑥ ⑦⑧⑨	전력화평가 ⑩	최종운용성 확인
감항인증	❶	❷❸	❹ ❺ ❻ 형식인증	❼❽ 생산확인 /감항인증	❾ 감항성 유지

<사업관리 수행절차>

① 사업추진기본전략(안), 사업관련 기본계획 작성

② 제안요청서 배포, 제안서 접수 및 평가

③ 체계개발 협상대상업체 선정

④ 체계요구조건검토(SRR), 체계기능검토(SFR), 기본설계검토(PDR)

⑤ 상세설계검토(CDR)

⑥ 초도비행준비검토(FFRR)

⑦ 기능적/물리적 형상확인(FCA/PCA)

⑧ 전투용 적합・부적합 판정

⑨ 국방규격 제정

⑩ 양산관리

<감항인증 수행절차>

❶ 사업추진기본전략(안), 사업관련 계획서 작성 시 감항인증 방안 수립

❷ 제안서의 감항인증계획 평가

❸ 감항인증 신청(계약 이전)

❹ 기종별 감항인증계획 확정

❺ 최초 안전비행(SOF) 평가

❻ 형식인증서 발급

❼ 생산확인

❽ 감항인증서 발급

❾ 감항성 유지