<별표 3>

사업명 :

시․도 총사업비 자율조정 내역서

201 .   .

○ ○ ○ 시․도

사업명 : ○  ○  ○

1. 사업개요

(단위 : 백만원)

총사업비	*자율조정전 총사업비	사업기간
사업주체		사업지역
사업규모	ㅇ ㅇ

2. 총사업비 변경내용

□ 총괄표

(단위 : 백만원)

구 분	현 행(A)	변경(B)	증 감(B-A)	비 고
<총사업비>			자율조정금액
ㅇ 공사비
ㅇ 보상비
ㅇ 시설부대경비
<자율조정 한도액>

□ 자율조정한도액 외 총사업비 변경내역

(단위 : 백만원)

공종별 (내역사업)	자율 조정일	조정액 (순증)
		공사비 증감분	보상비 증감분	시설부대경비 증감분
계	21,375	14,158	4,917	2,300
* (A)-①-01 노반 1공구(공사비)	2008.01.01	14,158
* (A)-②-01 2공구 (보상비)	2008.03.01		4,917
* (A)-③-01 노반 1공구 (감리비)	2008.04.05			2,300
* 관련코드-자율조정 세부항목	yyyy.mm.dd

□ 자율조정한도액 내 총사업비 변경내역

(단위 : 백만원)

구 분	내 역
현행 자율조정한도액	총한도액 (A)		기집행액 (B)	잔여한도액 (C)
	7,094		-	7,094
금회 자율조정한도액 집행실적	집행일	집행액 (D)	세부 반영사유
<집행액 합계>	-	77
* (B)-①-01 문화재 시발굴비	’08.4.10	70	▪ 2공구 노반 문화재 시발굴비
* (B)-②-02 안전시설보강	’08.4.10	7	▪ 2공구 철로접근 경계울타리 보강
* 관련코드-자율조정세부항목 참조			▪
* 관련코드-자율조정세부항목 참조			▪
* 관련코드-자율조정세부항목 참조			▪
조정 자율조정한도액	기집행액 (B+D)		잔여한도액 (C-D)
	77		7,017

※ 작성요령

자율조정세부항목은 <별표2-3> 자율조정 세부항목 분류를 참고하여 “코드-자율조정항목” 형태로 기입

집행일은 연월일을 점( . )으로 구분하여 기재

- 자율조정시 감액되는 항목의 경우 자율조정 집행한도 잔액 산정시 제외(□자율조정한도액 외 총사업비 변경내역에 기입)

□ 낙찰차액 자율조정

(단위 : 백만원)

공종별1｣ (내역사업)	현행 공사비	최초계약				변경 공사비
		계약일	예산상 공사비 (A)2｣	계약액 (B)3｣	낙찰차액 (B-A)
계
<금회계약분>
ㅇ
ㅇ
<기계약분>
ㅇ
ㅇ
<미계약분>
ㅇ
ㅇ

1｣ 계약단위별(공종 또는 내역사업)로 세분화하여 작성

2｣ 공사발주전 기획재정부와 협의된 실시설계 금액(턴키공사의 경우 기본계획상 금액)

3｣ 계약금액을 확인할 수 있는 계약서, 관급자재 금액을 확인할 수 있는 설계 예산서 등 관련서류 첨부

□ 자율조정 한도액 설정

(단위 : 백만원)

구 분		내 역
현행 총사업비		<총사업비>
		○ 공사비
		○ 보상비
		○ 시설부대경비
현행 자율조정한도액		총한도액(A)		기집행액	잔여한도액(B)
변경 자율조정한도액		계약일	계약액	자율조정 한도액(순증)
				설정 한도액 (C)	비 고
공종	소계	-	-
	* 계약공종
	* 계약공종
조정 자율조정한도액		총한도액 (A+C)		기집행액	잔여한도액 (B+C)

※ 자율조정한도액은 도급공사비(관급자재비는 제외)의 10%로 계약공종별로 설정