[부록 5] 토취장 계획의 흐름

설계단계	목 적	조사 내용	착안점
타당성 조사 및 기본설계 단계	-최적노선에 맞추어 개략적인 토취장 검토	-지형도, 지질도 등에 의한 도상조사와 간단한 현지답사	-법령(광업권, 보안림, 농진법, 토사채취 조례, 문화재)에 의한 개발 규제 유무의 파악 -토량, 토성, 흙운반로 등의 개략검토 -관련공공사업의 파악
설계협의단계 (환경영향 평가초안)	-현지조건에 적합한 토취장 후보지를 선정하고 비교ㆍ검토해서 최적의 토취장선정	-가능토량, 토성, 운반경로, 용지 등의 현지조사 -유력한 후보지의 토질조사 및 토질시험 -관할 행정관청과 허가유무를 사전 협의	-채취가능토량, 토성의 파악 -관련 공공사업과의 연계도모 -흙운반로의 사용협의 -토지 이용계획과의 조정 -배수계획과 방재계획 검토
실시설계단계	-세밀한 조사ㆍ검토 및 설계협의에 따라 토취장을 최종 선정	-상세한 측량조사 -용지보상을 위한 조사 -토질 등의 보충조사 -흙운반로 상세조사	-보상 관계의 확인 -흙운반로의 개량 및 대책 -배수, 방재대책 -공사시의 토량 변경에 유연하게 대처할 수 있도록 설계