[별지 제1호서식]

조림사업 사업계획서(예시)

□ 사업개요

◦ 위    치 : 충남 논산시 노성면 교촌리 산3-1번지외 10필지

◦ 지    적 : 122.66ha

◦ 조림면적 : 76.20ha

◦ 사업계획기간

- 실시설계 : 2006. 10. 15 ～ 2006. 12. 22

- 사업시행 : 2007.  2.  1 ～ 2008. 4. 20

□ 사업대상지 특성

◦ 노성산은 많은 지역주민들이 찾아오는 곳으로 경관적인 가치증진을 위하여 수종갱신이 필요함.

◦ 과거 리기다소나무를 조림했던 곳으로 리기다소나무 수종갱신을 위하여 다양한 방법으로 벌채되어 있는 상태임.

◦ 사업 대상지 산복부에는 임도가 통과하고 있고 능선부에는 등산로가 개설되어 있음

◦ 사업지 하단부에는 명성소류지가 있고, 상단부에는 사찰이 있음.

◦ 잔존대는 소나무, 해송과 참나무류가 주종을 이루고 있음.

◦ 유형별 조림대상면적

유 형	면 적(ha)	벌채시기	비 고
모두베기 실행지	2.20	2006. 12	초두부와 지조 잔존
대상벌채 실행지
단목택벌 실행지	62.20	2006. 12	초두부와 지조 잔존
미입목지 (제지)	11.80		관목류와 덩굴류 무성함
합 계	76.20

□ 경영목표

◦ 침엽수임지는 우량대경재 생산

◦ 상수리 등 참나무임지는 표고자목으로 생산

□ 산림의 기능구분

◦ 목재생산림

□ 묘목 수급계획

◦ 식재희망 수종

- 단목택벌지 : 잣나무, 편백, 잣나무 큰나무, 큰나무경관조림

- 개벌지 : 소나무

- 무입목지 : 소나무, 상수리

◦ 묘목공급형태

- 묘목과 종자는 100% 현물 공급

- 묘목은 가식지까지 도착조건으로 공급

- 묘목의 공급지 : 부여군 외산면

□ 작업방법

◦ 산물은 등고선 방향으로 정리

◦ 단목택벌지의 식재는 잔존목에서 최소 2m 이상 떨어지도록 함.

□ 산주요구사항

◦ 원하는 수종으로 조림해 줄 것.

◦ 큰 나무로 조림해 줄 것.

□ 제공자료

◦ 사업대상지 목록

◦ 대상지 임야도 (1/6,000)

◦ 적지적수도 (1/25,000)

0000. 00. 00.

작성자 : 000 (인)

확인자 : 000 (인)