■ 지적확정측량규정 [별지 제1호서식] <제정 2013.11.00>

지적확정측량 업무집행계획서

(제1쪽)

구 분	내 용	비 고
사 업 명	○ △△지구확정측량
사업근거	○ 주택법 제16조 및 주택법시행령 제17조 규정에 의한 대지조성사업
사업시행자	○ △△발공사 - 담당부서 및 연락처 : 지역개발팀 △△△주임 280-0660
측량의 목적	○ 농촌인구 감소 및 고령화와 노후된 주택증가 등 어려운 농촌의 현실을 극복하고 주거환경 개선을 위해 대지조성사업 추진 ○ 2012. 1. 26 사업시행자가 지적확정측량을 신청함
토지소재	○ △△군 △△면 △△리 일원
업 무 량	○ 필 지 수 : 120필지 중 70필지 확정 ○ 면 적 : 125,945.0㎡ 중 76,796.1㎡ ○ 삼각점 매설 : 4점 / 도근점 매설 : 43점 중 28점 ○ 측량수수료 : 119,583천원 중 74,128천원 ○ 업무량 비율 : 0000공사(00%), △△엔지니어링(00%)	공동 이행방식
측량계약기간	○ 2012. 1. 27～2012. 7. 27.	세부일정 별지
인력투입계획	○ 0000공사 △△지사 1개팀 3명 - 팀장 : 지적기사 △△△ - 팀원 : 지적기사 △△△ 지적기사 △△△
기초측량계획	○ 삼각점측량 : GNSS에 의한 정지측량 ○ 도근측량 : 경위의측량방법에 의한 다각망도선법 ○ 수평각 관측 : 배각법 / 연직각 관측 : 정·반 1회 ○ 점간거리 측정 : 2회 측정 ○ 관측기계 : 토탈스테이션 SET 230R(1초독) ○ 기타 특기사항 :
세부측량계획	○ 측량방법 : 경위의측량방법에 의한 방사법 ○ 수평각 관측 : 1대회의 방향관측법 / 연직각 관측 : 정·반 1회 ○ 점간거리 측정 : 2회 측정 ○ 사용기계 : 토탈스테이션 SET 230R(1초독) ○ 기타 특기사항 :

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

지적확정측량 세부일정

(제2쪽)

업 무	작 업 별	업무량	작업기간	소요일	비고
준비	수행계획서 작성 및 준비		2012.01.27~2012.01.27	1	공휴일 포함
	자료인수 및 계획수립		2012.01.28~2012.01.29	2	"
지적기준점 측량	자료조사	삼각 4점	2012.01.30~2012.01.30	1	"
	계획준비	도근28점	2012.01.31~2012.01.31	1	"
	답사		2012.02.01~2012.02.01	1	"
	선점		2012.02.02~2012.02.02	1	"
	매설		2012.02.03~2012.02.08	6	"
	관측		2012.02.09~2012.02.15	7	"
	계산		2012.02.16~2012.02.20	5	"
	기지점부합 여부확인		2012.02.21~2012.02.23	3	"
	성과작성		2012.02.24~2012.02.24	1	"
	점검		2012.02.25~2012.02.25	1	"
지적 확정 측량	계획준비		2012.02.26~2012.03.10	14	"
	가구측량		2012.03.11~2012.04.01	22	"
	획지측량		2012.04.02~2012.04.03	2	"
	중심선계산		2012.04.04~2012.04.09	6	"
	중심점계산		2012.04.10~2012.04.13	4	"
	가구계산		2012.04.14~2012.04.22	9	"
	면적계산		2012.04.23~2012.05.14	22	"
	확정측량결과도 작성		2012.05.15~2012.05.25	11	"
	도부작성		2012.05.26~2012.05.31	6	"
	조서작성		2012.06.01~2012.06.05	5	"
	점검		2012.06.06~2012.06.11	6	"
측량검사(측량기간의1/4)			2012.06.12~2012.07.26	45	"
납 품			2012.07.27~2012.07.27	1	"
합 계				183

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]