■ 숲가꾸기 설계․감리 및 사업시행 지침[별지 제16호 서식〕

작 업 계 획 서(예시)

□ 인력투입계획

공종별		1개월			2개월			3개월			합계 (명)
		10	20	30	10	20	30	10	20	30
경계확인	보통	1									1
	기술	1									1
선목	보통	3	3	3							9
	기술	3	3	3							9
미래목 가지치기	보통	5	5	5	5	5	5				30
	기술	3	3	3	3	3	3				18
작업실행	보통		3	3	3	3	3	3	3	1	22
	기술		5	5	5	5	5	5	5	2	37
하산집재	보통						5	5	5	5	20
	기술						2	2	2	2	8
정리보완	보통								1	1	2
	기술								3	3	6

□ 장비투입계획

장 비 명	1개월			2개월			3개월			비고
	10	20	30	10	20	30	10	20	30
체인톱(대)
	10	10	12	12	12	12	5	5	5
굴삭기(대)
	1	1
우드그랩(대)
							1	1	1
PE 수라(m)
							100	100	100
트럭(대)
							1	1	1
타워야더(대)
							1	1	1