고   시(안)

◉ 농림축산식품부 고시 제2014-35호

공유수면 관리 및 매립에 관한 법률 제38조 및 농어촌정비법 제9조의 규정에 의하여 공유수면매립 실시계획 및 농업생산기반 정비사업 시행계획을 변경하였기 다음과 같이 고시합니다.

2014년   4월   4일

농림축산식품부장관

영산강Ⅲ-1지구 공유수면매립 실시계획 및 농업생산기반 정비사업 시행계획 변경

1. 승인 연・월・일 : 1987년 6월 9일(변경 : 실시계획 2014년 3월 24일, 시행계획 2014년 2월 28일)

2. 사 업 명 : 영산강(Ⅲ-1)지구 대단위농업개발사업

3. 매립면허 취득자의 성명・주소

가. 당  초

○ 성  명 : 한국농어촌공사 사장 홍문표

○ 주  소 : 경기도 의왕시 포일동 487(전화 031-420-3666)

나. 변  경

○ 성  명 : 한국농어촌공사 사장 이상무

○ 주  소 : 경기도 의왕시 안양판교로 98(전화 031-420-3114)

4. 매립(사업) 목적 : 농경지조성 및 국토확정

5. 사업구역(위치)

○ 전라남도 해남군 해남읍, 산이면, 마산면, 옥천면, 계곡면, 영암군 삼호읍, 미암면, 강진군 도암면

6. 매립면적 :  12,816ha

7. 사업시행자 : 한국농어촌공사 사장

8. 사업내용

○ 담수호 1개소, 방조제 1개소 2,219m, 배수갑문 1개소 125m, 진입도로 2조 10,148m, 연락수로 1조 4,434m, 양수장 5개소, 용수로 157조 475km

9. 총사업비

○ 당초 : 705,578백만원              ○ 변경 : 669,308백만원

10. 사업(시행)기간

○ 당초 : 1985년~2015년(31개년)           ○ 변경 : 1985년~2023년(39개년)

11. 사업효과

○ 국토확장 12,816ha, 수자원 확보 244백만톤, 식량증산 44,149M/T, 맥류증산(연간) 5,663M/T,  투자 수익률 12.8%

12. 매립 실시계획의 변경사유 및 변경사항

가. 변경사유 : 연차별 예산지원 규모 및 공사 소요기간 등을 고려하여 매립공사 사업기간 연장

나. 변경사항 : 면허를 받은 자의 성명, 사업기간 변경(연장)

13. 매립예정지의 토지이용계획서 : 현행과 같음

14. 기타사항

○ 기타 자세한 사항은 한국농어촌공사(우437-703, 경기도 의왕시 안양판교로 98, 전화 031-420-3183)나 한국농어촌공사 영산강사업단(우530-823, 전남 목포시 영산로 463, 전화 061-270-6470)에 문의 바랍니다.