농림축산검역검사기술개발 용역연구 사업관리규정

제정 2006.12.14 국립수의과학검역원 예규 제46호

개정 2010.2.2 국립수의과학검역원 예규 제83호

개정 2011.6.15. 농림수산검역검사본부 예규 제27호

개정 2013.3.23. 농림축산검역본부 예규 제46호

개정 2013.10.24 농림축산검역본부 예규 제58호

개정 2013.12.9 농림축산검역본부 예규 제62호

제1조(목적) 이 규정은 「가축전염병예방법」, 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」 및 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에 따라 농림축산검역본부가 수행하는 농림축산검역검사기술개발 용역연구사업을 효율적으로 운영·관리하기 위하여 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “용역연구사업”은 농림축산검역본부(이하 “검역본부”라 한다)가 국내·외 대학, 연구기관 등 외부기관 또는 단체와 용역계약을 하여 수행하는 사업을 말한다.

2. “용역연구과제”라 함은 제1호의 용역연구사업을 수행하기 위하여 검역본부가 주관연구기관과 계약을 체결하는 단위과제를 말한다.

3. “연구관리부서”는 과제를 총괄하는 검역본부내 부서를 말한다.

4. “연구추진부서”는 과제를 추진하는 검역본부내 부서를 말한다.

5. “주관연구기관”이란 용역연구개발과제를 주관하여 수행하는 기관을 말한다.

6. “주관연구책임자”란 주관연구기관의 연구책임자를 말한다.

제3조(용역연구사업 관련 부서의 임무) ①검역본부의 연구관리부서는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 용역연구사업 기획․운영에 관한 업무

2. 용역연구사업심의회 및 용역연구과제 평가위원회 운영에 관한 사항

3. 평가위원풀(pool) 구성 및 운영에 관한 사항

4. 용역연구사업비 총괄관리에 관한 사항

5. 용역연구과제 결과 평가 및 성과관리에 관한 업무

6. 기타 용역연구사업의 지원에 필요한 사항

②연구추진부서는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 용역연구과제 발굴에 관한 사항

2. 주관연구기관의 선정 평가에 관한 업무

3. 용역연구사업의 관리 및 검사에 관한 업무

4. 용역연구사업의 진도 관리 및 활용 확산에 관한 업무

5. 수행용역과제에 대한 지도․감독

6. 과제 및 성과관리의 D/B 구축에 관한 사항

7. 기타 용역연구사업의 추진에 필요한 사항

제4조(용역연구사업심의회 및 용역연구과제 평가위원회) ①용역연구사업에 관한 주요사항의 협의는 용역연구사업심의회(이하 “심의회”라 한다)에서 한다.

② 심의회는 내부 및 외부 심의회로 나누며, 위원장을 포함하여 각 7인 내외로 구성한다.

③ 내부 심의회의 위원장은 동식물위생연구부장이 되고 부위원장은 동식물위생연구부의 주무과장이 되며, 위원은 동식물위생연구부 소속 과장 및 타 부 소속 과장을 포함한 검역본부 소속 관련 전문가 중 위원장이 위촉하는 자로 한다.

④	외부 심의회의 위원장은 동식물위생연구부장이 되고 부위원장은 동식물위생연구부의 주무과장이 되며, 위원은 외부의 관련 전문가 중 위원장이 위촉하는 자로 한다.

⑤ 심의회의 사무를 처리하기 위해 간사 1인을 두되 특별한 사유가 없을 경우 연구관리 담당연구관으로 한다.

⑥ 내부 심의회는 다음 사항을 심의하며 재적위원 과반수의 출석으로 개회하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

1. 용역연구과제의 선정, 평가 및 추진에 관한 포괄적 사항

2. 연구개발성과의 활용에 관한 사항

3. 용역연구과제의 제재 심의에 관한 사항

4. 기타 용역연구사업의 추진에 관하여 필요한 중대사항

⑦ 외부 심의회는 다음 사항을 심의 한다.

1. 용역연구과제의 선정, 평가에 대한 사항

2. 기타 용역연구사업의 추진에 관하여 필요한 사항

⑧ 제3조 1호 각항의 수행을 위해 연구관리부서는 용역연구과제평가위원회(이하 “평가위원회”라 한다)를 구성한다.

⑨ 평가위원회의 위원은 위원장을 포함하여 7인 내외로 구성하며 위원장은 동식물위생연구부장이 되고 위원은 검역본부 소속 혹은 외부의 관련 전문가 중 평가위원회 위원장이 위촉하는 자로 한다.

⑩ 평가위원회의 사무를 처리하기 위해 위원장은 간사 1인을 지정한다.

제5조(사업대상분야) 용역연구사업대상분야는 다음 각호와 같다.

1. 검역본부의 사업 추진에 따른, 외부의 수행이 필요한 과제

2. 고유기능 수행에 필요하나 인력이 부족하여 외부인력의 활용이 필요한 과제

3. 국가기관에서 필요한 과제이나 성격상 외부전문가의 수행이 요구되는 과제

4. 기타 검역본부장이 필요하다고 인정하는 기술의 개발

제6조(연구계획의 수립 및 선정) ①검역본부장은 필요한 경우 당해연도의 예산, 정책방향 등을 고려하여 용역연구 사업계획을 수립할 수 있으며 이를 위해 관련 기관, 단체, 학계, 산업계 등을 대상으로 연구사업 수요조사를 실시할 수 있다.

② 제1항의 사업추진계획에 따라 용역연구수행이 필요한 부서에서는 용역연구과제제안서(별지 제1호서식)를 연구관리부서에게 제출하여야 한다.

③ 용역연구과제를 제안하려는 부서의 장은 연구과제제안서를 제출하기 전에 국가과학기술종합정보시스템(http://rndgate.ntis.go.kr) 등을 통하여 중복성 검토를 실시하고 그 결과를 제안서에 표기하여야 한다.

④ 검역본부장은 연구사업의 중장기 목표, 정책적인 동향을 고려하여 용역연구가 필요한 과제를 차년도 연구예산에 반영하여야 하며 제안된 용역연구과제에 대해서는 외부심의회 및 내부심의회를 개최하고 평가결과, 정책필요성 등을 고려하여 우선순위를 결정한다.

제7조(연구과제의 공고) ①검역본부장은 제6조에 의해 선정된 용역연구과제에 대하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」,「조달사업에 관한 법률」 및 「기획재정부 계약예규 ″예정가격 작성기준″」에 따라 공고할 수 있다.

②제1항의 규정에 불구하고 보안 유지가 필요한 용역연구과제에 대하여는 공고하지 아니할 수 있다.

제8조(용역연구사업 신청자격) ①용역연구사업을 신청할 수 있는 기관은 다음 각 호의 기관, 대학 또는 단체 등으로 한다.

1. 국․공립연구기관

2. 정부출연연구기관 등의 설립․운영 및 육성에 관한 법률에 따라 설립된 정부출연연구기관, 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립․운영 및 육성에 관한 법률에 따라 설립된 과학기술분야 정부출연연구기관 또는 공공기관의 운영에 관한 법률에 따라 지정․고시된 공공기관

3. 고등교육법 제2조에 따른 학교

4. 기술개발촉진법시행령이 정하는 기준에 해당하는 기업부설연구소 또는 농림축산검역검사기술분야의 연구기관 및 단체

5. 민법 또는 다른 법률에 의하여 설립된 법인

6. 외국 과학기술자의 연구기술이 필요하여 검역본부장이 인정하는 기관 및 단체

②용역연구사업을 신청할 수 있는 주관연구책임자는 다음 각 호의 정규직원으로 한다.

1. 기업, 단체, 연구기관 등

가. 단체장, 연구소장

나. 대학 이상의 과정 이수 후 해당분야 경력 12년 이상인 자

다. 석사학위 취득 후 해당분야 경력 8년 이상인 자

라. 박사학위 또는 기술사 자격 취득 후 해당분야 경력 3년 이상인 자

마. 기타 가 목 내지 라 목과 동등이상 경력 소유자

2. 대학 및 전문대학

가. 대학의 전임강사 이상의 자

나. 전문대학의 조교수 이상의 자

③검역본부장은 검역본부 또는 다른 정부기관의 연구개발과제에서 제재조치를 받은 자의 경우 그 제재조치 기간내에는 용역연구과제의 참여를 제한한다.

제9조(용역연구사업 신청 및 평가) ①용역연구사업에 참여하고자 하는 자는 별지 제2호서식에 의한 용역연구사업신청(계획)서를 검역본부장 혹은 조달청장에게 제출하여야 한다.

②용역연구과제를 2개 이상의 연구기관 및 연구책임자가 공동으로 수행하는 경우에는 주관연구책임자는 제1세부과제의 연구책임자가 되어야 한다.

③동식물위생연구부장은 신청받은 용역연구과제에 대하여 분야별로 내부 혹은 외부 평가위원을 지정하여 평가할 수 있다. 단, 외부 평가위원에게는 예산의 범위내에서 평가수당을 지급할 수 있다.

④지정받은 평가위원은 별표1의 용역연구사업평가지침에 따라 평가를 하고, 그 결과를 검역본부장에게 제출하여야 한다.

제10조(단일응모과제의 처리) ①검역본부장 혹은 조달청장은 공고된 용역연구과제 접수결과 단일응모 되었을 경우에는 재공고 하여야 한다.

②재공고 후에도 단일응모된 과제에 대해서는 평가위원 평가를 거쳐 용역연구과제 주관연구기관을 정할 수 있다.

제11조(주관연구기관 및 주관연구책임자 선정) ①검역본부장 혹은 조달청장은 제9조 규정에 의한 평가결과에 따라 평가점수가 가장 높은 주관연구기관과 주관연구책임자를 선정하고, 종합평가 의견 등을 포함한 평가결과를 해당 주관연구기관의 장에게 통보하여야 한다. 이 경우 필요시 주관연구기관의 장에게 용역연구사업계획에 대하여 보완을 요청할 수 있다.

②검역본부장은 제3항의 규정에 의한 과제수 제한 또는 기타 부득이한 사유로 주관연구책임자가 계약을 포기하는 경우에는 차순위자에 대하여 순차적으로 3순위까지 주관연구책임자로 정할 수 있다. 다만, 차순위자 평가결과가 75점 미만인 경우에는 재공고하여 주관연구책임자를 선정한다.

③검역본부가 추진하는 용역연구과제의 연구책임자는 세부연구과제를 포함하여 3과제를 초과할 수 없다. 다만, 검역본부장이 필요하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

④용역연구과제 참여연구원은 타부처에서 추진하고 있는 용역연구사업을 포함하여 용역과제 참여율 100%를 초과하지 못한다.

제12조(주관연구기관의 기능) 주관연구기관은 당해 분야의 연구인력, 시설 등을 충분히 갖춘 기관이어야 하며, 주관연구기관의 장은 다음 각 호에 관한 업무를 수행한다. 검역본부장은 필요시 실사를 실시할 수 있다.

1. 용역연구과제의 계약 체결 및 수행에 대한 종합적인 관리

2. 연구인력․시설 및 행정에 관한 업무 지원

3. 용역연구비의 집행․관리․관리자 지정 및 사용실적 보고

4. 세부과제연구기관, 세부과제연구책임자의 지정 및 변경 요청

5. 세부과제연구기관에서 사용한 용역연구비 정산 및 결과 보고

6. 기타 용역연구과제 관리에 필요한 사항

제13조(주관연구책임자의 기능) 주관연구책임자는 당해 분야의 연구경험과 연구능력을 갖춘 자로서 주관연구기관에 소속된 자이어야 하며, 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 용역연구과제 신청(계획)서 작성

2. 용역연구과제 내용 및 수행방법 결정

3. 용역연구 참여연구원의 선정․교체 및 조정․감독

4. 용역연구과제 결과의 보고

5. 기타 용역연구과제 수행에 필요한 사항

제14조(용역연구사업계획서 제출) ①제11조의 규정에 의하여 용역연구과제가 선정된 주관연구기관의 장은 별지 제2호서식에 의한 용역연구사업계획서를 제출하여야 한다.

②검역본부장은 제1항의 용역연구사업계획서에 대하여 제9조의 규정에 의한 보완사항 반영여부를 검토ㆍ확인한 후 타당하다고 인정된 경우에는 계약을 체결한다.

③계속과제로 선정된 용역연구과제의 경우 2차년도부터는 별지 제3호서식에 의한 용역연구사업 연차실적보고서․계획서의 제출로 용역연구사업계획서의 제출에 갈음한다.

제15조(용역연구사업 계약 체결) ①검역본부장은 용역연구과제별로 별지 제4호 서식에 의한 용역연구사업표준계약서에 용역연구사업계획서를 첨부하여 주관연구기관의 장과 계약을 체결한다.

② 제1항의 규정에 따른 계약에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 연구개발과제의 범위․수행방법, 성과계획 및 연구책임자

2. 연구개발비 및 그 지급방법

3. 연구개발결과의 보고

4. 연구개발결과의 귀속 및 활용

5. 연구개발결과의 평가에 따른 조치

6. 연구개발비의 사용 및 관리

7. 계약의 변경 및 해약

8. 계약 위반에 대한 조치

9. 기타 연구개발사업에 수반되는 사항

③제1항의 규정에 불구하고 계약체결시 서식을 사용하기가 곤란하다고 인정되는 경우에는 용역연구사업계약서에 기재된 계약의 일반사항 외에 당해 계약에 필요한 특약사항을 명시하여 계약을 체결할 수 있다.

④계속과제로 선정된 용역연구과제의 경우 계약시 총 사업기간을 명기하고, 용역연구사업연차․실적계획서 평가결과에 따라 매 당해연도마다 용역계약을 체결한다.

⑤공동연구과제는 주관연구기관의 장이 세부과제연구기관의 장과 체결한 계약서 사본을 계약체결시 검역본부장에게 제출하여야 한다.

제16조(용역연구비 계상기준 및 산정) 주관연구기관의 장은 용역연구원가계산서를 회계예규의 학술용역원가계산 및 별표2의 용역연구개발비산정및정산지침에 따라 계상하여야 한다.

제17조(용역연구 계약보증금) ①계약을 체결하는 주관연구기관의 장은 ｢국가를당사자로하는계약에관한법률｣에 따라 계약금액의 100분의 10이상의 계약보증금을 납부하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 납부하지 아니 할 수 있다.

1. 국가 및 지방자치단체

2. ｢정부출연연구기관 등의 설립․운영 및 육성에 관한 법률｣에 따라 설립된 정부출연연구기관, ｢과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립․운영 및 육성에 관한 법률｣에 따라 설립된 과학기술분야 정부출연연구기관 및 ｢공공기관의 운영에 관한 법률｣에 따라 지정․고시된 공공기관

3. 계약금액이 3천만원 이하인 계약

4. 일반적으로 공정․타당하다고 인정되는 계약의 관습에 따라 계약보증금 징수가 적합하지 아니한 경우

②제1항의 규정에 의하여 계약보증금의 납부를 면제받는 주관연구기관의 장은 별지 제5호서식에 의한 계약보증금지급각서를 계약시 제출하여야 한다.

제18조(용역연구비 지급 및 관리) ①검역본부장은 용역연구비를 선금 및 잔금으로 분할하여 지급할 수 있다.

②검역본부장은 주관연구기관의 장이 선금 지급을 요구한 경우 계약금액의 100분의 70을 초과하지 않는 범위 안에서 지급할 수 있다.

③용역연구비의 집행은 주관연구기관의 법인신용카드를 사용하거나 계좌이체의 형태로 사용하여야 하며 카드사용이나 계좌이체가 불가능한 경우에 한하여 현금을 사용할 수 있으며 현금영수증을 첨부하여야 한다.

④용역연구비를 사용한 때에는 사용내역에 관한 증빙자료를 갖추어야 한다.

⑤검역본부장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 경비를 지급하지 아니한다.

1. 주관연구책임자가 용역연구비의 사용을 증빙하지 못한 금액

2. 제20조제3항의 규정에 의한 승인을 받지 아니하고 초과변경 사용한 금액

3. 용역연구비에 계상된 인건비 중 해당 참여연구원의 인건비로 실제 지급하지 아니한 금액

⑥선금분에 대한 이자발생분은 반납하여야 한다.

⑦주관연구기관이 영리법인인 경우 연구개발비 사용에 있어 관세, 부가가치세 등 사후에 환급받거나 공제받는 금액은 당해 연구개발비 지출내역에서 제외하여야 한다.

⑧연구추진부서의 장은 주관연구기관의 용역연구비 집행을 점검하여야 한다.

제19조(용역연구비 지급절차) ①용역연구비 중 선금의 지급절차는 다음 각 호와 같다.

1. 주관연구기관의 장은 선금 청구시 별지 제6호서식에 의한 선금지급신청서에 선금사용계획서, 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령에 의한 증권 또는 보증서를 첨부하여 검역본부장에게 제출하여야 한다. 다만, 제17조 제1항의 각호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 제1호의 단서에 해당하는 경우에는 별지 제7호서식에 의한 선금지급보증각서를 검역본부장에게 제출하여야 한다.

3. 검역본부장은 제1호 및 제2호에 의하여 제출된 서류가 선금지급요건 등과 부합하는지를 검토ㆍ확인한 후 주관연구기관의 장에게 선금을 지급한다.

②용역연구비 중 잔금의 지급절차는 다음 각 호와 같다.

1. 주관연구기관의 장은 별표1의 연구사업평가지침이 정한 연구결과 또는 연차실적․계획서 평가가 완료된 후 별지 제8호서식에 의한 잔금신청서를 검역본부장에게 제출하여야 한다.

2. 검역본부장은 용역연구비 사용실적, 평가 및 검사완료 결과를 확인한 후 문제가 없을 때에는 주관연구기관의 장에게 잔금을 지급한다.

제20조(용역연구 계약의 변경) ①검역본부장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 용역계약을 변경할 수 있다.

1. 주관연구기관의 장으로부터 주관연구책임자의 사망ㆍ사직 등 불가피한 사유로 인한 연구책임자의 변경, 세부과제연구책임자의 변경, 계약금액 및 계약 기간 등 계약 내용에 대한 변경의 요청이 있는 경우

2. 계속과제에 대하여 검역본부의 예산사정, 당해과제의 연차실적ㆍ계획서 평가결과 등에 따라 계약의 변경이 필요한 경우

3. 주관연구기관의 변경이 있는 경우

4. 기타 검역본부장이 계약의 내용을 변경하는 것이 필요하다고 인정하는 경우

② 검역본부장이 용역계약을 변경한 때에는 주관연구기관의 장에게 그 내용을 통보하여야 한다.

③ 주관연구기관의 장은 연구개발비 중 인건비, 일반관리비를 변경할 수 없고, 회의비는 감액만 가능하다. 연구개발비는 용역연구개발비의 산정기준에 따라 검역본부장의 사전승인사항과 자체 기관승인사항으로 구분하고 검역본부장의 사전승인사항의 경우에는 별지 제9호서식에 의한 용역연구사업 변경승인요청서를 검역본부장에게 제출하여 미리 변경승인을 얻어야 한다. 이 때 변경 승인 요청은 계약 종료 30일 전까지 하여야 한다.

제21조(용역연구 계약의 해제 등) ①검역본부장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

1. 주관연구기관이 계약내용을 위반하였을 경우

2. 주관연구기관이 연구과제의 수행을 중도에 포기한 경우

3. 주관연구기관 및 주관연구책임자의 태만으로 약정한 기일내에 연구과제를 완성할 가능성이 없다고 판단되었을 경우

4. 검역본부장의 승인 없이 본 계약에 의한 권리의무를 제3자에게 양도하거나 본 사업의 일부를 제3자에게 하청하였을 경우

5. 진도관리 평가결과 연구중단으로 결정되는 경우

6. 연차실적ㆍ계획서 평가결과 연구중단으로 결정되는 경우

7. 결과평가의 보완요구에 의하여 주관연구기관이 제출한 연구보고서의 내용이 보완요구에 위배되는 경우

8. 주관연구기관이 연구수행에 있어서 최선을 다했으나 연구진행이 중단상태가 되어 소정의 연구성과를 기대하기 곤란한 경우 또는 사업을 완수할 능력이 없어졌다고 인정될 경우

9. 연구개발목표가 타 기술개발 수행에 의하여 성취되어 동 기술개발을 계속할 필요성이 인정되지 아니한 경우

10. 기타 검역본부의 예산사정 또는 검역본부장이 인정하는 중대한 사유로 과제의 계속적인 수행이 불가능하거나 필요성이 없다고 인정할 경우

②제1항제1호 내지 제4호의 어느 하나에 의하여 계약이 해제되었을 때에는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 용역연구비 전액을 회수한다.

③제1항제5호 내지 제10호의 어느 하나에 의하여 계약이 해지되었을 때에는 실제 사용한 금액을 제외한 잔여 용역연구비를 회수한다.

④검역본부장은 주관연구기관 또는 주관연구책임자의 귀책사유로 계약이 해제된 때에는 제28조에 따른 제재조치를 할 수 있다.

제22조(진도관리) ①연구추진부서의 장은 연구과제별로 연구진행사항 등에 대하여 진도관리를 하여야 한다.

②주관연구기관의 장은 연구과제별로 당해 연구기간의 2분의 1이 되는 시점에서 별지 제10호서식에 의한 진도보고서를 작성하여 검역본부장에게 제출하여야 한다. 다만, 검역본부장은 총 연구기간이 6개월 이하일 경우, 진도보고서 제출을 생략할 수 있다.

③검역본부장은 평가위원회의 진도평가가 필요한 연구과제에 대하여는 분야별로 평가위원회를 구성하여 평가할 수 있다.

④평가위원회는 별표1의 연구사업평가지침에 따라 진도평가를 하고, 그 결과를 검역본부장에게 제출하여야 한다.

⑤검역본부장은 평가위원회의 진도평가결과 연구중단 의견으로 제시된 과제에 대하여는 그 중단여부를 결정한다.

⑥연구중단으로 결정된 과제의 주관연구책임자의 장은 중단 이전까지 수행한 연구결과를 최종보고서 형식으로 작성하여 제출하여야 한다.

제23조(연차실적․계획 평가) ①계속과제 용역연구를 수행하는 주관연구기관의 장은 당해연도 계약종료일 20일 이전까지 연구과제별로 별지 제3호서식에 의한 용역연구사업연차실적ㆍ계획서를 작성하여 검역본부장에게 제출하여야 한다.

②검역본부장은 제출받은 연차실적ㆍ계획서에 대하여 평가위원회를 구성하여 평가하여야 한다.

③평가위원회는 별표1의 연구사업평가지침에 따라 평가를 하고, 그 결과를 검역본부장에게 제출하여야 한다.

④주관연구기관의 장은 연차실적ㆍ계획평가 결과 및 주관부서의 보완의견을 반영하여 연구과제별로 별지 제3호서식에 의한 용역연구사업 연차실적계획서(전자파일)의 연구사업관리시스템 업로드 및 그 결과물을 검역본부장에게 제출하여야 한다.

제24조(연구결과 제출 및 평가) ①주관연구기관의 장은 연구사업의 종료전 20일 이전까지 연구과제별로 별지 제12호서식에 의한 용역연구사업연구결과보고서(전자파일)의 연구사업관리시스템 업로드 및 그 결과물을 검역본부장에게 제출하여야 한다.

②검역본부장은 제1항의 용역연구사업연구결과보고서에 대하여 평가위원회를 구성하여 평가하여야 한다.

③평가위원회는 별표1의 연구사업평가지침에 따라 평가를 하고, 그 결과를 검역본부장에게 제출하여야 한다.

④계속과제는 연구기간 최종 종료 시 연구결과 평가를 실시한다.

⑤검역본부장은 제2항 및 제3항의 규정에 불구하고 정책적 지원과제 등에 대하여는 평가방법을 별도로 정할 수 있다.

제25조(용역연구결과 검사) ①주관연구기관의 장은 별지 제13호서식에 의한 용역연구비사용실적보고서, 연구결과보고서 또는 연차실적ㆍ계획서를 연구추진부서의 장에게 제출하여야 한다.

②연구추진부서의 장은 계약만료일로부터 14일 이내에 연구결과 검사를 완료하고, 별지 제15호서식에 의한 용역연구사업검사조서 및 제16호서식에 의한 용역연구비사용실적보고서검토결과서를 작성하여 계약담당공무원에게 지체없이 통보하여야 한다.

③검역본부장은 주관연구기관이 제출한 용역연구비사용실적에 대하여 사후검증을 실시하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 용역연구비를 환수할 수 있다.

1. 허위 기타 부정행위에 의하여 연구비를 지급받은 때

2. 연구비를 사용목적에 위반하여 부당하게 집행하였을 때

3. 용역연구비 사용실적보고를 하지 아니하거나 허위로 한 때

4. 연구결과 실적이 표절 또는 허위로 인정될 때

5. 연구책임자가 연구 수행 중 검역본부장이 정한 의무사항을 준수하지 않았을 때

④검역본부장은 제3항의 규정에 의하여 용역연구비를 환수하고자 하는 경우 주관연구기관의 장에게 환수사실을 통보하고 소명의견을 제출받는 조치를 취하여야 한다.

⑤용역연구비 환수통보를 받은 주관연구기관은 통보일로부터 1개월 이내에 해당현금을 검역본부에 납부하여야 한다.

⑥검역본부장은 용역연구비 환수조치에 따른 납부에 불응하는 기관에 대해서는 해당기관의 공개 및 기타 행정 행위에 의한 제재조치를 취할 수 있다.

제26조(연구실적 보고 및 발표) ①연구과제의 수행을 완료한 주관연구책임자는 연구사업결과보고서, 초록, 별지 제17호서식에 의한 자체평가의견서 및 별지 제18호서식에 의한 연구결과활용계획서와 그 전자문서를 검역본부장에게 제출하여야 한다.

②주관연구기관의 장 또는 주관연구책임자가 용역연구결과를 대외적으로 발표할 경우에는 사전에 검역본부장의 승인을 받아야 하며, 검역본부의 용역연구개발사업에 의해 지원받았다는 사실을 명시하여야 한다.(별지 제4호 서식 참고)

③검역본부는 필요한 경우 연구결과의 발표를 제한하거나 보안조치를 할 수 있다.

④주관연구기관의 장은 최종보고서, 초록 또는 그 전자문서를 검역본부장이 정한 연구기관, 대학 등에 배포 또는 공개하여야 한다.

⑤검역본부장은 제출받은 결과보고서 및 그 초록의 데이터베이스를 구축하여 관련연구기관, 산업계, 학계 등에서 활용할 수 있도록 공개하여야 한다. 다만, 국가의 보안유지가 필요한 연구개발과제이거나 검역본부장이 비공개할 필요가 있다고 판단하는 연구사업결과는 예외로 한다.

제27조(연구성과 추적평가관리) ①연구추진부서의 장은 연구결과 평가 종료 후 연구실적 발표 및 연구성과 활용 촉진 등에 관하여 성과관리를 하여야 한다.

②주관연구책임자는 용역연구사업 종료 후 연구계획서에 명시된 연구성과의 이행여부에 대하여 주관부서의 연구성과 관리에 따라야 한다.

③연구추진부서의 장은 용역연구사업 결과를 시책의 활용방안을 강구하고, 연구과제 종료 익년부터 3년간 매12월에 별지 제19호서식에 의한 연구사업성과보고서를 검역본부장에게 제출하여야 한다.

④검역본부장은 3년차에 제출받은 연구사업성과보고서에 대하여 평가위원회를 구성하여 평가할 수 있다.

⑤평가위원회는 별표1의 연구사업평가지침에 따라 평가를 하고, 그 결과를 검역본부장에게 제출하여야 한다.

⑥검역본부장은 평가위원회의 평가결과가 부적합인 추진부서의 장에 대하여는 활용촉진에 필요한 조치를 할 수 있다.

제28조(용역연구과제 제재조치) ①검역본부장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주관연구책임자에 대하여는 심의회를 통해 용역연구사업 참여를 제한할 수 있으며, 세부기준은 별표 5와 같다.

1. 용역연구비를 사용용도 이외의 목적에 사용한 경우

2. 용역연구사업연구결과보고서, 용역연구비사용실적보고서를 기한내에 제출하지 아니하거나 진도관리에 응하지 아니한 경우

3. 진도관리 평가결과가 중단으로 결정된 경우

4. 연차실적․계획 평가결과가 중단으로 결정된 경우

5. 연구결과 평가가 불량한 과제로 결정된 경우

6. 연구성과 추적평가시 3년차 연구사업성과보고서에 의한 평가결과가 부적합으로 결정된 경우

7. 과제수행을 중도포기하거나 용역연구비 반납에 응하지 아니한 경우

8. 정당한 절차를 거치지 아니하고 연구내용을 누설하거나 유출한 경우

9. 기타 이 규정에서 정하는 중요한 사항을 위반한 경우

②검역본부장은 주관연구책임자가 수행한 과제 중 2과제 이상이 제1항 각호의 어느 하나에 해당하거나 또는 다른 행정기관에서 제재조치를 받은 경우에는 최대 5년까지 용역연구 참여를 제한 할 수 있다.

③검역본부장은 제1항 및 제2항의 규정에 의한 제재조치를 취한 경우에는 관계 중앙행정기관 및 관련 기관에 그 제재내용을 통보한다.

④검역본부장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주관연구기관 및 주관연구책임자에 대하여는 경고 조치를 할 수 있다.

1. 제1항의 규정에 불구하고 정당한 사유가 인정되는 경우

2. 기타 별표 5에서 정하는 경우

제29조(연구개발에 따른 결과물의 소유) ①연구개발사업의 수행결과로 얻어지는 특허, 실용 등의 산업재산권 및 연구보고서의 판권 등 일체의 권리는 검역본부의 소유로 한다.

②연구개발사업의 수행결과로 얻어지는 직․간접적인 연구성과물은 검역본부의 소유로 한다. 단, 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 협약서상에 별도로 명시될 경우 이에 따른다.

③검역본부장은 국가 안보상 필요한 경우 또는 연구개발결과를 공익적 목적에 활용하기 위하여 필요한 경우에는 주관연구기관의 장과 협의하여 제1항의 규정에 의하여 취득한 결과물을 다른 적정한 기관에게 양여할 수 있다.

제30조(타 법령 준용) 이 규정에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 국가를당사자로하는계약에관한법률 및 국가연구개발사업의관리등에관한규정 등을 준용한다.

부  칙(2013. 12. 9)

제1조 (시행일) 이 규정은 2013년 12월 9일부터 시행한다.

제2조 (재검토기한) 이 훈령은 2016년 12월 9일까지 “「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)” 제7조제3항 제2호에 따라 재검토하여야 한다.

1. 별표 목록

[별표 1]. 용역연구사업평가지침

[별표 2]. 용역연구사업비산정및정산지침

[별표 2-1]. 비목별연구비계상 및 정산기준

[별표 3]. 용역연구비 변경기준

[별표 4]. 용역연구계약체결에따른구비서류

[별표 5]. 제제 조치 세부기준

[별표 1]

용역연구사업평가지침

제1장  총칙

1.(목적) 이 지침은 용역연구사업관리규정에 의한 용역연구사업의 제안과제평가, 주관기관 선정평가, 진도관리평가, 결과평가 및 성과평가 등에 대하여 세부적인 사항을 규정함으로써 평가업무의 객관성, 전문성, 공정성을 확보함을 목적으로 한다.

2.(평가의 구분) 용역연구사업의 평가는 다음 각 목과 같이 구분한다.

가. “제안과제평가” : 연구사업 수요조사 또는 공모를 통하여 제출받은 제안과제를 평가

나. “주관연구기관 선정평가”: 연구사업 주관연구기관 선정을 위한 평가

다. “진도관리평가”: 연구과제의 적절한 진행 및 수행정도를 평가

라. “연차실적ㆍ계획평가”: 계속과제의 차기년도에 계속 추진을 위하여 당해연도 추진실적 및 차기년도 사업추진계획에 대하여 평가

마. “결과평가”: 연구수행한 최종결과를 평가

바. “성과평가”: 연구성과 활용을 추적평가

3.(평가방법) 연구사업의 평가는 다음 각 호의 어느 하나에 의해 혹은 병행하여 실시할 수 있다.

가. 서류 검토에 의한 서면평가

나. 주관연구책임자의 발표내용과 질의응답 결과에 의한 공개발표평가

다. 현장방문에 의한 현장실사평가

4.(평가방식) ①평가항목 및 배점은 평가 종류별로 구분하여 절대평가를 원칙으로 한다.

②평가는 평가항목에 따라 가중치를 부여할 수 있다.

③평가위원별 점수는 항목별 가중치에 항목별 점수를 곱하여 총점을 산출하고, 과제별 평가점수는 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수의 합을 산술평균하여 산출한다.

제2장  제안과제 심의 및 평가

5.(제안과제평가) ①연구추진부서의 장은 제안할 과제에 대하여 연구과제제안서(RFP, 별지 제1호서식) 및 다음 각 호를 작성하여 제출한다.

가. 연구과제 내용의 부 및 과 업무와의 적합성

나. 연구과제의 수행 필요성

다. 연구성과 계획 및 성과물의 현장 활용성

②외부심의회에서는 제6조 규정에 따라 연구과제제안서평가서(별지 제1-1호서식) 및 ①항의 제출자료에 의하여 과제평가(비공개 서면평가)를 실시하고, 그 결과를 검역본부장에게 제출한다.

③동식물위생연구부장은 내부심의회를 개최하여, 외부심의위원회의 평가결과, 내부심의위원회 평가결과, 사업추진방향 및 예산범위 등을 감안하여 과제를 최종 선정한다.

제3장 주관연구기관 선정평가

6.(주관연구기관 선정평가) ①평가위원회에서는 제9조규정에 의하여 제출된 용역연구사업신청서에 대하여 주관연구기관 선정평가를 실시한다.

②주관연구기관 선정평가는 절대평가방식에 의한 서면 혹은 공개발표평가를 원칙으로 하고, 필요한 경우 현장실사평가를 추가로 실시할 수 있다.

②검역본부 계약을 위한 평가 종합점수는 서면 혹은 공개발표평가(별지1-2호)90%, 정책부합성 평가(별지1-9호) 10%로 반영하여 산출한다. 조달청 계약을 위한 평가 종합점수는 서면 혹은 공개발표평가 및 입찰가격평가(별지1-2호) 90%, 정책부합성 평가(별지 1-9호) 10%를 반영하여 산출한다.

③공개발표평가 또는 현장실사평가대상은 검역본부장이 따로 정한다. 단, 현장실사평가는 적합여부를 평가한다.

④현장실사평가를 추가로 실시하는 경우 주관연구기관 선정은 현장실사평가에서 모두 적합인 경우 서면평가와 공개발표평가의 최고 평균점수자에 의한다.

⑤평균점수가 동점일 경우 공개발표평가 평균점수가 상위인 과제를 우선순위로 한다.

⑥주관연구기관선정평가를 위한 평가위원회 구성시 외부평가위원이 내부평가위원보다 많아야 한다.

가.(서면평가) (1)평가위원회는 용역연구계획서평가서(별지 제1-2호서식)에 의하여 사업추진의 필요성, 사업내용의 타당성, 과제의 실현가능성 등의 평가항목에 따라 평가를 실시한다.
(2)서면평가 점수는 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 평가위원의 평가점수를 산술평균하여 산출하고, 평균점수가 75점 미만인 경우에는 탈락 처리한다.

나.(공개발표평가) (1)평가위원은 주관연구책임자가 신청연구과제에 대하여 발표하고 이에 대한 질의응답을 거친 후, 연구계획서평가서에 의하여 평가를 실시한다.

(2)공개발표 평가점수는 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 평가위원의 평가점수를 산술평균하여 산출하고, 평균점수가 75점 미만인 경우에는 탈락 처리한다.

다.(현장실사평가) (1)가목의 서면평가결과 또는 나목의 공개발표평가결과 최고점수를 받은 기관에 대하여 우선 현장실사평가 대상기관으로 선정할 수 있다.
(2)연구추진부서의 장은 담당자를 지정하여 현장실사평가를 실시한다.
(3)현장실사담당자는 현장에 출장하여 당해 연구과제를 수행하기 위한 현장의 제 조건을 파악하고, 연구책임자의 설명을 참조하여 현지실사점검표(별지 제1-3호서식)에 따라 연구수행 적합여부를 평가한다.
(4)우선 현장실사평가 대상기관이 현장실사에서 부적합으로 판정될 경우, 차득점 대상기관을 대상으로 현장실사평가를 실시한다.

7.(가산점 부여)①검역본부장은 주관연구기관 선정평가 시 주관연구책임자가 최근 2년동안 검역본부 연구과제를 수행한 결과 연도별 최우수(최고점) 완결과제로 선정된 경우 가산점을 부여할 수 있다.

②가산점은 주관기관 선정 평가서의 가산점 해당항목에 5점을 가산한다.

제4장  진도관리평가

8.(진도관리평가) ①진도관리평가는 절대평가방식에 의한 공개발표평가를 원칙으로 하고 필요한 경우 서면평가, 현장실사평가 등으로 대체할 수 있다.

②평가위원회는 진도관리평가서(별지 제1-4호서식)에 의하여 연구수행의 타당성, 연구수행 및 결과의 완성도 예상, 예산운영의 적정성 등의 평가항목에 따라 평가한다.

9.(연차실적 ․ 계획평가) ① 제23조 규정에 의하여 제출된 계속과제의 용역연구사업 연차실적ㆍ계획 평가를 실시한다.

연차실적ㆍ계획평가는 절대평가방식에 의한 공개발표평가를 원칙으로 하고, 필요한 경우 서면평가로 대체할 수 있으며, 현장실사평가 등을 추가로 실시할 수 있다.

연구사업연차실적ㆍ계획서평가서(별지 제1-5호서식)에 의하여 연구수행의 타당성, 연구수행 및 결과의 완성도 예상, 예산운영의 적정성 등의 평가항목에 따라 평가한다.

④연차실적ㆍ계획평가 평가점수는 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 평가위원의 평가점수를 산술평균하여 산출한다.

⑤검역본부장은 평가점수가 75점 미만인 과제에 대해서는 과제 중단여부를 결정한다.

⑥과제중단으로 결정될 경우, 해당과제 주관연구책임자는 2년 이내의 기간동안 농림축산검역본부 용역연구사업 참여가 제한되며, 검역본부장은 중앙행정기관 및 관련기관에 제재내용을 통보한다.

제5장  연구결과 평가

10.(연구결과 평가) ①연구결과 평가는 절대평가방식에 의한 공개발표평가를 원칙으로 한다.

②발표자는 연구과제 책임자를 원칙으로 하고, 연구책임자의 부재시 세부과제책임자 또는 참여연구원이 그 발표를 대신할 수 있다.

③평가위원회는 연구결과평가서(별지 제1-6호서식)에 의하여 연구수행 타당성, 연구결과의 완성도, 연구성과활용성 등의 평가항목에 따라 평가한다.

④평가점수는 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 평가위원의 평가점수를 산술평균하여 산출평가점수가 75점 미만 과제에 대해서는 재평가를 실시한다.

11.(연구결과 재평가) ①연구결과 재평가는 절대평가방식에 의한 공개발표 평가를 원칙으로 한다.

②연구결과재평가서(별지 제1-7호서식)에 의하여 연구수행 타당성, 연구결과의 완성도, 연구성과활용성, 평가결과보완정도 등 평가항목에 따라 평가한다.

③재평가결과 평가점수가 75점 미만에 해당하는 연구과제는 제재 심의 대상과제로 분류하고, 심의회는 해당과제의 연구책임자에 대하여 다음 각 호 중의 하나에 해당하는 제재를 과반수 찬성에 의해 의결한다.

가. 2년이내 기간동안 농림축산검역본부 용역연구사업의 참여를 제한하고, 중앙행정기관 및 관련기관에 제재내용을 통보한다.

나. 향후 수행하고자 하는 용역연구과제에 대해 연구비를 제한한다.

제6장 연구성과 평가

12.(성과 평가) ①제27조의 규정에 의하여 제출된 연구사업성과보고서에 대하여 평가를 실시한다.

②주관연구기관의 장은 연구사업성과보고서 제출시 정책 반영, 전문학술지 게재 논문 또는 특허출원 등의 실적과 증빙자료 및 연구결과의 활용성과를 구체적으로 제시하여야 한다.

③연구성과평가는 서면평가를 원칙으로 한다.

④연구사업성과보고서평가서(별지 제1-8호서식)에 의하여 연구목적에 대한 적합성, 연구성과물의 활용 적합성 등 평가항목에 따라 평가한다.

⑤3년차 평가결과, 평가위원회의 과반수에 의해 부적합으로 판정된 과제의 주관연구책임자는 3년이내의 기간동안 농림축산검역본부 용역연구사업 참여가 제한되며, 검역본부장은 중앙행정기관 및 관련기관에 제재내용을 통보한다.

[별표 2]

연구사업비산정및정산지침

1.(목적) 이 지침은 용역연구사업관리규정에 의한 연구사업비의 산정, 사용, 관리 및 정산 등에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

2.(용어정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 목과 같다

가. “비목”이라 함은 연구개발비 중 인건비, 경비, 일반관리비를 말한다.

나. “세목”이라 함은 비목의 세부항목으로서 인건비비목 내의 책임연구원, 연구원, 연구보조원, 보조원을 말하고, 경비비목내의 여비(국내여비, 국외여비), 유인물비, 전산처리비, 시약 및 연구용 재료비, 회의비, 임차료, 교통통신비, 감가상각비 등을 말한다.

다. “정산”이라 함은 주관연구기관의 장이 보고한 연구개발비 사용실적 및 세부 집행내역에 대하여 실시하는 일체의 회계검사 행위를 말한다.

라. “사용잔액”이라 함은 당해과제 종료 후 연구개발비를 사용하고 남은 금액을 말한다.

마. “불인정액”이란 검역본부장이 주관연구기관의 장으로부터 보고 받은 연구개발비 사용실적을 검토한 결과 계약사항을 위반하여 부적절하게 집행한 금액을 말한다.

바. “정산잔액”이라 함은 사용잔액, 불인정액, 발생이자를 말한다.

사. “자체회계감사의견서”라 함은 주관연구기관이 검역본부에 제출한 용역연구비사용실적에 대한 의견서를 말한다.

3.(용역연구비 산정) 용역연구비는 인건비, 경비, 일반관리비로 구분하고 별표 2-1 비목별연구비계상및정산기준에 따라 산정한다.

4.(용역연구비 사용관리) ①주관연구기관의 장은 용역연구비에 대하여 과제별로 관리기록부를 비치하고, 세목별로 구분하여 출납상황을 기록․관리하여야 한다.

②주관연구기관의 장은 연구비 지급에 관한 결의서, 영수증서, 견적서․청구서, 계약서․검사조서 등 지급내용을 증명하는데 필요한 증빙서류를 구비하여야 한다.

③주관연구기관의 장은 연구비 예치운용증서(통장), 장부, 증빙서류 등을 당해용역과제 연구종료 후 최소 5년간 보존하여야 한다.

④주관연구기관이 2개 이상의 검역본부 용역연구과제를 동시에 수행하는 경우 통합하여 연구비를 관리할 수 있다. 다만, 회계관리 사항은 과제별로 구분하여야 한다.

5.(용역연구비 변경) ①용역연구비 변경에 관한 사항은 별표3 용역연구과제 변경기준에 따르며, 사전승인사항의 변경은 계약종료일 30일 전까지 요청할 수 있다.

②주관연구기관의 장은 연구계획서의 참여연구원에 대하여 변동이 있는 경우 기관내부결재를 받아 용역연구비사용실적보고 시 검역본부에 제출하여야 한다.

6.(용역연구비 사용실적보고) ①주관연구기관의 장은 용역연구비사용실적보고서를 작성하여 계약종료일 전까지 다음 각 목의 자료를 검역본부에 제출하여야 한다.

가. 총 용역연구비 사용실적 현황 1부.

나. 세부과제 용역연구비 사용실적보고 각 1부.

다. 비목별사용내역서 각 1부

라. 자체회계검사의견서 각 1부.

마. 증빙서류 사본 각 2부.

바. 잔금신청서 1부(세부과제 잔금신청서 각 1부)

사. 세금계산서 1부

②용역연구추진부서의 장은 주관연구기관의 장이 보고한 용역연구비사용실적에 대하여 별표2-1 연구비비목별계상및정산기준에 따라 정산을 실시하고, 부당사용금액이 있는 경우에는 이를 인정하지 아니한다.

③추진부서의 장은 주관연구기관의 장이 보고한 용역연구비사용실적에 대하여, 특별한 사유가 없는 한 받은 날로부터 14일 이내에 계약담당공무원에게 제출하여야 한다.

[별표2-1]

비목별연구비 계상 및 정산 기준

가. 용역연구개발비의 산정 및 정산

○ 용역연구비는 기획재정부의 ｢예정가격 작성기준(회계예규)｣에 따라 비목을 인건비, 경비, 일반관리비로 구분하여 다음 기준에 따라 산정 및 정산함

[인건비]

가) 계상기준

◦ 인건비는 해당 연구개발과제에 직접 참여하는 연구원의 급료를 말한다.

◦ 연구원은 기획재정부 회계예규에 의거하여 사업공고 시 별도로 공지한 기준에 따라 책임연구원, 연구원, 연구보조원, 보조원 등급으로 구분하여 연구원별 인건비 지급기준과 참여율에 따라 연구기간동안의 인건비를 계상한다.

<검역본부 용역연구개발과제 인건비 기준>

◦ 해당 과제의 참여연구원은 타부처에서 추진하고 있는 용역과제를 포함하여 참여율 100%를 초과할 수 없다.

․아르바이트생(설문조사, 단순자료 입력 등)은 보조원에 준하며, 일일단가는 [보조원 인건비단가]이하로 하고, 월 22일을 초과할 수 없다.

- 소프트웨어 개발용역, 시스템 개발 및  DB 구축 연구는 ｢소프트웨어산업진흥법｣이 정하는 기준에 따라 원가계산을 할 수 있다.

구 분	책임연구원	연구원	연구보조원	보조원
대 학	전임강사 이상	박사과정 이상	석사과정 이상	학부학생
국공립연구기관	5급 상당이상 직원	7급 상당이상 직원	9급 상당이상 직원	기능직
출 연 기 관 생산기술연구조합 민간연구소 기업부설연구소	◦대학 이상의 과정이수 후 해당분야 15년 이상의 경력소유자 ◦석사학위 취득후 해당분야 12년 이상의 경력 소유자 ◦박사학위 또는 기술사자격 취득 후 5년 이상의 경력소유자	◦대학 이상의 과정이수 후 해당분야 7년 이상의 경력소유자 ◦석사학위 취득 후 해당분야 5년 이상의 경력소유자 ◦박사학위 또는 기술사자격 취득자	◦대학 이상의 과정이수 후 해당분야 2년 이상의 경력소유자	◦책임급, 선임급, 원급 요건에 해당되지 않는 연구원
공 통 사 항	◦기타 동등 이상의 경력 소유자	◦기타 동등 이상의 경력 소유자	◦기타 동등 이상의 경력 소유자	◦기타 동등 이상의 경력 소유자

나) 사용 및 정산기준

◦ 연구개발과제계획서상의 참여연구원의 실제 참여 여부 및 인건비 수령인의 동일여부 확인

◦ 인건비 지급 가능여부 (참여연구원 변경 및 아르바이트생 등)

◦ 정산시 증빙자료
지출결의서, 계좌이체영수증, 참여연구원변경통보서, 인건비지급예정확인서(잔금) 및 수행기관내부결재 공문 사본(해당시)

※ 불인정액

- 연구계획서상에 계상되지 않은 연구원의 인건비

- 참여연구원에게 계좌이체 하였거나 지급한 사실에 대하여 구체적인 증빙서류가 없는 경우

- 산정기준 초과금액

[경 비]

경비는 해당 연구개발과제에 직접 필요한 다음 내용의 여비, 유인물비, 전산처리비, 시약 및 연구용 재료비, 회의비, 임차료, 교통통신비, 감가상각비를 말한다.

○ 여비

가) 계상기준

◦ 여비는 다음 기준에 따라 계상한다.

- 여비는 ｢공무원여비규정｣에 따라 국내여비와 국외여비로 구분하여 계상하되 이를 인정하지 아니하고는 계약목적을 달성하기 곤란한 경우에 한하며 관계공무원의 여비는 계상할 수 없다.

- 다만, 국내여비는 시외여비만을 계상하되 연구상 필요불가피한 경우 외에는 월 15일을 초과할 수 없으며, 국외여비는 세부과제당 1인 1회에 한정하며 최대 2인 이내, 체제비는 200만원 이내로 한다.

나) 사용 및 정산기준

◦ 연구개발과제와 직접적인 관련성 집행여부

◦ 출장자는 참여연구원에 한함

◦ 자체기관승인사항과 동일여부 확인

◦ 계약액 20%이상 증액여부 확인 및 사전승인요청사항 확인

◦ 정산시 증빙자료
지출결의서, 출장신청서, 왕복교통영수증 및 숙박영수증, 계좌이체영수증, 국외출장시 현지교통비영수증, 고속도로 왕복통행 영수증, 출장지에 소재한 주유소 신용카드매출전표, 주차영수증 등

※ 불인정액

- 사전 승인없이 여비의 20%이상을 증액하여 사용한 경우

- 사전 승인 없이 국외출장지, 출장자 및 출장목적 등을 변경하여 사용한 경우

- 출장신청서가 없는 경우

- 체제비가 200만원을 초과하는 경우

- 등급별 기준단가 초과금액

- 기타 출장을 증빙할 서류가 없는 경우

○ 유인물비

가) 계상기준

◦ 유인물비는 해당연구와 직접 관련있는 인쇄, 복사, 인화, 슬라이드 제작비, 문헌복사비(인지대 포함), 보증보험료, 번역료, 수수료, 도서구입, 수입인지, 사무용품비 등을 말한다.

◦ 도서구입비는 세부과제당 100만원 이하로 하고, 100만원 초과시 검역본부장의 사전승인을 받아야 함

나) 사용 및 정산기준

◦ 연구개발과제와 직접적인 관련성 집행여부

◦ 인쇄, 복사, 인화, 슬라이드 제작비, 문헌복사비(인지대 포함), 보증보험료, 번역료, 수수료, 도서구입, 수입인지, 사무용품비 등

◦ 번역료는 한국외국어대 통역번역센터요율표 적용

◦ 정산시 증빙자료
지출결의서, 세금계산서, 거래내역서, 번역관련 견적서 및 계약서 사본

※ 불인정액

- 사전승인 없이 100만원을 초과하여 도서를 구매한 경우

- 사전류, 전집류 등 해당사업과 관련 없는 도서의 구입 및 내역이 없는 경우

- 번역료 지급 시 일정규모 이상의 자격능력을 보유한 업체와 사전 견적서와 계약체결 후 관련서류(번역내용 및 페이지당 단가 명시 영수증)를 첨부하지 아니한 경우

○ 전산처리비

가) 계상기준

◦ 전산처리비는 해당연구와 관련된 자료처리를 위한 컴퓨터 사용료 및 부대비용 등을 말한다.

◦ 전산 관련 소모품(토너, 드럼 등)을 포함한다.

나) 사용 및 정산기준

◦ 연구개발과제와 직접적인 관련성 여부

◦ 정산시 증빙자료

지출결의서, 세금계산서, 거래내역서

※ 불인정액

- 한글, 오피스 등의 자산가치가 있는 소프트웨어 구입비

- 컴퓨터, 모니터, 타블렛, CD-ROM, 하드디스크, RAM, 플래시메모리 등
자산가치가 있는 하드웨어 구입비

- 전산용품 A/S비

○ 시약 및 연구용 재료비

가) 계상기준

◦ 시약 및 연구용 재료비는 실험실습에 필요한 해당 비용으로 내구연수 1년 이하의 연구용 재료비 등을 말한다.

◦ 피험자보상비, peer review 판독료를 포함한다.

나) 사용 및 정산기준

◦ 연구개발과제와 직접적인 관련성 여부

◦ 피험자 보상비, peer review 판독료 등은 객관적인 지급기준을 마련 후 지급하고 증빙서류 제출

◦ 시약 및 연구재료비는 과제 종료일 30일 이전에 구입하여 연구에 활용해야 함

◦ 정산시 증빙자료

지출결의서, 세금계산서, 거래내역서

※ 불인정액

- 해당연구와 관련 없는 시약 및 연구용 재료비

- 자산가치가 있는 실험 기구 장비 구입

- 실험기자재의 수리(부품)구입

- 과제 종료일 30일 전에 원인행위가 없는 시약 및 연구재료비

○ 회의비

가) 계상기준

◦ 회의비는 해당 연구내용과 관련하여 자문회, 토론회, 공청회, 평가회 등을 위해 소요되는 경비 등을 말한다.

◦ 회의비는 총 용역연구비의 10% 이하로 계상하되, 회의가 주된 연구이거나 검역본부장이 인정하는 연구인 경우에는 회의비를 총 용역연구비의 30% 이하로 계상한다.

◦ 학회 참가비, 논문게재비, 통역료 등 관련비용을 포함한다.

나) 사용 및 정산기준

◦ 연구개발과제와 직접적인 관련성 집행여부

◦ 회의비수당 등은 주관연구기관의 규정에 따라 지급하되 회의수당 10만원 이하, 자문료 20만원 이하로 함

◦ 회의수당 집행 시에는 별지11호에 따라 회의록을 작성하고 자필서명(도장) 필요

◦ 자문료 집행 시에는 자문받은 내용을 작성하고 자필서명(도장) 필요

◦ 통역료는 한국외국어대 통역번역센터요율표 적용

◦ 정산시 증빙자료

지출결의서, 회의록, 세금계산서, 투고논문전문, 논문게재 예정증명서,학회등록비영수증, 학회발표논문초록(혹은 학회관련 브로셔), 통역관련 견적서 및 계약서 사본

※ 불인정액

- 회의비 집행 후 회의록이 없는 경우

- 회의록에 회의수당을 지급받는 자의 자필서명(도장)이 없는 경우

- 자문내용이 없거나 자필서명(도장)이 없는 경우

- 전문학술지 정기구독료, 시간외근무수당, 학회참가비, 학회가입비 및 연회비, 참여연구원 교육비 등

- 참여연구원에게 지급된 회의수당 및 자문료

- 통역료 지급 시 일정규모 이상의 자격능력을 보유한 업체와 사전 견적서와 계약체결 후 관련서류(통역내용 및 단가 명시 영수증)를 첨부하지 아니한 경우

- 산정기준 초과금액

○ 임차료

가) 계상기준

◦ 임차료는 연구내용에 따라 특수실험실습기구를 외부로부터 임차하거나 혹은 공청회 등을 위한 회의장 사용을 하지 아니하고는 연구목적을 달성할 수 없는 경우에 한하여 계상한다.

나) 사용 및 정산기준

◦ 연구내용에 따라 특수실험기구를 외부로부터 임차하거나 공청회 등을 위한 회의장 사용을 하지 아니하고는 계약목적을 달성할 수 없는 경우에만 인정

◦ 정산시 증빙자료

지출결의서, 세금계산서, 거래내역서

※ 불인정액

- 해당연구와 관련 없는 임차료 등

○ 교통통신비

가) 계상기준

◦ 교통통신비는 해당 연구내용과 직접 관련된 시내교통비, 전신전화사용료, 우편, 각종 수수료, 택배비 등을 말한다.

나) 사용 및 정산기준

◦ 연구개발과제와 직접적인 관련성 집행여부

◦ 시내교통비(1일 20,000원)

◦ 전신전화사용료는 설문조사 등의 연구수행을 위해 개설․사용한 경우에만 인정

◦ 정산시 증빙자료
지출결의서, 출장신청서, 계좌이체영수증, 우편, 택배 및 각종 수수료 영수증

※ 불인정액

- 국내여비와 중복집행한 경우

- 전기료, 수도료, 가스료, 기관공통전화, 전용선사용료, 개인용 휴대폰 사용료 등

○ 감가상각비

가) 계상기준

◦ 감가상각비는 해당 연구내용과 직접 관련된 특수실험실습기구·기계장치에 대하여 세법에서 정한 감가상각방법에 의해 산정된 감가상각비 등을 말한다.

나) 사용 및 정산기준

◦ 연구개발과제와 직접적인 관련성 집행여부

◦ 정산시 증빙자료

지출결의서, 계좌이체 영수증

※ 불인정액

- 해당 연구내용과 직접 관련이 없는 감가상각비

○ 일반관리비

가) 계상기준

◦ 일반관리비는 [인건비+경비] × 5% 이하로 계상한다.

나) 사용 및 정산기준

◦ 해당 연구내용과 직접 관련된 지적재산권의 출원 등록에 필요한 비용, 기술가치 평가 등 기술이전에 필요한 비용 및 A/S비용

◦ 정산시 증빙자료
지출결의서, 계좌이체 영수증, 해당기관 자체예산운용	통장사본

※ 불인정액

- 산정기준 초과금액

○ 선금분에 대한 이자의 계상

가) 중앙집중 관리체계로 인하여 해당 용역연구개발비의 예금이자 산출이 어려운 때에는 해당과제 선금의 연 0.1%를 발생이자로 간주함

[별표 3]

용역연구비 변경기준

비 목		사전승인사항	자체 기관승인사항	승인불가사항
인건비			◦참여연구원 변경 ◦참여연구원의 참여율 변경	※증액 및 감액
경비	여비	◦계약액의 20%이상 증액 ◦국외출장지, 출장자, 출장기간, 출장목적의 변경	◦계약액의 20%미만 증액
	유인물비	◦세부과제 당 100만원 초과의 도서구입	◦증액 및 감액
	전산처리비		◦증액 및 감액
	시약및연구용재료비		◦증액 및 감액
	임차료		◦증액 및 감액
	교통통신비		◦증액 및 감액
	감가상각비		◦증액 및 감액
일반관리비				※증액 및 감액
기타사항		◦주관연구책임자의 변경 ◦주관연구책임자의 소속변경 ◦세부과제책임자의 변경 ◦세부과제책임자의 소속변경 ◦연구내용의 학회발표관련사항 ◦연구내용의 변경	◦선금의 비목변경

▪ 사전승인사항인 경우 : 집행 전 검역본부장에게 별지 제9호서식 용역연구개발과제변경․승인요청서를 제출하여 승인을 받은 후 집행

▪ 자체기관 승인사항인 경우 : 기관결재 후 사용하고 별지 제13호서식 용역용역연구비 사용실적보고서 제출 시 함께 제출

▪ 참여연구원 변경 : 기관 내부 결재서류(사본) 및 별지 제20호 서식 참여연구원변경통보서를 용역연구비사용실적보고서 제출 시 함께 제출

▪ 사전승인사항은 계약종료 전 30일 전까지만 변경가능

[별표 4]

용역연구 계약체결에 따른 구비서류

구비서류명	수량	관련서식 및 첨부 등
용역표준계약서 및 용역연구계약 특수조건	2부	∙별지 제4호
용역연구사업계획서	4부	∙별지 제2호(주관연구책임자, 계약담당부서, 연구추진부서, 연구관리부서 각1부)
위임장	1부	∙서식 제1호
사용인감계	1부	∙서식 제2호
인감증명서	1부	∙국공립기관 : (관보)관인 공고서 사본 ∙사립대학, 법인 등: 증명기관 발행분 ∙출연기관 : 인감증명서
수입인지 (국공립기관 및 출연기관(50%이상)은 해당사항 없음)		∙1천만원 미만 : 없음 ∙1천만원초과 3천만원이하 : 20,000원 ∙3천만원초과 5천만원이하 : 40,000원 ∙5천만원초과 1억원이하 : 70,000원 ∙1억원초과 10억원이하 : 150,000원
계약체결증빙서류		∙사업자등록증 사본 ∙법인등기부등본, 정관(출연기관) ∙통장사본(기관명의통장) ∙기타증빙서류 등
청렴이행각서		∙공통, 서식 제 4호
계약보증금		∙국공립기관 : 지급각서(별지 제7호서식) ∙사립대학, 법인 등 : 보증보험에서 발급한 보증 보험증서(계약금액의 10％ 이상)
보안서약서	1부	∙서식 제3호

<선금신청시> 선금신청서류는 공문과 함께 제출

구분	구비서류	관련서식 및 첨부 등
공통	- 선금지급신청서 및 선금사용계획서 1부	- [별지 제6호서식] - 계약금의 70%이하
	- 선금사용각서(전기관 공통)	- [별지 제6호내 서식 제5호]
	- 통장사본	- 기관명의 통장
	-계산서	- 선금지급분에 대한 계산서
국립대학교, 국공립기관, 정부출연 연구기관 및 법인	<선금보증금면제기관>	- 국가기관(국립대포함), 지방자치단체, 정부투자기관, 정부출연기관
	- 선금지급보증각서	- [별지 제7호서식]
그 외 (사립대학교, 민영회사 등)	<선금보증금납부기관>	- 국가기관(국립대포함), 지방자치단체, 정부투자기관, 정부출연기관을 제외한 기관
	- 선금보증금 납부서	- [별지 제6호내 서식 제3호]
	- 이행(선금급)보증보험증권	보험개시일은 선금청구일 이전 종료일은 계약기간 종료일 다음날부터 60일 이상

※ 선금서류 제출일자는 계약일자보다 2-3일 후로 하여 작성, 청구일은 보증서 또는 보험증권 보험개시일 이후로 작성

(예시) 계약일이 2009년 2월 14일일 경우, (선금서류)계산서일자는 2009년 2월 16일로 하여 제출

또는 선금서류 제출일 공란으로 하여 제출

※ 공문날짜와 선금서류 신청일자를 일치해주세요.

[별표 5] 제재 조치 세부기준
제 재 사 유	제재 기준	비 고
○ 당해 연도 과제 종료까지 5회 이상 경고 처분 시 ○ 성과평가 종료까지 10회 이상 경고 처분 시 ○ 연구결과 평가가 불량으로 결정된 경우 ○ 각종 용역연구사업 보고서(결과물 포함)를 제출하지 아니한 경우 ○ 규정에 따른 연구관리시스템 미 입력 시 ○ 기타 이 규정에서 정하는 중요한 사항을 위반한 경우	1년 이내
○ 주관연구책임자의 귀책 사유로 과제 중단 시 ○ 연구결과재평가 결과 불량 등으로 결정된 경우 ○ 진도관리 평가결과가 중단으로 결정 될 시 ○ 연차실적·계획 평가결과가 중단으로 결정된 경우 ○ 진도관리 및 평가관리에 응하지 아니한 경우 ○ 기타 이 규정에서 정하는 중요한 사항을 위반한 경우	2년 이내
○ 용역연구비를 사용용도 이외의 목적에 사용 시 ○ 정당한 절차를 거치지 아니하고 연구내용을 누설 하거나 유출 시 ○ 과제수행을 중도 포기하거나 용역연구비 반납에 응하지 아니한 경우 ○ 3년차 연구사업성과보고서 추적평가 결과가 부적합으로 결정 시 ○ 정당한 사유 없이 연구개발결과물인 지식재산권 등을 연구책임자 등의 명의로 출원하거나 등록한 경우 ○ 거짓 또는 부정한 방법을 통하여 주관기관으로 선정되거나 연구개발을 수행한 경우 ○ 기타 이 규정에서 정하는 중요한 사항을 위반한 경우	3년 이내
○ 검역본부 2과제 이상 1~3년 제재 처분 시 ○ 다른 행정기관에서 제재조치를 받은 경우 ○ 기타 이 규정에서 정하는 중요한 사항을 위반한 경우	5년 이내
※ 경고 사항 - 제재사유에 해당되나, 정당한 사유가 인정되는 경우 - 규정에 따른 연구관리시스템 입력 헤태 시 - 중간진도평가 결과가 불량인 경우 - 연차실적·계획 평가결과가 재평가 대상과제인 경우 - 연구결과평가 결과가 재평가 대상인 경우 - 용역연구사업비 산정 및 정산지침을 위반하여 집행한 경우

[서식 제1호]

위  임  장

소        속 :    대학교   대학

직        위 : (부, 조)교수

주민등록번호(앞번호만 기재) :

성        명 :

위 사람에게 “(                     )”용역사업의 계약에 관한 권한을 위임하며, 추후 본건과 관련하여 문제가 발생시에는 우리 대학교(기관, 연구원등)에서 제반 의무사항에 관한 책임을 질 것을 확약합니다.

년   월   일 (계약체결일자 기입)

주    소 :

기 관 명 :

사업자등록번호 :

대 표 자 :           (인 또는 서명)

농림축산검역본부 재무관 귀하

[서식 제2호]

사 용 인 감 계

본 인 감

사 용 인 감

1. 위 인감은 농림축산검역본부와 00대학교가  “(용역과제명)”에 관한 용역과제계약을 체결함에 있어 다음의 사항을 수행하기 위하여 사용되는 인감임을 증명함.

가. 이 계약을 작성․체결하는 일

나. 이 계약에 의한 00대학교의 권리를 행사하거나 또는 의사표시를 행하는 일

2. 이 인감계는 이 계약의 종결 또는 해약과 동시에 그 효력을 상실함

년   월   일 (계약체결일자 기입)

주    소 :

기 관 명 :              본인감

사업자등록번호 :

대 표 자 :           (인)

※ 인감증명서 1부

농림축산검역본부 재무관 귀하

[서식 제3호]

보 안 서 약 서
과제관리번호 :	빈공란으로 두시기 바랍니다.
용역연구과제명 :
본인은 농림축산검역본부 ( ) 용역업무를 수행함에 있어, 용역수행 중 습득한 제반 연구기밀사항 및 검역본부에서 추진하는 각종 업무현황을 외부에 누설치 않을 것임을 다짐하며, 만일 이를 위반하여 발생하는 어떠한 문제에 대해서도 책임을 감수할 것임을 서약합니다.
년 월 일 (계약체결일자 기입)
			주관연구기관장 : (인)
<서약인>
		주관연구책임자 (인)
		제 세부연구책임자 (인)
		제 세부연구책임자 (인)
		제 세부연구책임자 (인)
농림축산검역본부장 귀하

[서식 제4호]

청렴계약이행서약

당사는 부패없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약제 시행 취지에 적극호응하여 농림축산검역본부(이하‘검역본부’)에서 시행하는(   용역과제명    )용역사업에 참여함에 있어 당사 및 하도급 업체의 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

◦ 이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도하거나 미리 입찰자격을 협정한 사실이 드러날 경우 검역본부가 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 2년 동안 참여하지 않겠으며

◦ 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여  사실이 드러날 경우 검역본부가 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 1년 동안 참여하지 않고

◦ 위와 같이 담합등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에관한법률에 따라 공정거래위원회에 발주관서가 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계공무원에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

◦ 이를 위반하여 입찰, 계약의 체결 또는 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 뇌물을 제공함으로써 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나 시공중 편의를 받아 부실하게 시공한 사실이 드러날 경우에는 검역본부가 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 2년동안 참여하지 않겠으며

◦ 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약 목적물의 이행을 부실하게 할 목적으로 관계공무원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 검역본부가 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한처분을 받는 날로부터 1년동안 참여하지 않고

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 공사착공 전에는 계약취소, 공사착공이후에는 발주처에서 전체 또는 일부계약을 해지하여도 감수하고 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관계 공무원에게 뇌물을 제공하거나 담합등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

5. 본건 입찰, 계약체결, 계약이행, 준공과 관련하여 검역본부에서 시행하는 청렴계약 옴부즈만이 요구하는 자료제출, 서류 열람, 현장확인 등 활동에 적극 협조하겠습니다.

위 청렴계약이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격제한, 계약해지등 검역본부의 조치와 관련하여 당사가 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

년   월   일 (계약체결일기입)

서약자 :                대표           (인)

농림축산검역본부장 귀하

별지서식 목록

1. 별지 제1-1호서식       연구과제제안서평가서

2. 별지 제1-2호서식       용역연구계획서평가서

3. 별지 제1-3호서식       현장실사평가서

4. 별지 제1-4호서식       진도평가서

5. 별지 제1-5호서식       용역연구사업연차실적․계획서평가서

6. 별지 제1-6호서식       연구결과평가서

7. 별지 제1-7호서식       연구결과재평가서

8. 별지 제1-8호서식       연구사업성과보고서평가서

9. 별지 제1-9호서식       정책부합성평가서

[별지 제1-1호서식]

연구과제제안서평가서

연구과제명
주관부서명
총 연구기간	～ ( 년 개월)
제시연구비	1차년도: 천원
	총액( 년): 천원

※ 귀하께서 평가하신 내용은 비밀이 보장됩니다.

위 연구과제제안서(RFP)에 대하여 붙임과 같이 평가함.

본인은 본 과제를 공정하게 평가하고, 연구내용을 사용․공개하지 않으며, 평가결과에 대하여 외부에 비밀을 유지할 것을 확약합니다

201     년     월     일

평가자    소속 :

성명 :                        (인)

농림축산검역본부장  귀하

Ⅰ. 제안서 평가

평가항목		가중치 (A)	점수(B)					A×B
			5	4	3	2	1
사업추진의 필요성	중․장기적 농림축산검역본부 연구개발사업의 사업추진방향에 잘 부합되는가?	4
	농림축산검역본부 연구개발사업 성격에 잘 부합되는가?	4
	본 연구과제를 수행해야 할 시급성이 있는가?	3
사업내용의 타당성	연구목표가 명확한가?	2
	연구내용 및 추진체계는 잘 정립되었는가?	2
	제시된 연구비 및 연구기간은 타당한가?	2
과제의 실현가능성	연구성과가 예상되며 활용가능성이 있는가?	3
합 계

Ⅱ. 종합평가

1. 추진여부
1	( )	농림축산검역본부의 연구개발사업으로 추진함
2	( )	내용을 보완하여 농림축산검역본부의 연구개발사업으로 추진함
3	( )	농림축산검역본부의 연구개발사업으로 추진하지 않음
2. 선정시 수정․보완해야 할 내용은?

[별지 제1-2호서식]

용역연구계획서평가서

연구과제명		과제번호
주관연구책임자 (성명/소속)		연구형태	시험( ), 조사( )
총 연구기간	～ ( 개월)
신청연구비	1차년도: 천원
	총액( 년): 천원

※ 귀하께서 평가하신 내용은 비밀이 보장됩니다.

위 연구계획에 대하여 붙임과 같이 평가함.

본인은 본 과제를 공정하게 평가하고, 연구내용을 사용․공개하지 않으며, 평가결과에 대하여  외부에 비밀을 유지할 것을 확약합니다.

201      년     월     일

평가자    소속 :

성명 :                        (인)

농림축산검역본부장  귀하

Ⅰ. 연구과제 평가 (검역본부 계약)

연구개발사업 (용역) 평가
평가요소	평가지표	평가항목	가중치 (A)		점수(B)					A×B
			시험	조사	5	4	3	2	1
연구계획 우수성	목표 및 필요성에 대한 이해도	연구의 필요성과 목적을 잘 이해하고 있는가?	2	2
		연구계획서는 RFP에 잘 부합되었는가?	2	2
	내용 타당성	연구범위 및 내용은 구체적으로 제시되었는가?	3	3
		연구추진전략 및 체계는 명확하게 정립되었는가?	2	2
연구수행 타당성	주관연구기관 적합성	연구책임자의 역량(그동안 연구업적, 전문성)은 축적되어 있는가?	2	2
		연구를 수행할 수 있는 시설․장비가 확보되었는가?	2	1
	연구비편성 적절성	연구비규모 및 비목별 예산편성은 잘 계획되었는가?	1	2
	수행일정 타당성	연구수행 일정이 적절하게 계획되었는가?	1	1
연구성과 활용성	결과실현 가능성	목적하는 연구결과를 도출할 가능성이 높은가?	3	3
	연구성과 활용정도	연구성과가 농림축산검역본부 정책수립, 기반기술 구축 및 발전에 기여할 가능성은 높은가 ?	1	1
		농림축산검역본부의 미션구현에 활용가능한 성과의 도출이 예상되는가?	1	1
	A : 합계〔(A×B의 합)×0.9, 90점 만점〕
	B : 정책부합성평가 점수〔10점 만점〕
	C : 가산점
	총점 : A + B + C

※ 표기는 해당란에  ◦ 표시로 하시고 정정시에는 반드시 날인하여 주시기 바랍니다.

II-1. 연구과제 평가항목 (시험) (조달청 계약)

연구개발사업 (용역) 평가(시험)
I. 기술능력평가
평가요소	평가지표	평가항목	심사결과
			배점	점수 (해당점수표시)
연구계획 우수성 (45)	목표 및 필요성에 대한 이해도	연구의 필요성과 목적을 잘 이해하고 있는가?	10	10	8	6	4	2
		연구계획서는 RFP에 잘 부합되었는가?	10	10	8	6	4	2
	내용 타당성	연구범위 및 내용은 구체적으로 제시되었는가?	15	15	12	9	6	3
		연구추진전략 및 체계는 명확하게 정립되었는가?	10	10	8	6	4	2
연구수행 타당성 (30)	주관연구기관 적합성	연구책임자의 역량(그동안 연구업적, 전문성)은 축적되어 있는가?	10	10	8	6	4	2
		연구를 수행할 수 있는 시설․장비가 확보되었는가?	10	10	8	6	4	2
	수행일정 타당성	연구수행 일정이 적절하게 계획되었는가?	10	10	8	6	4	2
연구성과 활용성 (25)	결과실현 가능성	목적하는 연구결과를 도출할 가능성이 높은가?	15	15	12	9	6	3
	연구성과 활용정도	연구성과가 농림축산검역본부 정책수립, 기반기술 구축 및 발전에 기여할 가능성은 높은가 ?	5	5	4	3	2	1
		농림축산검역본부의 미션구현에 활용가능한 성과의 도출이 예상되는가?	5	5	4	3	2	1
검역본부 산출	A : 합 계〔(평가항목의 합계×0.7, 70점 만점)〕
	B : 정책부합성평가 점수〔10점 만점〕
	C : 가산점
	D : 기술점수(A+B+C, 80점 만점)
조달청 산출	E : 가격점수(20점 만점)
	총점 : D + E

※ 표기는 해당란에  ◦ 표시로 하시고 정정시에는 반드시 날인하여 주시기 바랍니다.

※ 기술점수(D)의 주관기관 선정 최소 총점 = 68점(85%) 이상

II-2. 연구과제 평가(조사) (조달청 계약)

연구개발사업 (용역) 평가(조사)
I. 기술능력평가
평가요소	평가지표	평가항목	심사결과
			배점	점수 (해당점수표시)
연구계획 우수성 (45)	목표 및 필요성에 대한 이해도	연구의 필요성과 목적을 잘 이해하고 있는가?	10	10	8	6	4	2
		연구계획서는 RFP에 잘 부합되었는가?	10	10	8	6	4	2
	내용 타당성	연구범위 및 내용은 구체적으로 제시되었는가?	15	15	12	9	6	3
		연구추진전략 및 체계는 명확하게 정립되었는가?	10	10	8	6	4	2
연구수행 타당성 (30)	주관연구기관 적합성	연구책임자의 역량(그동안 연구업적, 전문성)은 축적되어 있는가?	10	10	8	6	4	2
		연구를 수행할 수 있는 시설․장비가 확보되었는가?	5	5	4	3	2	1
	수행일정 타당성	연구수행 일정이 적절하게 계획되었는가?	15	15	12	9	6	3
연구성과 활용성 (25)	결과실현 가능성	목적하는 연구결과를 도출할 가능성이 높은가?	15	15	12	9	6	3
	연구성과 활용정도	연구성과가 농림축산검역본부 정책수립, 기반기술 구축 및 발전에 기여할 가능성은 높은가 ?	5	5	4	3	2	1
		농림축산검역본부의 미션구현에 활용가능한 성과의 도출이 예상되는가?	5	5	4	3	2	1
검역본부 산출	A : 합 계〔(평가항목의 합계×0.7, 70점 만점)〕
	B : 정책부합성평가 점수〔10점 만점〕
	C : 가산점
	D : 기술점수(A+B+C, 80점 만점)
조달청 산출	E : 가격점수(20점 만점)
	총점 : D + E

※ 표기는 해당란에  ◦ 표시로 하시고 정정시에는 반드시 날인하여 주시기 바랍니다.

※ 기술점수(D)의 주관기관 선정 최소 총점 = 68점(85%) 이상

Ⅱ. 연구과제 종합평가 (공통)

1	( )	연구계획서의 필요성 및 성공 가능성이 모두 매우 높으므로 반드시 선정해야함
2	( )	연구계획서의 필요성이 있고 성공 가능성이 높으므로 선정하는 것이 바람직함
3	( )	본 연구계획서를 선정할 필요성이 낮음
4	( )	본 연구계획서를 선정할 필요성이 없음

1. 과제선정 필요시 수정․보완해야 할 내용은?

( 위 종합검토 의견에서 1, 2번인 경우 )

2. 과제선정 필요성이 낮거나 없는 경우 그 이유는?

( 위 종합검토 의견에서 3, 4번인경우 )

[별지 제1-3호서식]

현장실사평가서

				과제번호
수행방법		단독( ), 공동( )		주관부서			과
주관연구책임자				주관연구기관
과 제 명
실사일시		201 년 월 일			연구비
실사자		성명	소속					직위	확인
실사목적
종합결과
위 과제에 대하여 붙임과 같이 현장 실사를 실시하였음. 201 년 월 일 주관부서 : ____________________ 실사 책임자 : ____________________ (인)

□ 점검표

점검항목		점 검 결 과	비고
연구인력			전공별인력현황
시설			유 무
			유 무
	기 타
장비			보유 (미)가동
			보유 (미)가동
			보유 (미)가동
			보유 (미)가동
			보유 (미)가동
			보유 (미)가동
			보유 (미)가동
			보유 (미)가동
			보유 (미)가동
	기 타
특이보유기술(연구책임자)
기타 건의사항

[별지 제1-4호서식]

진도평가서

					과제번호
수행방법		용역( ), 기관지정( )			주관부서		과
주관연구책임자					주관연구기관
과 제 명
연구기간				연구비
위 과제의 진도관리 평가결과를 보고함.
평가위원	성명		소속					직위	확인
종합의견	※ 용역연구수행의 계속이나 중단여부에 대한 구체적 의견제시, ※ 부족한 경우 별지이용
최종결과	계속( ), 중단( )
201 년 월 일 평가위원장 : ____________________ (인)

진도관리점검표

○ 과제명 :

○ 주관연구책임자 :

1. 연구수행의 타당성

□ 연구계획

당초 연구계획대로 수행되고 있는지 여부

□ 연구추진일정

연구추진일정이 계획대로 수행되고 있는지 여부

□ 추진체계 구성, 전략 및 방법의 적정성

□ 중간성과의 질적 수준

2. 연구수행 및 결과의 완성도 예상

※ 연구 내용의 실현 가능성 여부

※ 연구 완료시 정책수립/농림축산검역검사기술개발에 공헌이 예상되는지 여부

3. 예산운영의 적정성

※ 연구비 비목별 집행의 적정성 여부

4. 종합의견

※ 용역연구수행의 계속이나 중단여부에 대한 구체적 의견 제시

상기 용역연구과제의 중간진도관리 점검결과를 제출합니다.

년    월    일

담당자 :   (소속)              (직위)               (성명)             (서명)

	농림축산검역검사기술개발연구사업						연 도
중간진도관리평가	용역연구과제 중간진도관리평가서						201 년
1. 주관연구책임자:	2. 과제명 :
3. 평가결과
평가지표	평가항목	가중치 (A)	점수(B)						A×B
			5	4	3	2		1
연구수행의 타탕성	연구수행 목표가 당초 계획대로 수행되고 있는가?	4
	연구 추진내용이 연구추진일정 계획대로 수행되었는가?	3
	추진전략 및 방법이 적절하였는가?	2
	달성된 성과의 질적 수준은 어떠한가?	3
연구수행 및 결과의 완성도 예상	계약완료일까지 당해연도 목적달성이 가능한가?	3
	연구과제의 결과가 농림축산검역검사 기술개발연구의 목적에 기여할 수 있겠는가?	2
예산운영의 적정성	연구비가 비목별로 적정하게 집행되었는가?	3
평가총점(A×B의 합계, 100점 만점) - 91 ~ 100 : 우수(목표 초과 달성) - 75 ~ 90 : 보통(목표 달성) - 0 ~ 74 : 불량(목표 미달성)		점
4. 평가 종합의견 및 제안사항
1. 본 평가는 반드시 과학적, 기술적 자료를 근거로 평가하여야 하며 주관적 또는 관념적 근거로 평가할 수 없습니다. 필요시 근거자료를 첨부하여 제안자가 도움이 될 수 있도록 하여주시기 바랍니다. 2. 표기는 해당란에 ○ 표시로 하시고 정정시에는 반드시 날인하여 주시기 바랍니다.
201 년 월 일 본 연구과제에 대한 진도관리평가 결과를 제출합니다.

[별지 제1-5호서식]

용역연구사업연차실적ㆍ계획서평가서

연구과제명		과제번호
주관연구책임자 (소속)		연구형태	시험( ), 조사( )
총 연구기간	( 개월)
신청연구비	차년도: 천원
	총액( 년): 천원

※ 귀하께서 평가하신 내용은 비밀이 보장됩니다.

위 연구사업연차실적ㆍ계획서에 대하여 붙임과 같이 평가함.

본인은 본 과제를 공정하게 평가하고, 연구내용을 사용․공개하지 않으며, 평가결과에 대하여  외부에 비밀을 유지할 것을 확약합니다

201     년     월     일

평가자    소속 :

성명 :                        (인)

농림축산검역본부장  귀하

Ⅰ. 연구사업 연차실적․계획서 평가

양식 1-5	농림축산검역검사기술개발연구사업						연 도
연차실적계획서평가	용역연구과제 연차실적․계획서평가서 Review Sheet for the AR						201 년
1. 주관연구책임자:	2. 과제명 :
3. 평가결과
평가지표	평가항목	가중치 (A)	점수(B)						A×B
			5	4	3	2		1
연구수행의 타탕성	연차별 목표가 당초 계획대로 수행되었는가?	2
	연구 추진내용이 연구추진일정 계획대로 수행되었는가?	2
	추진체계 구성, 전략 및 방법이 적절하였는가?	3
	달성된 연차성과의 질적 수준은 어떠한가?	3
연구수행 및 결과의 완성도 예상	차년도 연구계획의 내용이 당해연도와 연관성이 있으며 실현가능성이 있는가?	2
	연구실적 및 계획이 농림축산검역검사기술 발전 및 진보에 공헌이 예상되는가?	4
	연차실적 및 계획이 검역본부 정책수립에 기여할 수 있겠는가?	2
예산운영의 적정성	연구비가 비목별로 적정하게 집행되었는가?	2
A : 평가합계(A×B의 합계*0.75, 75점 만점)		점
B : 중간진도평가 점수(20우수,10보통,0불량)		점
C : 연구관리시스템 입력점수(5입력, 0미입력)		점
총점(A+B+C)		점
4. 평가 종합의견 및 제안사항
1. 본 평가는 반드시 과학적, 기술적 자료를 근거로 평가하여야 하며 주관적 또는 관념적 근거로 평가할 수 없습니다. 필요시 근거자료를 첨부하여 제안자가 도움이 될 수 있도록 하여주시기 바랍니다. 2. 표기는 해당란에 ○ 표시로 하시고 정정시에는 반드시 날인하여 주시기 바랍니다.
201 년 월 일 본 연구과제에 대한 전문가 선정평가 결과를 제출합니다.
QIANRP

[별지 제1-6호서식]

연구결과평가서

연구과제명			과제번호
주관연구책임자 (소속)			연구형태	시험( ), 조사( )
총연구기간	～ ( 년 개월)	당해연도 연구기간	( 년차/ 년 중)
총연구비	천원	당해연도 연 구 비	천원

※ 귀하께서 평가하신 내용은 비밀이 보장됩니다.

위 연구결과에 대하여 붙임과 같이 평가함.

본인은 본 과제를 공정하게 평가하고, 연구내용을 사용․공개하지 않으며, 평가결과에 대하여  외부에 비밀을 유지할 것을 확약합니다

201     년     월     일

평가자    소속 :

성명 :                        (인)

농림축산검역본부장  귀하

양식 1-6	농림축산검역검사기술개발연구사업						연 도
연구결과평가	용역연구과제 연구결과평가서 Review Sheet for the FR						201 년
1. 주관연구책임자:	2. 과제명 :
3. 평가결과
평가지표	평가항목	가중치 (A)	점수(B)						A×B
			5	4	3	2		1
연구수행의 타탕성	농림축산검역본부 기본사업방향의 목표가 연구결과에 잘 반영되었는가?	3
	연구결과의 성과가 RFP의 방향과 잘 부합되었는가?	3
	연구수행과정 중 연구추진전략 및 체계는 잘 정립되어 진행되었는가?	2
	연구결과에 비교하여 사용된 연구비는 적정하게 사용되었는가?	1
연구결과의 완성도	당초 연구계획서에 예상목표의 달성정도는 우수한가?	3
	연구결과의질적, 양적 수준은 우수한가?	2
	RFP이외의 기대하지 않은 연구개발 성과가 도출되었는가?	1
연구성과 활용성	연구결과가 농림축산검역검사 기반기술 발전 및 진보에 공헌이 예상되는가?	3
	연구결과가 검역본부 정책수립에 대한 기여도는 높은가?	2
A : 평가합계(A×B의 합계*0.75, 75점 만점)		점
B : 중간진도평가 점수(20우수,10보통,0불량)		점
C : 연구관리시스템 입력점수(5입력, 0미입력)		점
총점(A+B+C)		점
4. 평가 종합의견 및 제안사항
1. 본 평가는 반드시 과학적, 기술적 자료를 근거로 평가하여야 하며 주관적 또는 관념적 근거로 평가할 수 없습니다. 필요시 근거자료를 첨부하여 제안자가 도움이 될 수 있도록 하여주시기 바랍니다. 2. 표기는 해당란에 ○ 표시로 하시고 정정시에는 반드시 날인하여 주시기 바랍니다.
201 년 월 일 본 연구과제에 대한 전문가 선정평가 결과를 제출합니다.
QIA-NRP

[별지 제1-7호서식]

연구결과재평가서

연구과제명			과제번호
주관연구책임자 (소속)			연구형태	시험( ), 조사( )
총연구기간	～ ( 년 개월)	당해연도 연구기간	( 년차/ 년 중)
총연구비	천원	당해연도 연 구 비	천원

※ 귀하께서 평가하신 내용은 비밀이 보장됩니다.

위 연구결과에 대하여 붙임과 같이 평가함.

본인은 본 과제를 공정하게 평가하고, 연구내용을 사용․공개하지 않으며, 평가결과에 대하여  외부에 비밀을 유지할 것을 확약합니다

201     년     월     일

평가자    소속 :

성명 :                        (인)

농림축산검역본부장  귀하

Ⅰ. 연구결과 재평가

연구개발사업 결과평가
평가내용		가중치 (A)		점수(B)					A×B
		시험	조사	5	4	3	2	1
연구수행 타당성	농림축산검역본부 기본사업방향의 목표가 연구결과에 잘 반영되었는가?	3	3
	연구결과의 성과가 RFP의 방향과 잘 부합되었는가?	3	2
	연구수행과정 중 연구추진전략 및 체계는 잘 정립되어 진행되었는가?	2	2
	연구결과와 비교하여 사용된 연구비는 적절하게 사용되었는가?	1	2
연구결과의 완성도	당초 연구계획서에 예상목표의 달성정도는 우수한가?	2	2
	연구결과의 질적, 양적 수준은 우수한가?	2	2
	RFP이외의 기대하지 않은 연구개발 성과가 도출되었는가?	1	1
연구성과 활용성	연구결과가 농림축산검역검사 기반기술 발전 및 진보에 공헌이 예상되는가?	2	1
	연구결과의 농림축산검역본부 정책수립에 대한 기여도는 높은가?	2	3
평가결과 보완정도	결과평가 후 주관부서의 보완의견은 적절히 반영되었는가?	2	2
합 계

Ⅱ. 종합의견

본 연구와 관련하여 본 란에 작성한 귀하의 전문의견은 향후 농림축산검역본부의 연구업무 수행에 반영하고 또한 연구책임자에게 통보할 예정이니 평가하신 후 솔직한 의견을 기록하여 주시기 바랍니다(별지사용가능).

항 목	의 견
1.연구수행에 있어 잘된 점 - 연구책임자의 연구수행 성실성- 연구계획서의 목표대비 달성정도
2. 연구수행에 있어서 보완점 - 연구수행 중 문제 해결 방안 - 추후 연구과제에 대한 방향제시
3. 연구결과의 활용방안 관련 의견
4. 연구성과의 파급효과, 기타

[별지 제1-8호서식]

연구사업성과보고서평가서

과제개요
과제명				과제번호
주관연구기관			주관연구책임자
세부과제기관 및 책임자
연구성과 평가의견
○ 연구계획서 대비 연구목적 및 결과에 대한 적합성 ○ 연구계획서 목적 활용도에 대한 성과물의 적합 ○ 기타 의견
최종결과		적 합 ( ), 부적합 ( )

201   년    월    일

평가자    소속 :

성명 :                        (인)

농림축산검역본부장 귀하

[별지 제1-9호서식]

농림축산검역검사기술개발 연구사업 (정책) 부합성 평가서

연구과제명
관련과제명*
주관기관명			주관책임자
평 가 자 (연구추진부서장)	소 속	직 위	성 명	서 명

* 용역연구과제와 직접적 연관이 있는 현재 (또는 향후) 수행되고 있는 과제

1. 연구 사업(정책) 부합성 평가

평가항목	세부평가내용	가중치 (A)	점수(B)			A×B
부합성	1)사업내용의 충실성 - 부서의 과제제안서(RFP)의 사업내용 반영정도 - 연구목표달성을 위한 사업내용의 충실성, 명확성	1.5	0	1	2
	2) 농림축산검역검사기술개발 연구사업(정책) 부합성 - 자체수행 (예정)사업과의 부합성 - 연구사업(정책)에의 적용성 - 우리본부 R&D 중장기계획과의 부합성	2	0	1	2
	3) 연구팀과 과제와의 일치성 - 연구목표를 달성하기 위한 최적의 연구팀 구성정도 - 과제의 내용과 연구팀의 전문성 관련정도	1.5	0	1	2
평가총점 (10점 만점)

2. 평가의견

2. 별지 서식 목록

1	별지 제1호서식	용역연구과제제안서(RFP)
2	별지 제2호서식	용역연구사업신청(계획)서
3	별지 제3호서식	용역연구사업연차실적․계획서
4	별지 제4호서식	용역연구사업표준계약서
5	별지 제5호서식	계약보증금지급각서
6	별지 제6호서식	선금지급신청서
7	별지 제7호서식	선금지급보증각서
8	별지 제8호서식	잔금신청서
9	별지 제9호서식	용역연구사업변경․승인요청서
10	별지 제10호서식	진도보고서
11	별지 제11호서식	회의록
12	별지 제12호서식	용역연구사업연구결과보고서
13	별지 제13호서식	용역연구비사용실적보고서
14	별지 제14호서식	자체회계감사의견서
15	별지 제15호서식	용역연구사업검사조서
16	별지 제16호서식	용역연구비사용실적보고서검토결과서
17	별지 제17호서식	자체평가의견서
18	별지 제18호서식	연구결과활용계획서
19	별지 제19호서식	연구사업성과보고서
20	별지 제20호서식	참여연구원변경통보서

[별지 제1호서식]

1. 용역연구과제 제안서(RFP)

용역연구과제제안서(RFP)
과제명
연구기간		단년도( )		다년도( ), 총( )개년
소요예산		총 액		연구형태	조사연구( ), 시험연구( )
		1차년도
				중복성 검토	검토실시( ), 중복(됨, 안됨)
		2차년도
현황 및 문제점		○ ○
연구목표		[1차년도] ○ [2차년도] ○
주요연구내용		[1차년도] ○ [2차년도] ○
기대성과 및 활용분야		[1차년도] ○ [2차년도] ○
색인 단어	국문
	영문

*다년도과제는 총괄 및 연차별 예산, 목적, 주요연구내용 및 기대성과 등을 구분하여 서술

예산편성내역
연구결과 활용계획	◦
연구비 편성내역	용역연구과제(천원)
	인건비
	여비
	유인물비
	전산처리비
	재료비
	회의비
	임차료
	교통․통신비
	감가상각비
	일반관리비
	이윤
	부가가치세
	계

2. 부서의 기능 및 업무와의 적합성

- 추진과제가 부서의 기능과 업무와 어느정도 관련이 있는지 세부적으로 기술

3. 제안 과제 수행 필요성

- 제안과제 반드시 수행되어야 하는 이유를 상세히 기술

- 현재 수행하는 자체 과제 혹은 향후에 추진할 자체 과제를 제시하고, 그 과제와의 명확한 연계성 및 적용성을 제시

4. 연구성과 및 성과활용성

- 연구성과가 확실히 어떻게 활용될지에 대해 제시

[별지 제2호서식]

용역연구사업 신청(계획)서

※과제번호

용역연구 과 제 명	국문
	영문
주관연구 책 임 자	소속기관		연구지원부서명/담당자			부서명							전화번호
	법인번호					담당자							전자우편
	성명		직위							전공
	(한문)									(세부전공)
	전화		휴대전화							FAX
	전자우편				주민등록번호 (앞번호만 기재)
세부과제 책 임 자	세부과제	성명	소속기관				전자우편				전화번호					휴대전화
	1
	2
	3
연구 참여자	총 참여연구원 (주관연구책임자 포함)		명	책임연구원				명				연구원						명
				연구보조원				명				보조원						명
총연구기간	년 월 일 - 년 월 일( 년 개월)									세부과제수 (제1세부과제포함)
총 연구비	천원
연구년차	연구기간			연구비					신청액						계약액
1차년도	201 . . - 201 . .			천원					천원						천원
2차년도	201 . . - 201 . .			천원					천원						천원
본인은 붙임의 연구를 수행하고자 용역연구를 신청하며, 선정될 경우 귀원에서 정한 제반사항을 준수하여 소기의 연구성과를 거둘 것을 서약합니다. 년 월 일 붙임 : 1. 연구사업 신청(계획)서 10부 2. CD 2장 (인 또는 서명)
위의 신청자는 재능이 우수하고 연구의욕이 왕성하여 소기의 연구성과를 거둘 수 있다고 인정되었기에 귀원의 용역연구 신청자로 추천하며, 선정되는 경우 소정의 기관 책무를 이행하겠습니다. 년 월 일 주관연구기관장 (직인) 농림축산검역본부장 귀하

※는 작성하지 말 것, 접수시 부여	210㎜×297㎜ 반용지60g/㎡(재활용품))

목         차

< 총괄연구과제 >

1. 요약문

2. 당해년도 연구개발비 총괄표(총괄부분)

3. 연구의 필요성

4. 연구의 목표

5. 연구의 내용 및 방법

6. 연차별 연구추진계획

7. 국내외연구동향

8. 기대성과 및 활용방안

9. 계량적 예상 연구성과

10. 주관연구책임자 인적사항 및 연구개발실적

11. 참여연구원 편성표

12. 주요연구기자재 및 시설

13. 첨부서류

< 제 (  ) 세부연구과제 >

1. 요약문

2. 당해년도 연구개발비 총괄표 (세부과제별)

3. 연구의 필요성

4. 연구의 목표

5. 연구의 내용 및 방법

6. 연차별 연구추진계획

7. 계량적인 예상 연구성과

8. 세부연구책임자 인적사항 및 연구개발실적

9. 참여연구원 편성표

10. 주요연구기자재 및 시설

11. 첨부서류

※ 작성방법

○ 세부연구과제가 없는 경우 : 총괄연구과제 양식만을 작성

○ 세부연구과제가 있는 경우

- 총괄연구과제 작성양식을 주관연구책임자가 작성

- 주관연구책임자의 세부연구과제는 제1세부과제로 하고 양식의 1～7까지만 작성

○ 평가용 연구사업신청(계획서) 작성

- 총괄연구과제 작성양식 : 음영처리부분(인적관련사항)은 작성하지 말것

- 세부연구과제 작성양식 : 음영처리부분(인적관련사항)은 작성하지 말것

< 총괄연구과제 >

총괄(주관)연구기관 :
총괄(주관)연구책임자 :

1. 요약문

※ 간략하게 기술하여 주시고 요약문의 총분량은 1page 이내로 제한함.

관리번호
연구과제명
주관연구 책 임 자		성명		주민등록번호 (앞번호만 기재)
		전공		소속
색인단어	국문
	영문
◆ 최종연구목표
◆ 연구내용 및 방법
◆ 기대성과 및 활용방안

2. 당해년도 연구개발비 총괄표(총괄부분)

2.1 연구개발비 총괄표

용역연구원가계산서
구 분 비 목			금 액		구 성 비		비 고
인건비	책 임 연 구 원			원		%	(기획재정부 계약예규) 예정가격 작성기준 제26조(인건비) 별표 5
	연 구 원			원		%
	연 구 보 조 원			원		%
	보 조 원			원		%
	인건비 소계			원		%
경비	여비	국내여비		원		%	공무원 여비규정 여비지급 구분표 별표1 - 책임연구원 : 제1호 - 그 외 : 제2호
		국외여비		원		%
		여비 소계		원		%
	유 인 물 비			원		%
	전 산 처 리 비			원		%
	시 약 및 재 료 비			원		%
	회 의 비			원		%	총 용역 연구비의 10% 또는 30% 이하
	임 차 료			원		%
	교 통 통 신 비			원		%
	감 가 상 각 비			원		%
	경비 소계			원		%
일반관리비				원		%	(인건비 + 경비)의 5%이하
이 윤				원		%	(인건비 + 경비 + 일반관리비)의 10% 이하
부가가치세				원		%	(인건비 + 경비 + 일반관리비 + 이윤) × 10%
총 원 가				원		%	인건비 + 경비 + 일반관리비 + 이윤 + 부가가치세
* 원가계산에 의한 예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규) 제4절 학술연구용역 원가계산(제23조~제29조)을 참고하여 구체적으로 산출 * 별첨 : 비목별 산출내역(비목별 산정기준을 참고하여 작성 제출)

2) 세부과제별 용역연구비  (세부과제가 없는 경우 (1) ～ (4)까지 작성하지 마십시오.)

* 인건비 소계는 책임연구원 + 연구원 + 연구보조원 + 보조원의 합계임

1) 인건비
세부과제순번	책임연구원		연구원		연구보조원		보조원		인건비소계
1		원		원		원		원		원
2		원		원		원		원		원
3		원		원		원		원		원
4		원		원		원		원		원
5		원		원		원		원		원
합계		원		원		원		원		원
비중(%)		%		%		%		%		%

* 여비소계는 국내여비 + 국외 여비의 합계임

2) 경비(여비)
세부과제순번	국내여비		국외여비		여비소계
1		원		원		원
2		원		원		원
3		원		원		원
4		원		원		원
5		원		원		원
합계		원		원		원
비중(%)		%		%		%

* 경비 소계는 유인물비 + 전산처리비 + 시약 및 재료비 + 회의비 + 임차료 + 교통통신비 + 감가상각비의 합계임

3) 경비
세부과제순번	유인물비		전산 처리비		시약 및 재료비		회의비		임차료		교통 통신비		감가 상각비		경비소계
1		원		원		원		원		원		원		원		원
2		원		원		원		원		원		원		원		원
3		원		원		원		원		원		원		원		원
4		원		원		원		원		원		원		원		원
5		원		원		원		원		원		원		원		원
합계		원		원		원		원		원		원		원		원
비중(%)		%		%		%		%		%		%		%		%

* 총원가는 각 세부과제별 (1)합계 + (2)합계 + (3)합계 + 일반관리비를 계산함

4) 일반관리비
세부과제순번	금액		총원가
1		원		원
2		원		원
3		원		원
4		원		원
5		원		원
합계		원		원
비중(%)		%		%

《비목별 산출내역 》(비목순서대로 산출내역을 구체적으로 작성)

1) 인건비

○ 책임연구원          원 ×  월 ×  명 ×   % =     원

○ 연구원              원 ×  월 ×  명 ×   % =     원

○ 연구보조원          원 ×  월 ×  명 ×   % =     원

○ 보조원              원 ×  월 ×  명 ×   % =     원

2) 경  비

○ 국내여비            원 ×   명 ×    회 =          원

(직급별로 구분하여 일비, 식비, 숙박비 별로 기재)

○ 국외여비            원 ×   명 ×    회 =          원

(직급별로 구분하여 여행목적지, 기간을 표시하고 일비, 식비, 숙박비 별로 기재)

○ 유인물비

( 문헌복사비, 인쇄비등)

-        쪽 ×       부 ×       원 =             원

○ 전산처리비

- 전산기종 단 가 × 사용할 시간 × 회수 =         원

(외부 전산자료 사용료 및 부대비용)

○ 시약 및 재료비

- 재료명 : 단가 × 수량 =                         원

(내구연수가 1년 이하의 시약․재료 구입비 및 시험분석료)

○ 회의비

(회의비, 세미나 개최비용, 공청회비 등)

○ 임차료

- 품명 : 단가 × 수량 =                           원

(특수실험실습도구를 외부로부터 임차, 회의장 사용료)

○ 교통통신비

(연구내용과 직접 관련된 시내교통비, 전신전화사용료, 우편료)

○ 감가상각비

(연구와 관련된 특수실험실습기구․기계장치에 대한 세법에 의해 산정)

3) 일반관리비

○ (인건비+경비) × 5%이내                         원

※ 각 항목별 여백이 부족할 경우에는 ‘별지 작성’이라고 기재한 후 별도 첨부

(2) 해외출장 계획서
과제명
주관연구기관					주관연구 책임자							(인 또는 서명)
세부과제 연구기관					세부과제 연구책임자							(인 또는 서명)
세부과제 연구개발비 (당해연도)				원	해외여비 총 액 (당해연도)									원
출장자	성명	소속	직급		출장기간								출장장소
					부터				까지
경비	구분	성명	직급		단가			횟수			총액
	항공료					원				회				원
						원				회				원
	체제비					원				회				원
						원				회				원
출장사유 (목적 및 필요성)

※ 해외출장이 포함된 과제의 경우 작성함(세부과제별로 별도 작성)

※ 출장 장소는 도시명으로 작성해야 함

※ 1회 2인에 한함

※ 최초계획서 평가시 반영된 해외출장만 인정함

※ 당해 연구목표와 관련있는 해외출장만 인정함

※ 체제비는 200만원 이내

3. 연구의 필요성

◦ 관련 분야 제안요청서의 목적(RFP)에 적합한지를 기술함.

◦ 연구 필요성 및 중요성을 구체적(경제적, 사회적, 기술적 측면 등)으로 기술하되 산출근거를 객관성 있는 자료로 작성함.

◦ 관련분야에서 본 연구에 대한 요구가 얼마나 높은지를 설명하여야 함.

4. 연구의 목표

4.1 최종 연구 목표

4.2 당해연도 연구목표 (계속과제에 한함)

5. 연구개발의 내용 및 방법

5.1 연구내용

◦ 연구과제의 최종 도출될 내용 등을 명확하게 기술

5.2 연구방법

◦ 연구과제의 목표달성을 위하여 적용하고자 하는 방법론(접근방법)등을 구체적으로 작성

6. 연차별 연구추진계획

6.1 연구추진체계

◦ 연구와 관련된 국내외 여건 및 연구팀의 여건을 고려하여 최종 연구목표 달성을 위한 연구내용에 대한 기술적 측면에서 연구추진체계를 도식적으로 간략히 기술함.

6.2 연차별 연구 추진계획

◦ 세부연구별 주요 추진내용을 세분화하여 아래의 표에 기술하고, 연구내용의 추진 시점을 표시

연구개발 추진내용	연구개발 연차
	1차년												2차년
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
․추진 내용 ․추진 내용

7. 국내외연구동향

7.1 국외연구동향

7.2 국내연구동향

8. 기대성과 및 활용방안

◦ 연구자 입장에서 기대되는 결과를 정책적, 기술적 측면에서 구체적이고 논리적으로 기술함.

◦ 예상되는 활용분야 및 활용 방안을 상세히 기술

8.1 기대성과

8.2 활용방안

9. 계량적 예상 연구성과 : 최근 3년 이내에 한함

가. 연구논문

번호	논문제목	저자명	저널명	집(권)	페이지	Impact factor	국내/국외	SCI여부
1
2

나. 학술발표

번호	발표제목	발표형태	발표자	학회명	연월일	발표지	국내/국제
1
2

다. 지적재산권

번호	출원/등록	특허명	출원(등록)인	출원(등록)국	출원(등록)번호	IPC분류
1
2

라. 정책활용

※ 기타 관련정책에 활용 예를 구체적으로 기술함.

마. 타연구/차기연구에 활용

※ 타연구 및 차기연구에 활용된 예를 구체적으로 기술함.

바. 언론홍보 및 대국민교육

※ 언론홍보 및 대국민교육 내용, 일자 등을 간략히 기술함.

사. 기타

※ 임상시험 , 관련 DB구축, 워크샾 또는 심포지움 개최 등의 경우 구체적으로 기술함.

10. 주관연구책임자 인적사항 및 연구개발실적

(1)  인적사항

성 명	국 문				전 공
	영 문
소 속	기관명		직위		전 화	직 장
						휴대전화
	법인등록 번 호				사업자등록 번 호
	주소				FAX
주민등록번호 (앞번호만 기재)					전자우편

(2)  학력

☞ 학위코드(택1) : 1. 학사, 2. 석사과정, 3. 석사, 4. 박사과정, 5. 박사

연도		학교 (대학교, 단과대, 과)				학위 코드
부터	까지	대학교	단과대	학과	전공명
최종학위 논문명

(3) 경력

연도		기 관	직위 (직명)	비 고
부터	까지

(4) 연구수행 실적 총괄  (최근 3년간)

연 구 비 수혜실적	수 행 중 인 연 구 과 제	저 서		연 구 논 문 발 표
		국 외	국 내	SCI	비SCI	기 타
건	과제	편	편	편	편	편

(5) 주요정책연구 연구비 수행실적  (최근 3년간, 우선순위10과제)

연구과제명	역 할	연 구 비		연 구 기 간		논문발표 학술지명
		금 액	지원기관	부터	까지
		원

☞ 역할코드 : 책임연구원 : 1, 연구원 : 2

(6) 저서실적 (최근 3년간)

발행년도	저 서 명	츨 판 사	발행지	비 고

☞ 발행지코드 : 국내 : 1, 국외 : 2

(7) SCI 연구논문 발표실적  (최근 3년간)

연 구 과 제 명	연 구 기 간		연구 논문 발표지 명	발행 년도	역할	연 구 비 지 원 기 관
	부터	까지

* 연구논문 발표 학술지는 국외, 국내 순서로 기재하여 주십시오.

☞ 역할코드 : 책임자 : 1, 연구원 : 2

(8) 수행 중 및 수행예정 연구과제

과 제 명	지 원 기 관	연 구 비	기 간		역 할
			부터	까지
		원

☞ 역할코드 : 책임연구원 : 1, 연구원 : 2

(9) 본 연구와 동일한 또는 유사한 과제를 타 기관에 신청하였을 경우

신 청 대 상 기 관	연 구 기 간		참 여 역 할	신 청 연 구 비
	부터	까지

☞ 역할코드 : 책임연구원 : 1, 연구원 : 2

11. 참여연구원 편성표

* 세부과제가 있는 경우 주관연구책임자가 제1세부과제 책임자이어야 한다.

☞ 학위 코드 : 박사(1) 박사수료(2) 박사과정중(3), 석사(4), 석사수료(5), 석사과정중(6)

학사(7), 전문학사(8), 기타(9)

☞ 인건비 지급코드 : 지급 : 1, 미지급 : 2

☞ 산학연 구분코드 : 산(1), 학(2), 연(3)

(1) 참여연구원 편성표
주관연구책임자:
세부과제 순 번	역 할	성 명	주민등록번호 (앞번호만 기재)	소속기관	부서	직 위	최종 학위	전 공	참여율 (%)	인건비 지급	산학연구분
	책임연구원
	연구원
	연구보조원
	보조원
	책임연구원
	연구원
	연구보조원
	보조원
	책임연구원
	연구원
	연구보조원
	보조원

* 위 표의 참여연구원에는 주관연구책임자를 모두 포함하여 계상함.

참 여 연구원	학 계		명	총 참여연구자					명
	연구계		명	책임연구원		명	연구원		명
	산업계		명	연구보조원		명	보조원		명

(2) 다른기관에서 수행중인 연구과제 참여율(정확하게 기입할 것)

이름	주민등록번호 (앞번호만 기재)	수행기관	과제명	비율	역할
				%
				%
				%
				%

☞ 역할 코드 : 연구책임자 : 1, 연구원 : 2

12. 주요연구기자재 및 시설

연구기자재 및 연구시설명	규 격	수 량	용 도	보유현황	확보 및 활용방안	비 고

* “보유현황”란에는 보유기관의 기관명을 기재하지 말고 보유유무만 표기

** “확보 및 활용방안”란에는 구입, 임차 등을 기재하며, 구입 혹은 임차연도를 비고란에 기재

*** 기자재 활용 계획이 없는 과제는 작성하지 않음

13. 첨부서류

13.1 주관연구책임자가 당해연도 검역본부 과제로 제안하여 선정, 채택된 실적공문사본

13.2 주관연구책임자가 최근2년간 수행한 검역본부과제 중 우수과제로 선정되어 포상된 실적 공문 사본

< 제(  )세부연구과제 >

◦ 세부과제별로 별도로 작성함.

◦ 각 세부과제의 계획서의 표지는 색지로 작성하여 쉽게 구분될 수 있도록 함. 표지에는 다음과 같은 사항을 반드시 기재함.

세부연구명 :

세부과제책임자 : 성명/소속/전공

1. 요약문

※ 간략하게 기술하여 주시고 요약문의 총분량은 1page 이내로 제한함.

관리번호
총괄과제명
주관연구 책 임 자		성명		주민등록번호 (앞번호만 기재)
		직위		소속
세부과제명
세부연구 책 임 자		성명		주민등록번호 (앞번호만 기재)
		직위		소속
색인단어	국문
	영문
◆ 최종연구목표
◆ 연구내용 및 방법
◆ 기대성과 및 활용방안

2. 당해년도 연구개발비 총괄표 (세부과제)

2.1 연구개발비 총괄표

〈세부과제책임자 / 세부과제연구기관〉

용역연구원가계산서
구 분 비 목			금 액		구 성 비		비 고
인건비	책 임 연 구 원			원		%	(기획재정부 계약예규) 예정가격 작성기준 제26조(인건비) 별표 5
	연 구 원			원		%
	연 구 보 조 원			원		%
	보 조 원			원		%
	인건비 소계			원		%
경비	여비	국내여비		원		%	공무원 여비규정 여비지급 구분표 별표1 - 책임연구원 : 제1호 - 그 외 : 제2호
		국외여비		원		%
		여비 소계		원		%
	유 인 물 비			원		%
	전 산 처 리 비			원		%
	시 약 및 재 료 비			원		%
	회 의 비			원		%	총 용역 연구비의 10% 또는 30% 이하
	임 차 료			원		%
	교 통 통 신 비			원		%
	감 가 상 각 비			원		%
	경비 소계			원		%
일반관리비				원		%	(인건비 + 경비)의 5%이하
이 윤				원		%	(인건비 + 경비 + 일반관리비)의 10% 이하
부가가치세				원		%	(인건비 + 경비 + 일반관리비 + 이윤) × 10%
총 원 가				원		%	인건비 + 경비 + 일반관리비 + 이윤 + 부가가치세
* 원가계산에 의한 예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규) 제4절 학술연구용역 원가계산(제23조~제29조)을 참고하여 구체적으로 산출 * 별첨 : 비목별 산출내역(비목별 산정기준을 참고하여 작성 제출)

《비목별 산출내역 》(비목순서대로 산출내역을 구체적으로 작성)

1) 인건비

○ 책임연구원          원 ×  월 ×  명 ×   % =     원

○ 연구원              원 ×  월 ×  명 ×   % =     원

○ 연구보조원          원 ×  월 ×  명 ×   % =     원

○ 보조원              원 ×  월 ×  명 ×   % =     원

2) 경  비

○ 국내여비            원 ×   명 ×    회 =          원

(직급별로 구분하여 일비, 식비, 숙박비 별로 기재)

○ 국외여비            원 ×   명 ×    회 =          원

(직급별로 구분하여 여행목적지, 기간을 표시하고 일비, 식비, 숙박비 별로 기재)

○ 유인물비

( 문헌복사비, 인쇄비등)

-        쪽 ×       부 ×       원 =             원

○ 전산처리비

- 전산기종 단 가 × 사용할 시간 × 회수 =         원

(외부 전산자료 사용료 및 부대비용)

○ 시약 및 재료비

- 재료명 : 단가 × 수량 =                         원

(내구연수가 1년 이하의 시약․재료 구입비 및 시험분석료)

○ 회의비

(회의비, 세미나 개최비용, 공청회비 등)

○ 임차료

- 품명 : 단가 × 수량 =                           원

(특수실험실습도구를 외부로부터 임차, 회의장 사용료)

○ 교통통신비

(연구내용과 직접 관련된 시내교통비, 전신전화사용료, 우편료)

○ 감가상각비

(연구와 관련된 특수실험실습기구․기계장치에 대한 세법에 의해 산정)

3) 일반관리비

○ (인건비+경비) × 5%이내                              원

※ 각 항목별 여백이 부족할 경우에는 ‘별지 작성’이라고 기재한 후 별도 첨부

(2) 해외출장 계획서
과제명
주관연구기관						주관연구 책임자							(인 또는 서명)
세부과제 연구기관						세부과제 연구책임자							(인 또는 서명)
세부과제 연구개발비 (당해연도)					원	해외여비 총 액 (당해연도)									원
출장자	성명	소속		직급		출장기간								출장장소
						부터				까지
경비	구분	성명	직급			단가			횟수			총액
	항공료						원				회				원
							원				회				원
	체제비						원				회				원
							원				회				원
출장사유 (목적 및 필요성)

※ 해외출장이 포함된 과제의 경우 작성함(세부과제별로 별도 작성)

※ 출장 장소는 도시명으로 작성해야 함

※ 1회 2인에 한함

※ 최초계획서 평가시 반영된 해외출장만 인정함

※ 당해 연구목표와 관련있는 해외출장만 인정함

※ 체제비는 200만원 이내

3. 연구의 필요성

◦ 수행하고자 하는 세부연구개발분야의 국․내외 현황 및 문제점, 전망을 기술하고 국내연구개발의 필요성 및 중요성을 구체적(경제적, 사회적, 기술적 측면 등)으로 기술함. 특히 총괄연구개발과제의 연구개발 필요성에 비추어 해당 세부과제가 어떠한 필요성이 있는가를 중점적으로 기술함.

◦ 세부연구개발과제와 관련된 세부연구책임자의 관련된 선행연구개발업적을 구체적으로 명기하고 관련된 문헌 및 특허 관련 내용을 요약하여 제시함.

4. 연구의 목표

4.1 최종 연구 목표

4.2 당해연도 연구목표 (계속과제에 한함)

5. 연구개발의 내용 및 방법

5.1 연구내용

◦ 연구과제의 최종 도출될 내용 등을 명확하게 기술

5.2 연구방법

◦ 연구과제의 목표달성을 위하여 적용하고자 하는 방법론(접근방법)등을 구체적으로 작성

6. 연차별 연구추진계획

6.1 연구추진체계

◦ 연구와 관련된 국내외 여건 및 연구팀의 여건을 고려하여 최종 연구목표 달성을 위한 연구내용에 대한 기술적 측면에서 연구추진체계를 도식적으로 간략히 기술함.

6.2 연차별 연구 추진계획

◦ 세부연구별 주요 추진내용을 세분화하여 아래의 표에 기술하고, 연구내용의 추진 시점을 표시

연구개발 추진내용	연구개발 연차
	1차년												2차년
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
․추진 내용 ․추진 내용

7. 계량적인 예상 연구성과

가. 연구논문

번호	논문제목	저자명	저널명	집(권)	페이지	Impact factor	국내/국외	SCI여부
1
2

나. 학술발표

번호	발표제목	발표형태	발표자	학회명	연월일	발표지	국내/국제
1
2

다. 지적재산권

번호	출원/등록	특허명	출원(등록)인	출원(등록)국	출원(등록)번호	IPC분류
1
2

라. 정책활용

※ 기타 관련정책에 활용 예를 구체적으로 기술함.

마. 타연구/차기연구에 활용

※ 타연구 및 차기연구에 활용된 예를 구체적으로 기술함.

바. 언론홍보 및 대국민교육

※ 언론홍보 및 대국민교육 내용, 일자 등을 간략히 기술함.

사. 기타

※ 임상시험 , 관련 DB구축, 워크샾 또는 심포지움 개최 등의 경우 구체적으로 기술함.

8. 세부연구책임자 인적사항 및 연구개발실적

(1)  인적사항

성 명	국 문				전 공
	영 문
소 속	기관명		직위		전 화	직 장
						휴대전화
	법인등록 번 호				사업자등록 번 호
	주소				FAX
주민등록번호 (앞번호만 기재)					전자우편

(2)  학력

☞ 학위코드(택1) : 1. 학사, 2. 석사과정, 3. 석사, 4. 박사과정, 5. 박사

연도		학교 (대학교, 단과대, 과)				학위 코드
부터	까지	대학교	단과대	학과	전공명
최종학위 논문명

(3) 경력

연도		기 관	직위 (직명)	비 고
부터	까지

(4) 연구수행 실적 총괄  (최근 3년간)

연 구 비 수혜실적	수 행 중 인 연 구 과 제	저 서		연 구 논 문 발 표
		국 외	국 내	SCI	비SCI	기 타
건	과제	편	편	편	편	편

(5) 주요 정책연구 연구비 수행실적  (최근 3년간, 우선순위 10과제)

연구과제명	역 할	연 구 비		연 구 기 간		논문발표 학술지명
		금 액	지원기관	부터	까지
		원

☞ 역할코드 : 책임연구원 : 1, 연구원 : 2

(6) 저서실적 (최근 3년간)

발행년도	저 서 명	츨 판 사	발행지	비 고

☞ 발행지코드 : 국내 : 1, 국외 : 2

(7) SCI 연구논문 발표실적  (최근 3년간)

연 구 과 제 명	연 구 기 간		연구 논문 발표지 명	발행 년도	역할	연 구 비 지 원 기 관
	부터	까지

* 연구논문 발표 학술지는 국외, 국내 순서로 기재하여 주십시오.

☞ 역할코드 : 책임자 : 1, 연구원 : 2

(8) 수행 중 및 수행예정 연구과제

과 제 명	지 원 기 관	연 구 비	기 간		역 할
			부터	까지
		원

☞ 역할코드 : 책임연구원 : 1, 연구원 : 2

(9) 본 연구와 동일한 또는 유사한 과제를 타 기관에 신청하였을 경우

신 청 대 상 기 관	연 구 기 간		참 여 역 할	신 청 연 구 비
	부터	까지

☞ 역할코드 : 책임연구원 : 1, 연구원 : 2

9. 참여연구원 편성표

(1) 참여연구원 편성표

제 O 세부연구 책임자:
역 할	성 명	주민등록번호 (앞번호만 기재)	소속기관	부서	직 위	최 종 학 위	전공	참여율 (%)	인건비 지급	산학연 구분
책임연구원
연구원
연구보조원
보조원

☞ 학위 코드 : 박사(1) 박사수료(2) 박사과정중(3), 석사(4), 석사수료(5), 석사과정중(6)

학사(7), 전문학사(8), 기타(9)

☞ 인건비 지급코드 : 지급 : 1, 미지급 : 2

☞ 산학연 구분코드 : 산(1), 학(2), 연(3)

(2) 다른기관에서 수행중인 연구과제 참여율(정확하게 기입할 것)

이름	주민번호	지원기관	과제명	비율	역할

☞ 역할 코드 : 연구책임자 : 1, 연구원 : 2

* 위 표의 참여연구원에는 주관연구책임자를 모두 포함하여 계상함.

참 여 연구원	학 계		명	총 참여연구자					명
	연구계		명	책임연구원		명	연구원		명
	산업계		명	연구보조원		명	보조원		명

10. 주요연구기자재 및 시설

연구기자재 및 연구시설명	규 격	수 량	용 도	보유현황	확보 및 활용방안	비 고

* “보유현황”란에는 보유기관의 기관명을 기재하지말고 보유유무만 표기

** “확보 및 활용방안”란에는 구입, 임차 등을 기재하며, 구입 혹은 임차연도를 비고란에 기재

*** 기자재 활용 계획이 없는 과제는 작성하지 않음

11 첨부서류

11.1 주관연구책임자가 당해연도 검역본부과제로 제안하여 선정, 채택된 실적공문사본

11.2 주관연구책임자가 최근2년간 수행한 검역본부과제 중 우수과제로 선정되어 포상된 실적 공문 사본

[별지 제3호서식]

용역연구사업 연차 실적보고서․계획서

※관리번호

용역연구 과 제 명	국문
	영문
주관연구 책 임 자	소속기관		연구지원부서명/담당자			부서명							전화번호
	법인번호					담당자							전자우편
	성명		직위							전공
	(한문)									(세부전공)
	전화		휴대전화							FAX
	전자우편				주민등록번호 (앞번호만 기재)
세부과제 책 임 자	세부과제	성명	소속기관				전자우편				전화번호					휴대전화
	1
	2
	3
연구 참여자	총 참여연구원 (주관연구책임자 포함)		명	책임연구원				명				연구원						명
				연구보조원				명				보조원						명
총연구기간	년 월 일 - 년 월 일( 년 개월)									세부과제수 (제1세부과제포함)
총 연구비	천원
연구년차	연구기간			연구비					신청액						계약액
1차년도	201 . . - 201 . .			천원					천원						천원
2차년도	201 . . - 201 . .			천원					천원						천원
연구개발사업 관계 규정을 준수하며 본 사업을 성실히 수행하고자 201 년도 용역연구개발사업의 연차 실적․계획서를 붙임과 같이 제출하며, 연구사업 관리시스템에 입력합니다. 201 년 월 일 붙임 : 용역연구사업 연차 실적․계획서 주관연구책임자 (자필서명 및 인) 주관연구기관장 (직인) 농림축산검역본부장 귀하

편집순서 1 : 겉표지

(뒷면)                               (측면)                             (앞면)

			과 제 명 2 0 1 농 림 축 산 검 역 본 부
					연차 실적․계획서
				국문과제명 영문과제명 주관연구기관 : 농림축산검역본부
	주 의 ( 주 의 내 용 기 재 ) (□글 14 point 고딕체)

※ 주 의 내 용

주      의

1. 이 보고서는 농림축산검역본부에서 시행한 용역연구개발사업의 연차 실적․계획서입니다.

2. 이 보고서 내용을 발표할 때에는 반드시 농림축산검역본부에서 시행한 용역연구개발사업의 연구결과임을 밝혀야 합니다.

3. 국가과학기술 기밀유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 아니 됩니다.

편집순서 2 : 제출문

제    출    문

농림축산검역본부장  귀 하

이 보고서를 “ 과제명(주관연구기관명/주관연구책임자) ”과제의 연차 실적․계획서로 제출합니다.

201  .   .

주관연구기관명 :

주관연구책임자 :

제 1세부과제명 :

(제1세부연구기관/세부과제책임자):

제 2세부과제명 :

(제2세부연구기관/세부과제책임자):

제 3세부과제명 :

(제3세부연구기관/세부과제책임자):

위탁과제명 :

(위탁연구기관/위탁연구책임자):

편집순서 3

목    차

□ 당해년도 연구개발사업 실적

1. 연구개발과제의 최종 연구개발목표와 당해년도 연구개발목표

2. 연구개발과제의 당해년도 연구개발내용

3. 연구개발과제의 당해년도 연구성과

4. 연구수행에 따른 문제점 및 대책

5. 실적요약문

□ 차년도 연구개발사업 계획

<총괄연구과제>

1. 요약문

2. 연구개발비 총괄표

3. 연구책임자 인적사항 및 연구개발실적 (변경된 경우만 작성)

4. 참여연구원 편성표

5. 총괄연구과제의 차년도 연구개발목표

6. 총괄연구과제의 차년도 연구개발계획

7. 연차별 연구수행일정

8. 첨부서류

<제0세부연구과제>

1. 요약문

2. 차연도 연구개발비 총괄표 (세부과제)

3. 제0세부연구과제의 차년도 연구개발목표

4. 제0세부연구과제의 차년도 연구개발계획

5. 첨부서류

※ 작성방법

○ 세부연구과제가 없는 경우 : 총괄연구과제 양식만을 작성

○ 세부연구과제가 있는 경우

- 총괄연구과제 작성양식을 주관연구책임자가 작성

- 주관연구책임자의 세부연구과제는 제1세부과제로 작성

당해년도 연구개발사업 실적

1. 연구개발과제의 최종 연구개발목표와 당해년도 연구개발목표

◦ 선정당시 ｢연구사업개발 계획서｣상의 내용과 동일하게 작성해야 함. 단 연구계획상의 내용(연구내용, 목표 등)이 과제 진행중에 변경된 경우(관리기간의 승인을 받은 경우만 해당됨) 관련 내용을 간략히 서술하기 바람.

◦ 구성된 세부과제의 개수만큼 표를 변경하여 작성.

(1) 최종 연구개발 목표

구분	최종 연구개발 목표
총괄연구과제
제1세부과제
제2세부과제
제3세부과제
제4세부과제

(2) 당해년도 연구개발목표

구분	당해년도 연구개발 목표
총괄연구과제
제1세부과제
제2세부과제
제3세부과제
제4세부과제

2. 연구개발과제의 당해년도 연구개발내용

◦ 연구개발과제의 당해년도 연구개발내용(총괄-5쪽내외/세부-2쪽내외)을 구체적으로 기술.

◦ 구성된 세부의 개수만큼 양식을 변경하여 작성.

(1) 총괄연구개발과제

총괄연구개발과제명
총괄연구책임자	성명 / 소속 / 전공

(2) 제1세부과제

제1세부과제명
제1세부과제책임자	성명 / 소속 / 전공

(3) 제2세부과제

제2세부과제명
제2세부과제책임자	성명 / 소속 / 전공

(4) 제3세부과제

제3세부과제명
제3세부과제책임자	성명 / 소속 / 전공

(5) 제4세부과제

제4세부과제명
제4세부과제책임자	성명 / 소속 / 전공

3. 연구개발과제의 당해년도 연구성과

◦ 당해년도 연구기간내의 아래 연구성과를 종합하여 숫자로 작성. (학술지 게재는 출판된 논문에 한함.)

◦ 구성된 세부의 개수만큼 양식을 변경하여 작성.

◦ 성과 내용은 총괄 및 세부별로 구분하여 해당사항만 작성함.

(2) 성과 내용

1) 총괄연구개발과제

총괄과제명
총괄과제책임자	성명 / 소속 / 전공

가. 연구논문

번호	논문제목	저자명	저널명	집(권)	페이지	Impact factor	국내/국외	SCI여부
1
2

나. 학술발표

번호	발표제목	발표형태	발표자	학회명	연월일	발표지	국내/국제
1
2

다. 지적재산권

번호	출원/등록	특허명	출원(등록)인	출원(등록)국	출원(등록)번호	IPC분류
1
2

라. 정책활용

※ 기타 관련정책에 활용 예를 구체적으로 기술함.

마. 타연구/차기연구에 활용

※ 타연구 및 차기연구에 활용된 예를 구체적으로 기술함.

바. 언론홍보 및 대국민교육

※ 언론홍보 및 대국민교육 내용, 일자 등을 간략히 기술함.

사. 기타

※ 임상시험 , 관련 DB구축, 워크샾 또는 심포지움 개최 등의 경우 구체적으로 기술함.

2) 제O세부과제

제O세부과제명
제O세부과제책임자	성명 / 소속 / 전공

가. 연구논문

번호	논문제목	저자명	저널명	집(권)	페이지	Impact factor	국내/국외	SCI여부
1
2

나. 학술발표

번호	발표제목	발표형태	발표자	학회명	연월일	발표지	국내/국제
1
2

다. 지적재산권

번호	출원/등록	특허명	출원(등록)인	출원(등록)국	출원(등록)번호	IPC분류
1
2

라. 정책활용

※ 기타 관련정책에 활용 예를 구체적으로 기술함.

마. 타연구/차기연구에 활용

※ 타연구 및 차기연구에 활용된 예를 구체적으로 기술함.

바. 언론홍보 및 대국민교육

※ 언론홍보 및 대국민교육 내용, 일자 등을 간략히 기술함.

사. 기타

※ 임상시험 , 관련 DB구축, 워크샾 또는 심포지움 개최 등의 경우 구체적으로 기술함.

4. 연구수행에 따른 문제점 및 대책

◦ 선정당시 설정한 목표달성 미흡시 이에 대한 문제점 및 해결방안을 구체적으로 기술할 것.

5. 실적 요약문

총괄 연구과제 요약

과제 고유번호	자동부여				공개가능여부
과제명
주관 연구책임자	성 명			주민등록번호 (앞번호만 기재)
	소속 기관명
	전자우편			전화번호

○ 연구목표 (400 ～600자)

○ 연구내용  (1000～1200자)

○ 연구성과(응용분야 및 활용범위포함)  (400 ～600자)

○ 총괄 참여연구원

성 명	주민등록번호(앞번호만 기재)	성 명	주민등록번호(앞번호만 기재)

Keywords (5개 내외)	한글
	영문

주 1) 연구목표, 연구내용, 연구성과를 서술형으로 기재

2) 국가연구개발사업 DB를 통한 공개를 희망하지 않는 경우 공개가능여부란에 “공개불가”로 표시

3) 연구성과는 그간의 연구결과 및 기대성과를 서술

세부 연구과제 요약

과제 고유번호	자동부여				공개가능여부
주관과제명
제 0 세부과제명
연구책임자	성 명			주민등록번호 (앞번호만 기재)
	소속 기관명
	전자우편			전화번호

○ 연구목표 (400 ～600자)

○ 연구내용  (1000～1200자)

○ 연구성과(응용분야 및 활용범위포함)  (400 ～600자)

○ 참여연구원

성 명	주민등록번호(앞번호만 기재)	성 명	주민등록번호(앞번호만 기재)

Keywords (5개 내외)	한글
	영문

주1) 연구목표, 연구내용, 연구성과를 서술형으로 기재

2) 국가연구개발사업 DB를 통한 공개를 희망하지 않는 경우 공개가능여부란에 “공개불가”로 표시

3) 연구성과는 그간의 연구결과 및 기대성과를 서술

4) 세부과제가 없을시 작성하지 않음 (세부과제별로 작성)

차년도 연구개발사업 계획

◦ 차기단계 연구개발사업 계획서의 표지는 색지로 작성하여 쉽게 구분될 수 있도록 함.

총괄연구과제

1. 요약문

※ 간략하게 기술하여 주시고 요약문의 총분량은 1page 이내로 제한함.

고유번호
연구과제명
주관연구 책 임 자		성명		소속
		전공
색인단어	국문
	영문
◆ 차년도 연구개발목표
◆ 차년도 연구개발내용 및 방법
◆ 기대효과 (응용분야 및 활용방안)

2. 연구개발비 총괄표

용역연구원가계산서
구 분 비 목			금 액		구 성 비		비 고
인건비	책 임 연 구 원			원		%	(기획재정부 계약예규) 예정가격 작성기준 제26조(인건비) 별표 5
	연 구 원			원		%
	연 구 보 조 원			원		%
	보 조 원			원		%
	인건비 소계			원		%
경비	여비	국내여비		원		%	공무원 여비규정 여비지급 구분표 별표1 - 책임연구원 : 제1호 - 그 외 : 제2호
		국외여비		원		%
		여비 소계		원		%
	유 인 물 비			원		%
	전 산 처 리 비			원		%
	시 약 및 재 료 비			원		%
	회 의 비			원		%	총 용역 연구비의 10% 또는 30% 이하
	임 차 료			원		%
	교 통 통 신 비			원		%
	감 가 상 각 비			원		%
	경비 소계			원		%
일반관리비				원		%	(인건비 + 경비)의 5%이하
이 윤				원		%	(인건비 + 경비 + 일반관리비)의 10% 이하
부가가치세				원		%	(인건비 + 경비 + 일반관리비 + 이윤) × 10%
총 원 가				원		%	인건비 + 경비 + 일반관리비 + 이윤 + 부가가치세
* 원가계산에 의한 예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규) 제4절 학술연구용역 원가계산(제23조~제29조)을 참고하여 구체적으로 산출 * 별첨 : 비목별 산출내역(비목별 산정기준을 참고하여 작성 제출)

2) 세부과제별 용역연구비  (세부과제가 없는 경우 (1) ～ (4)까지 작성하지 마십시오.)

* 인건비 소계는 책임연구원 + 연구원 + 연구보조원 + 보조원의 합계임

(1) 인건비
세부과제순번	책임연구원		연구원		연구보조원		보조원		인건비소계
1		원		원		원		원		원
2		원		원		원		원		원
3		원		원		원		원		원
4		원		원		원		원		원
5		원		원		원		원		원
합계		원		원		원		원		원
비중(%)		%		%		%		%		%

* 여비소계는 국내여비 + 국외 여비의 합계임

(2) 경비(여비)
세부과제순번	국내여비		국외여비		여비소계
1		원		원		원
2		원		원		원
3		원		원		원
4		원		원		원
5		원		원		원
합계		원		원		원
비중(%)		%		%		%

3) 경비
세부과제순번	유인물비		전산 처리비		시약 및 재료비		회의비		임차료		교통 통신비		감가 상각비		경비소계
1		원		원		원		원		원		원		원		원
2		원		원		원		원		원		원		원		원
3		원		원		원		원		원		원		원		원
4		원		원		원		원		원		원		원		원
5		원		원		원		원		원		원		원		원
합계		원		원		원		원		원		원		원		원
비중(%)		%		%		%		%		%		%		%		%

* 경비 소계는 유인물비 + 전산처리비 + 시약 및 재료비 + 회의비 + 임차료 + 교통통신비 + 감가상각비의 합계임

* 총원가는 각 세부과제별 (1)합계 + (2)합계 + (3)합계 + 일반관리비를 계산함

(4) 일반관리비
세부과제순번	금액		총원가
1		원		원
2		원		원
3		원		원
4		원		원
5		원		원
합계		원		원
비중(%)		%		%

《비목별 산출내역 》(비목순서대로 산출내역을 구체적으로 작성)

1) 인건비

○ 책임연구원          원 ×  월 ×  명 ×   % =     원

○ 연구원              원 ×  월 ×  명 ×   % =     원

○ 연구보조원          원 ×  월 ×  명 ×   % =     원

○ 보조원              원 ×  월 ×  명 ×   % =     원

2) 경  비

○ 국내여비            원 ×   명 ×    회 =          원

(직급별로 구분하여 일비, 식비, 숙박비 별로 기재)

○ 국외여비            원 ×   명 ×    회 =          원

(직급별로 구분하여 여행목적지, 기간을 표시하고 일비, 식비, 숙박비 별로 기재)

○ 유인물비

( 문헌복사비, 인쇄비등)

-        쪽 ×       부 ×       원 =             원

○ 전산처리비

- 전산기종 단 가 × 사용할 시간 × 회수 =         원

(외부 전산자료 사용료 및 부대비용)

○ 시약 및 재료비

- 재료명 : 단가 × 수량 =                         원

(내구연수가 1년 이하의 시약․재료 구입비 및 시험분석료)

○ 회의비

(회의비, 세미나 개최비용, 공청회비 등)

○ 임차료

- 품명 : 단가 × 수량 =                           원

(특수실험실습도구를 외부로부터 임차, 회의장 사용료)

○ 교통통신비

(연구내용과 직접 관련된 시내교통비, 전신전화사용료, 우편료)

○ 감가상각비

(연구와 관련된 특수실험실습기구․기계장치에 대한 세법에 의해 산정)

3) 일반관리비

○ (인건비+경비) × 5%이내                         원

※ 각 항목별 여백이 부족할 경우에는 ‘별지 작성’이라고 기재한 후 별도 첨부

3) 해외출장 계획서
과제명
주관연구기관							주관연구 책임자							(인 또는 서명)
세부과제 연구기관							세부과제 연구책임자							(인 또는 서명)
세부과제 연구개발비 (당해연도)					원		해외여비 총 액 (당해연도)									원
출장자	성명	소속		직급			출장기간								출장장소
							부터				까지
경비	구분	성명	직급			단가				횟수			총액
	항공료							원				회				원
								원				회				원
	체제비							원				회				원
								원				회				원
출장사유 (목적 및 필요성)

※ 해외출장이 포함된 과제의 경우 작성함(세부과제별로 별도 작성)

※ 출장 장소는 도시명으로 작성해야 함

※ 1회 2인에 한함

※ 최초계획서 평가시 반영된 해외출장만 인정함

※ 당해 연구목표와 관련있는 해외출장만 인정함

※ 체제비는 200만원 이내

3. 연구책임자 인적사항 및 학․경력

◦ 선정당시 연구사업계획서와 다를 경우만 작성

(1)  인적사항

성 명	국 문				전 공
	영 문
소 속	기관명		직위		전 화	직 장
						휴대전화
	법인등록 번 호				사업자등록 번 호
	주소				FAX
주민등록번호 (앞번호만 기재)					전자우편

(2)  학력

☞ 학위코드(택1) : 1. 학사, 2. 석사과정, 3. 석사, 4. 박사과정, 5. 박사

연도		학교 (대학교, 단과대, 과)				학위 코드
부터	까지	대학교	단과대	학과	전공명
최종학위 논문명

(3) 경력

연도		기 관	직위 (직명)	비 고
부터	까지

(4) 연구수행 실적 총괄  (최근 3년간)

연 구 비 수혜실적	수 행 중 인 연 구 과 제	저 서		연 구 논 문 발 표
		국 외	국 내	SCI	비SCI	기 타
건	과제	편	편	편	편	편

(5) 주요 정책연구 연구비 수행실적  (최근 3년간, 우선순위 10과제)

연구과제명	역 할	연 구 비		연 구 기 간		논문발표 학술지명
		금 액	지원기관	부터	까지
		원

☞ 역할코드 : 책임연구원 : 1, 연구원 : 2

(6) 저서실적 (최근 3년간)

발행년도	저 서 명	츨 판 사	발행지	비 고

☞ 발행지코드 : 국내 : 1, 국외 : 2

(7) SCI연구논문 발표실적  (최근 3년간)

연 구 과 제 명	연 구 기 간		연구 논문 발표지 명	발행 년도	역할	연 구 비 지 원 기 관
	부터	까지

* 연구논문 발표 학술지는 국외, 국내 순서로 기재하여 주십시오.

☞ 역할코드 : 책임자 : 1, 연구원 : 2

(8) 수행 중 및 수행예정 연구과제

과 제 명	지 원 기 관	연 구 비	기 간		역 할
			부터	까지
		원

☞ 역할코드 : 책임연구원 : 1, 연구원 : 2

(9) 본 연구와 동일한 또는 유사한 과제를 타 기관에 신청하였을 경우

신 청 대 상 기 관	연 구 기 간		참 여 역 할	신 청 연 구 비
	부터	까지

☞ 역할코드 : 책임연구원 : 1, 연구원 : 2

4. 참여연구원 편성표

1) 연구책임자 인적사항 및 학․경력 (선정당시 연구사업계획서와 다를 경우만 작성)

(1)  인적사항

성 명	국 문				전 공
	영 문
소 속	기관명		직위		전 화	직 장
						휴대전화
	법인등록 번 호				사업자등록 번 호
	주소				FAX
주민등록번호 (앞번호만 기재)					전자우편

(2)  학력

☞ 학위코드(택1) : 1. 학사, 2. 석사과정, 3. 석사, 4. 박사과정, 5. 박사

연도		학교 (대학교, 단과대, 과)				학위 코드
부터	까지	대학교	단과대	학과	전공명
최종학위 논문명

(3) 경력

연도		기 관	직위 (직명)	비 고
부터	까지

(4) 연구수행 실적 총괄  (최근 3년간)

연 구 비 수혜실적	수 행 중 인 연 구 과 제	저 서		연 구 논 문 발 표
		국 외	국 내	외국학술지	국내학회지	기 타
건	과제	편	편	편	편	편

(5) 연구비 수행실적  (최근 3년간)

연구과제명	역 할	연 구 비		연 구 기 간		논문발표 학술지명
		금 액	지원기관	부터	까지
		원

☞ 역할코드 : 책임연구원 : 1, 연구원 : 2

(6) 저서실적 (최근 3년간)

발행년도	저 서 명	츨 판 사	발행지	비 고

☞ 발행지코드 : 국내 : 1, 국외 : 2

(7) 연구논문 발표실적  (최근 3년간)

연 구 과 제 명	연 구 기 간		연구 논문 발표지 명	발행 년도	역할	연 구 비 지 원 기 관
	부터	까지

* 연구논문 발표 학술지는 국외, 국내 순서로 기재하여 주십시오.

☞ 역할코드 : 책임자 : 1, 연구원 : 2

(8) 수행 중 및 수행예정 연구과제

과 제 명	지 원 기 관	연 구 비	기 간		역 할
			부터	까지
		원

☞ 역할코드 : 책임연구원 : 1, 연구원 : 2

(9) 본 연구와 동일한 또는 유사한 과제를 타 기관에 신청하였을 경우

신 청 대 상 기 관	연 구 기 간		참 여 역 할	신 청 연 구 비
	부터	까지

☞ 역할코드 : 책임연구원 : 1, 연구원 : 2

* 세부과제가 있는 경우 주관연구책임자가 제1세부과제 책임자이어야 한다.

☞ 학위 코드 : 박사(1) 박사수료(2) 박사과정중(3), 석사(4), 석사수료(5), 석사과정중(6)

학사(7), 전문학사(8), 기타(9)

☞ 인건비 지급코드 : 지급 : 1, 미지급 : 2

☞ 산학연 구분코드 : 산(1), 학(2), 연(3)

2) 참여연구원 편성표
주관연구책임자:
세부과제 순 번	역 할	성 명	주민등록번호 (앞번호만 기재)	소속기관	부서	직 위	최종 학위	전 공	참여율 (%)	인건비 지급	산학연구분
	책임연구원
	연구원
	연구보조원
	보조원
	책임연구원
	연구원
	연구보조원
	보조원
	책임연구원
	연구원
	연구보조원
	보조원

* 위 표의 참여연구원에는 주관연구책임자를 모두 포함하여 계상함.

참 여 연구원	학 계		명	총 참여연구자					명
	연구계		명	책임연구원		명	연구원		명
	산업계		명	연구보조원		명	보조원		명

(2) 다른기관에서 수행중인 연구과제 참여율(정확하게 기입할 것)

이름	주민등록번호 (앞번호만 기재)	수행기관	과제명	비율	역할
				%
				%
				%
				%

☞ 역할 코드 : 연구책임자 : 1, 연구원 : 2

5. 총괄연구과제의 차년도 연구개발목표

◦ 선정당시 ｢연구사업 계획서｣와 제출하였던 ｢연차실적․계획서｣상의 내용과 동일하게 작성해야 함.

◦ 차년도 연구개발 목표, 추진계획 등이 선정당시와 비교하여 변경된 경우에는 그 이유와 변경사항을 구체적으로 기재하여야 함.

6. 총괄연구과제의 차년도 연구개발계획

◦ 총괄과제의 당해년도 연구내용 및 방법에 대해 5쪽이내의 분량으로 구체적으로 기술.

7. 연차/단계별 연구수행일정

◦ 세부연구별 주요 추진내용을 세분화하여 아래의 표에 기술하고, 연구내용의 추진 시점을 화살표로 표시함.

연구개발 추진내용	연구개발 연차
	1차년												2차년
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
제1세부과제 ․추진 내용 ․추진 내용 제2세부과제 ․추진 내용 ․추진 내용

(    )차년도 연구수행일정

연 구 내 용	월 별 추 진 일 정												비 고
제1세부과제 ․추진 내용 ․추진 내용 제2세부과제 ․추진 내용 ․추진 내용
추 진 진 도 ( % )
연 구 비 (백만원)

8. 첨부서류

◦ 본 연구개발사업의 전년도 성과로 기술된 게재된 학술지 논문 전체 사본과 산업재산권 등록증(또는 출원서) 사본을 반드시 첨부할 것.

제○세부연구과제

◦ 세부과제별로 별도로 작성함.

◦ 각 세부과제의 계획서의 표지는 색지로 작성하여 쉽게 구분될 수 있도록 함. 표지에는 다음과 같은 사항을 반드시 기재함.

세부과제명 :

세부과제책임자 : 성명/소속/전공

1. 요약문

※ 간략하게 기술하여 주시고 요약문의 총분량은 1page 이내로 제한함.

접수번호
총괄과제명
주관연구 책 임 자		성명		주민등록번호 (앞번호만 기재)
		직위		소속
세부과제명
세부연구 책 임 자		성명		주민등록번호 (앞번호만 기재)
		직위		소속
색인단어	국문
	영문
◆ 차년도 연구목표
◆ 차년도 연구개발내용 및 방법
◆ 기대효과 (응용분야 및 활용방안)

2. 차년도 연구개발비 총괄표 (세부과제)

용역연구원가계산서
구 분 비 목			금 액		구 성 비		비 고
인건비	책 임 연 구 원			원		%	(기획재정부 계약예규) 예정가격 작성기준 제26조(인건비) 별표 5
	연 구 원			원		%
	연 구 보 조 원			원		%
	보 조 원			원		%
	인건비 소계			원		%
경비	여비	국내여비		원		%	공무원 여비규정 여비지급 구분표 별표1 - 책임연구원 : 제1호 - 그 외 : 제2호
		국외여비		원		%
		여비 소계		원		%
	유 인 물 비			원		%
	전 산 처 리 비			원		%
	시 약 및 재 료 비			원		%
	회 의 비			원		%	총 용역 연구비의 10% 또는 30% 이하
	임 차 료			원		%
	교 통 통 신 비			원		%
	감 가 상 각 비			원		%
	경비 소계			원		%
일반관리비				원		%	(인건비 + 경비)의 5%이하
이 윤				원		%	(인건비 + 경비 + 일반관리비)의 10% 이하
부가가치세				원		%	(인건비 + 경비 + 일반관리비 + 이윤) × 10%
총 원 가				원		%	인건비 + 경비 + 일반관리비 + 이윤 + 부가가치세
* 원가계산에 의한 예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규) 제4절 학술연구용역 원가계산(제23조~제29조)을 참고하여 구체적으로 산출 * 별첨 : 비목별 산출내역(비목별 산정기준을 참고하여 작성 제출)

《비목별 산출내역 》(비목순서대로 산출내역을 구체적으로 작성)

1) 인건비

○ 책임연구원          원 ×  월 ×  명 ×   % =     원

○ 연구원              원 ×  월 ×  명 ×   % =     원

○ 연구보조원          원 ×  월 ×  명 ×   % =     원

○ 보조원              원 ×  월 ×  명 ×   % =     원

2) 경  비

○ 국내여비            원 ×   명 ×    회 =          원

(직급별로 구분하여 일비, 식비, 숙박비 별로 기재)

○ 국외여비            원 ×   명 ×    회 =          원

(직급별로 구분하여 여행목적지, 기간을 표시하고 일비, 식비, 숙박비 별로 기재)

○ 유인물비

(문헌복사비, 인쇄비등)

- 쪽  ×       부 ×       원 =             원

○ 전산처리비

- 전산기종 단 가 × 사용할 시간 × 회수 =         원

(외부 전산자료 사용료 및 부대비용)

○ 시약 및 재료비

- 재료명 : 단가 × 수량 =                         원

(내구연수가 1년 이하의 시약․재료 구입비 및 시험분석료)

○ 회의비

(회의비, 세미나 개최비용, 공청회비 등)

○ 임차료

- 품명 : 단가 × 수량 =                           원

(특수실험실습도구를 외부로부터 임차, 회의장 사용료)

○ 교통통신비

(연구내용과 직접 관련된 시내교통비, 전신전화사용료, 우편료)

○ 감가상각비

(연구와 관련된 특수실험실습기구․기계장치에 대한 세법에 의해 산정)

3) 일반관리비

○ (인건비+경비) × 5%이내                              원

※ 각 항목별 여백이 부족할 경우에는 ‘별지 작성’이라고 기재한 후 별도 첨부

2) 해외출장 계획서
과제명
주관연구기관							주관연구 책임자							(인 또는 서명)
과제명									세부과제순번					1
세부과제 연구기관							세부과제 연구책임자							(인 또는 서명)
세부과제 연구개발비 (당해연도)					원		해외여비 총 액 (당해연도)									원
출장자	성명	소속		직급			출장기간								출장장소
							부터				까지
경비	구분	성명	직급			단가				횟수			총액
	항공료							원				회				원
								원				회				원
	체제비							원				회				원
								원				회				원
출장사유 (목적 및 필요성)

※ 해외출장이 포함된 과제의 경우 작성함(세부과제별로 별도 작성)

※ 출장 장소는 도시명으로 작성해야 함

※ 1회 2인에 한함

※ 최초계획서 평가시 반영된 해외출장만 인정함

※ 당해 연구목표와 관련있는 해외출장만 인정함

※ 체제비는 200만원 이내

3. 제○세부연구과제의 당해연도 연구개발목표

◦ 선정당시 ｢연구사업 계획서｣와 제출하였던 ｢연차실적․계획서｣ 상의 내용과 동일하게 작성해야 함.

◦ 당해년도 연구개발 목표, 추진계획 등이 선정당시와 비교하여 변경된 경우에는 그 이유와 변경사항을 구체적으로 기재하여야 함.

4. 제○세부연구과제의 당해연도 연구개발계획

◦ 총괄과제의 당해년도 연구내용 및 방법에 대해 5쪽이내의 분량으로 구체적으로 기술.

5. 첨부서류

◦ 본 연구개발사업의 전년도 성과로 기술된 게재된 학술지 논문 전체 사본과 산업재산권 등록증(또는 출원서) 사본을 반드시 첨부할 것.

본문작성 요령

1. 본문의 순서는 가급적 장, 절, 1, 가, (1), (가), ①, ㉮ 등으로 유지하되, 각 기관의 형식을 준용하며,

● 장은 HWP 16 point 고딕체

● 절은 HWP 14 point 신명조체

● 본문은 HWP 10 point 신명조체로 한다.

단, 본문의 내용 중 중요부문은 고딕체로 사용할 수 있다.

2. 장은 원칙적으로 페이지를 바꾸어 시작한다.

3. 본문은 HWP 10 point에서 낱말간격(자간)은 0, 줄간격은 200% 이내로 한다.

4. 페이지 번호는 하단 중앙 아래에 HWP 10 point로 한다.

5. 각주(註)는 해당 페이지 하단에 HWP 9 point로 표기하며, 본문과 구분토록 한다.

6. 도(圖)와 표(表)는 어떤 프로그램으로 작성하여도 관계없으며, 도(圖)와 표명(票名)은 (  ) 내에 영문으로 표기한다.

7. 페이지 수는 편집순서 2의 제출문부터 시작하여 편집순서 3까지 기재한다.

단, 삽입물이 있을 때에는 그 삽입물의 크기에 불문하고 1면을 한 페이지로 하여 일련번호를 붙인다.

8. 한글, 한문, 영문을 혼용한다.

9. 참고문헌(Reference) 인용의 경우 본문 중에 사용처를 반드시 표기한다.

10. 인쇄규격

- 크기 : A4 용지

- 제본 : 양면 좌철 제본

※ 각 항목별 여백이 부족할 경우에는 ‘별지 작성’이라고 기재한 후 별도 첨부

[ 부  표 ]

인  쇄  내  용

Ⅰ. 인쇄규격

1. 크기 : A4 용지

2. 제본 : 양면 좌철 제본

Ⅱ. 편집순서

1. 표  지

2. 제출문

3. 요약문

4. 목차 및 본문

가. 총괄연구과제

나. 세부과제

5. 연구과제요약

가. 총괄연구과제

나. 세부과제

Ⅲ. 참고사항

● 워드프로세서(□글97 이상, MS Word) 사용

[별지 제4호서식]

용역연구 표준계약서
계약자	발 주 처	경기도 안양시 만안구 안양6동 480번지 농림축산검역본부
	계약상대자	∙ 상호 또는 법인명칭 : ∙ 사업자등록번호 : ∙ 주소 : ∙ 대표자 : ․ 전화번호 :
계약내용	용 역 연 구 과 제 명
	계 약 금 액		금 (￦ )
	총용역부기금액		금 (￦ )
	계 약 보 증 금		금 (￦ ) 계약금의 10%이상
	지 체 상 금 율		천분의 이점오(2.5/1,000％)
	계 약 기 간		. . ～ . . (총 년간) 전체 용역기간 기입
	당 해 년 도		. . ～ . . 까지 당해연도 용역기간 기입
	결과보고서 제출기일		(계약종료일자로 작성)
	기 타 사 항
계약담당공무원과 계약상대자는 상호 대등한 입장에서 위 용역연구과제에 대한 도급계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 확약하며 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명 날인한 후 각각 1통씩 보관한다. 붙임서류 : 1. 용역연구계약 특수조건 1부. 2. 용역연구사업계획서 년 월 일 (계약체결일자 기입) ∙ 계약담당공무원 - 농림축산검역본부 재무관 (인) - 용역과제담당자 : 소속 직위 성 명 (인) ∙ 계 약 상 대 자 - 주관연구기관장 : 대표자 (인) - 주관연구책임자 : 소속 직위 성 명 (인)

용역연구계약 특수조건

제1조(목적) 이 용역연구계약특수조건은 농림축산검역본부(이하 “검역본부”이라 한다) 계약담당공무원과 계약상대자가 체결하는 용역연구계약의 내용을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(사업의 수행) 계약상대자는 본 사업을 사업계획서에 따라 계약금액 범위 내에서 비목별 한도 내에서 수행하여야 한다.

제3조(대금 지급) 검역본부는 다음과 같이 대금 지급을 한다.

① 선금액은 계약총액(100분의 70)의 범위 이내에서 지급할 수 있다.

② 잔금은 용역연구사업관리규정 제25조 제2항에 의한 연구결과를 검사한 후 지급하되, 본 사업계획서에 계상된 비목별 사용내역에 대하여는 잔금 지급시에 정산하여 차감한다.

③ 위 제1항에 정한 용역연구비 지급비율은 검역본부의 필요에 따라 조정 지급할 수 있다.

④ 위 제2항에서 정한 정산에 있어 계약상대자는 영수증 사본 등 정산서류를 보고서 제출기일까지 검역본부 또는 검역본부가 지정한 기관에 제출하여야 한다.

⑤ 계속과제 용역연구과제인 경우 계약상대자는 총사업기간은 명기만 하고, 용역연구연차실적ㆍ계획서 평가결과에 따라 매년 검역본부와 당해연도 용역계약을 체결하여야 한다.

제4조(계약보증금) 계약상대자는 계약체결일까지 계약보증금(면제시 계약보증금 지급각서)을 납부(제출)하여야 한다.

제5조(연구비의 관리) ① 계약상대자는 과제별로 다른 용도의 자금과 분리하여 사용하고, 회계관리사항을 증빙할 수 있도록 별도의 계정을 설정하여 다음 각 호 1과 같이 관리하여야 한다.

1. 용역연구비에 관한 사무는 계약상대자 또는 계약상대자가 그 소속직원 중에서 지정하는 자(이하 “연구비관리자”라 한다)가 처리한다.

2. 연구비관리자는 지급받은 연구비를 가까운 한국은행, 체신관서 또는 금융기관에 계약상대자 또는 자체규정 등에 의한 계약상대자의 소속 직원 중 위임받은 자를 예금주로 하여 예치하고 선량한 관리자의 주의를 다하여 운용하여야 한다.

3. 연구비관리자는 기본적으로 “현금출납부” 또는 이에 준한 원장을 비치하고 비목별로 구분하여 출납상황을 기록․관리하여야 한다.

4. 연구비관리자는 지급에 관한 결의서 및 영수증서와 기타 필요한 경우 견적서․청구서 또는 계약서․검사조서 등 지급의 내용을 증명하는데 필요한 증빙서류를 구비하되, 이를 월별 또는 분기별로 구분하여 편철하고 그 표지에는 총건수․총매수․총금액 및 관리자의 직․성명을 기재․날인하여야 한다.

5. 연구비관리자는 예치운용증서(통장), 장부, 증빙서류 등의 보존을 최소한 당해 과제 종료년도 후 5년간 보존하여야 한다.

② 계약상대자는 2개 이상의 용역연구과제를 동시에 수행할 경우에는 이를 통합하여 별도의 계정을 설정하여 관리할 수 있되, 각 연구과제별로 지급받고 사용한 회계관리 사항을 구분하여 증빙할 수 있도록 하여야 한다.

③ 용역연구비는 주관연구기관의 법인신용카드를 사용하거나 계좌이체의 형태로 사용하여야 하며 카드사용이나 계좌이체가 불가능한 경우에 한하여 현금을 사용할 수 있으며 현금영수증을 첨부하여야 한다.

제6조(계약의 변경) ① 계약상대자는 검역본부의 동의 없이 사업계획서의 내용 및 기타 계약사항을 변경하지 못한다.

② 검역본부는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 용역계약을 변경할 수 있다.

1. 계약상대자로부터 주관연구책임자의 사망ㆍ사직 등 불가피한 사유로 인한 연구책임자의 변경, 세부과제연구책임자의 변경, 계약금액 및 계약기간 등 계약내용에 대한 변경요청이 있는 경우

2. 계속과제에 대하여 검역본부의 예산사정, 당해과제의 연차실적ㆍ계획서 평가결과 등에 따라 계약의 변경이 필요한 경우

3. 주관연구기관의 변경이 있는 경우

4. 기타 검역본부가 계약의 내용을 변경하는 것이 필요하다고 인정하는 경우

③ 계약상대자는 제2항 각호에 의한 변경사유로 계약을 변경요청하고자 하는 경우에는 연구종료 30일전까지 검역본부에 변경승인신청서를 제출하여 검역본부의 승인을 받아야 한다.

④ 용역연구비 변경에 관한 사항은 별표3 용역연구과제 변경기준에 따르며, 사전승인사항의 변경은 계약종료일 30일 전까지 요청할 수 있다.

⑤ 계약상대자는 연구비 사용시 비목변경, 연구원의 인력변경 등 용역계약 내용의 변경시 검역본부에 용역연구사업변경승인요청서를 제출하여 변동사항에 대해 즉시 통보하여야 한다.

제7조(기간연장 및 지체상금 등) ① 계약상대자가 계약기간에 계약의 이행을 완료하지 못할 때에는 계약상대자는 검역본부에 그 사유와 완료일을 명백히 한 계약연장신청서를 계약만료 30일전까지 제출하여야 한다. 검역본부는 사업수행에 지장이 없는 범위 내에서 계약기간을 연장 승인할 수 있다.

② 계약상대자가 소정의 기간 내에 본 계약을 완수하지 못하여 실패로 평가되었을 경우 검역본부가 인정한 기간 내에 계약기간을 연장하여 수행하고 검역본부가 지정한 절차에 따라 재평가 받아야한다.

③ 계약기간을 연장하여 수행하는 경우 계약상대자는 지연일수 매 1일에 대하여 계약금액의 1,000분의 2.5에 해당하는 지체상금을 검역본부에 납부하여야 한다. 단, 연구수행의 효율화를 위하여 수요기관의 의견에 따라 기간이 연장될 때에는 지체상금을 면제할 수 있다.

제8조(계약의 해제 등) ① 검역본부는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하였을 경우에는 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

1. 계약상대자가 계약내용을 위반하였을 경우

2. 계약상대자가 연구과제의 수행을 중도에 포기한 경우

3. 계약상대자의 태만으로 약정한 기일내에 연구과제를 완성할 가능성이 없다고 판단되었을 경우

4. 검역본부의 승인없이 계약상대자가 본 계약에 의한 권리의무를 제3자에게 양도하거나 본 사업의 일부를 제3자에게 하청하였을 경우

5. 검역본부의 진도관리 평가결과 연구중단으로 결정되는 경우

6. 검역본부의 연차실적ㆍ계획서 평가결과 연구중단으로 결정되는 경우

7. 검역본부의 연구결과평가의 보완 요구에 의하여 계약상대자가 제출한 연구보고서의 내용이 보완요구에 위배되는 경우

8. 계약상대자는 연구수행에 있어서 최선을 다했으나 연구진행이 중단상태가 되어 소정의 연구성과를 기대하기 곤란한 경우 또는 사업을 완수할 능력이 없어졌다고 인정될 경우

9. 연구개발목표가 타 기술개발 수행에 의하여 성취되어 동 연구개발을 계속할 필요성이 인정되지 아니한 경우

10. 기타 검역본부의 예산사정 또는 검역본부가 인정하는 중대한 사유로 과제의 계속적인 수행이 불가능하거나 필요성이 없다고 인정할 경우

11. 소속 연구기관의 연구윤리 및 진실성 관련규정을 심각하게 위반한 경우

② 검역본부는 제1항제1호 내지 제4호의 어느 하나에 의하여 계약이 해제되었을 때에는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 용역연구비 전액을 계약상대자로부터 회수할 수 있다.

③ 검역본부는 제1항제5호 내지 제10호의 어느 하나에 의하여 계약이 해지되었을 때에는 실제 사용한 금액을 제외한 잔여 용역연구비를 계약상대자로부터 회수할 수 있다.

④ 계약상대자는 해약된 날로부터 10일 이내에 정산서 및 그때까지의 연구실적을 입증할 수 있는 자료 등을 검역본부에 제출하여 추진부서의 검사를 받아야 하며, 검사결과 대금을 정산함이 타당하다고 검역본부가 인정하는 범위 내에서 기성부분에 대하여 정산한다.

제9조(연구관리시스템 입력) 계약상대자는 검역본부와 계약 체결 후 1주일 이내에 용역연구사업 정보를 검역본부가 지정하는 연구관리시스템에 입력하여야 한다.

제10조(진도보고서 또는 연차실적ㆍ계획서의 제출) ① 계약상대자는 검역본부의 연구과제별 진도관리계획에 따라 성실하게 진도보고를 이행하여야 하며 당해 연구기간의 2분의 1이 되는 시점에서 진도보고서를 작성하여 검역본부에 제출하여야 한다.

② 계약상대자는 계속과제 용역연구를 수행하는 경우 당해연도 연구종료 20일 이전까지 연구과제별로 용역연구사업연차ㆍ실적계획서를 검역본부에 제출하여야 한다.

제11조(연구결과보고서의 제출) ① 계약상대자는 연구결과보고서(전자문서 포함)를 과제종료 20일 전까지 검역본부에 제출하여야 한다.

제12조(연구비의 사용실적보고) 계약상대자는 별지 제13호서식에 의한 용역연구비 사용실적보고서를 작성하여 과제의 종료일까지 검역본부에 제출하여야 한다.

제13조(배상책임) 계약상대자는 본 사업수행에 있어서 발생되는 모든 사고와 손해에 대하여 책임을 진다.

제14조(감독) ① 계약상대자는 본 사업의 수행과정을 통하여 발생하는 모든 비밀을 요하는 사항에 대하여는 타에 누설하여서는 아니 된다.

② 검역본부는 수시로 업무 추진상황을 감독할 수 있으며, 필요시에 사업추진부서에서 별도의 과제 담당관을 지정하여 감독하게 할 수 있고, 계약상대자는 감독사항에 순응하여야 한다.

③ 계약상대자가 제출한 연구결과보고서 내용이 제1조 및 제2조에 위배되어 검사에 합격치 못하였을 때에는 검역본부는 이의 보완을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 승복하여 보완된 연구결과보고서를 제출하여야 한다.

제15조(소유권 및 발생품) ① 계약상대자가 제출한 연구결과보고서의 판권과 본 사업에서 직․간접적으로 취득되는 균주 등 유전자원 및 산업재산권을 포함한 일체의 권리는 검역본부의 귀속으로 한다.

② 계약상대자는 용역연구결과를 대외적으로 발표할 경우 검역본부의 승인을 받아야 한다.

③ 발생품은 그 목록을 연구결과보고서와 동시에 검역본부에 제출하여야 한다.

제16조(자료제출 요구) 검역본부는 본 사업이 완료된 후에도 사업의 평가 및 활용에 필요한 자료 제출 등을 계약상대자에게 요구할 수 있다. 이때 계약상대자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

제17조(계약금액의 조정) ①계약금액의 단가적용, 업무량 및 물량산정 등 계약금액이 부당하게 과다 책정되었음이 계약기간 내에 발견되었을 시에는 계약상대자는 부당액을 즉시 검역본부에 환불하여야 한다.

② 계약상대자는 용역연구비 선급금에 대한 이자발생분은 반납하여야 한다.

제18조(해석) 본 계약서에 없는 내용은 “농림축산검역검사기술개발 용역연구사업관리규정”을 적용하며, 본 계약서의 해석상 의문이 있어 이견이 생겼을 때에는 수요기관의 해석에 의한다.

제19조(계약서의 작성) 본 계약을 증명하기 위하여 계약서는 2통을 작성하여 “갑”과 “을”이 각각 1통씩 보관한다.

년     월     일

(갑)  농림축산검역본부 재 무 관

(을) : 주 소 :

소 속 :

직 위 :

성 명 :                      (인 또는 서명)

붙임 : 용역연구사업계획서 1부

제20조(사사의 명기 : Acknowledgement) 본 계약을 통해 도출된 연구결과에 대해, 논문 등을 발표할 시에는 다음과 같이 명기하여야 한다.

○ 본 연구는 농림축산검역본부 학술연구용역과제(과제번호#)연구비를 지원받아 수행되었습니다.

○ This research was supported by a fund(Project Code No.) by Research of Animal and Plant Quarantine Agency, South Korea

[별지 제5호서식]

계약보증금지급각서

1. 관 리 번 호	:

2. 과   제   명	:

3. 계약년월일	:      년   월   일

4. 종료년월일	:      년   월   일

5. 계약금액	: 일금             정(￦           )

6. 계약보증금	: 일금             정(￦          )

상기 용역을 계약함에 있어 계약보증금을 면제받았으나 위 보증금 납부사례가 발생할 경우 즉시 이를 현금으로 납부할 것을 각서합니다.

년     월     일

주  소 :

기관명 :

대  표 :                 (인 또는 서명)

농림축산검역본부장  귀하

210㎜×297㎜(일반용지60g/㎡(재활용품))

[별지 제6호서식]

선 금 지 급 신 청 서

1. 관리번호 : (연구사업관리시스템의 관리번호)

2. 과 제 명 :

3. 주관연구기관 / 주관연구책임자 :

4. 계약기간 : (계약서의 계약기간과 일치)

5. 총연구비 :

비 목	계 약 액	선 금 액				비고
		계	1세부과제	2세부과제	3세부과제
인건비 소계
책임연구원
연구원
연구보조원
보조원
경비소계
여비
국내여비
국외여비
유인물비
전산처리비
시약 및 재료비
회의비
임차료
교통통신비
감가상각비
일반관리비( )%
계

년      월     일                                  기 관 명 :

대 표 자 :            (인 또는 서명)

농림축산검역본부  재무관 귀하

붙임 : 1. 선금사용계획서        1부

2. 선금 보증 관련 서류   1부

3. 통장사본              1부

4. 계산서                1부

210㎜×297㎜(일반용지60g/㎡(재활용품))

2. 선금사용계획서(용역연구계획서제출시 사용한 원가계산)

(단위 : 원)

비 목 구 분	금 액				구 성 비				비고
	합계	1세부	2세부	3세부	합계	1세부	2세부	3세부
◦인 건 비 소 계
책 임 연 구 원 연 구 원 연 구 보 조 원 보 조 원
◦ 경 비 소 계
여비 (국내,국외구분) 유 인 물 비 전 산 처 리 비 시 약 및 재 료 비 회 의 비 임 차 료 교 통 통 신 비 감 가 상 각 비
일 반 관 리 비( )%
이 윤
부 가 가 치 세
◦총 원 가

* 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙(예산회계법 회계예규)을 참고하여 구체적으로 기입하시기 바랍니다.

* 별첨 : 비목별 산출내역(비목별 산정기준을 참고하여 작성 제출)

- 전체 용역비의 1차 선금(70%)에 대한 사용 계획서 작성

《비목별 산출내역 》(비목순서대로 산출내역을 구체적(자세하게)으로 작성)

1) 인건비                                           원

○ 책임연구원          원 ×  월 ×  명 ×   % =     원

○ 연구원              원 ×  월 ×  명 ×   % =     원

○ 연구보조원          원 ×  월 ×  명 ×   % =     원

○ 보조원              원 ×  월 ×  명 ×   % =     원

2) 경  비                                               원

○ 국내여비            원 ×   명 ×    회 =         원

(직급별로 구분기재)

○ 국외여비            원 ×   명 ×    회 =         원

( 여행목적지, 기간, 표시)

○ 유인물비

( 문헌복사비, 인쇄비등)

-        쪽 ×       부 ×       원 =            원

○ 전산처리비

- 전산기종 단 가 × 사용할 시간 × 회수 =        원

(외부 전산자료 사용료 및 부대비용)

○ 시약 및 재료비

- 재료명 : 단가 × 수량 =                         원

(내구연수가 1년 이하의 시약․재료 구입비 및 시험분석료)

○ 회의비

(회의비, 세미나 개최비용, 공청회비 등)

○ 임차료

- 품명 : 단가 × 수량 =                           원

(특수실험실습도구를 외부로부터 임차, 회의장 사용료)

○ 교통통신비

(연구내용과 직접 관련된 시내교통비, 전신전화사용료, 우편료)

○ 감가상각비

(연구와 관련된 특수실험실습기구․기계장치에 대한 세법에 의해 산정)

3) 일반관리비                                          원

○ (인건비+경비) × 5%                              원

※ 각 항목별 여백이 부족할 경우에는 ‘별지 작성’이라고 기재한 후 별도 첨부

[위 내용은 세부과제별로 작성요함]

[서식 제5호]

선 금 사 용 각 서

1. 과 제 명 :

2. 계약기간 :            년   월   일  ～    년   월   일 (계약서와 일치)

3. 계약금액 : 일금             원정(￦	)

4. 선 금 액 : 일금             원정(￦               )

위 계약 건명에 대한 선금을 지급 받아 사용함에 있어 본계약 연구 목적 외 사용하지 않음을 확약합니다.

년        월       일

주          소

기    관    명

사업자등록번호

대    표    자                                (인 또는 서명)

농림축산검역본부  재무관 귀하

[서식 제3호]

계 약 / 선 금 보 증 금 납 부 서
입 찰 번 호	제 호		입찰연월일		년 월 일
계 약 건 명
계 약 번 호	제 호		계약(예정)연월일		년 월 일
계 약 금 액	금 원정(￦ )
(계약/선금)보증금액	금 원정(￦ )
보증금납부방법
계약이행기간	년 월 일부터 년 월 일까지( 개월)
위의 금액을 (계약/선금) 보증금으로 납부 합니다.
년 월 일
상호 또는 명칭:				전화번호 :
주 소:
대 표 자 성 명:	(인)
주민(법인)등록번호:
귀하
※ 첨부 : 보증보험증권 1부
세입세출외현금출납공무원 성명 (인)
유가증권취급공무원 성명 (인)

[별지 제7호서식]

선 금 지 급 보 증 각 서

1. 과 제 명 :

2. 계약기간 :            년   월   일  ～    년   월   일 (계약서와 일치)

3. 계약금액 : 일금             원정(￦	)

4. 선 금 액 : 일금             원정(￦               )

위 계약건명에 대한 선금을 지급 받음에 있어 선금의 반납을 보장하는 증권 또는 보증서의 제출을 면제받은바, 반환사유가 발생하는 때에는 당해 선금잔액과 그이자(지방은행을 제외한 일반시중은행의 어음 대출금리에 의하여 산출한 금액)에 대한 금액을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.

년        월       일

주          소

기    관    명

사업자등록번호

대    표    자                                (인 또는 서명)

농림축산검역본부  재무관 귀하

210㎜×297㎜(일반용지60g/㎡(재활용품))

[별지 제8호서식]

잔 금 신 청 서

1. 관리번호 :

2. 과 제 명 :

3. 주관연구기관 / 주관연구책임자 :

4. 계약기간 :

5. 총연구비 :

비 목	계 약 액	선금액	사용액	잔금신청액	비 고
인건비소계 책임연구원 연구원 연구보조원 보조원 경비소계 여비 국내여비 국외여비 유인물비 전산처리비 시약 및 재료비 회의비 임차료 교통통신비 감가상각비 일반관리비
계	(A)	(B)	(C)

※ C≤A인 경우 각각의 비목을 C-B, C〉A인 경우 각각의 비목을 A-B

자세한 내용은 용역연구비 비용산정기준 참고

년      월     일

기 관 명 :

대 표 자 :            (인 또는 서명)

농림축산검역본부 재무관 귀하

210㎜×297㎜(일반용지60g/㎡(재활용품))

[별지 제9호서식]

문서번호					시행일자					수신		농림축산검역본부장
용역연구사업 변경 승인 요청서
과 제 명							과 제 번 호
주관연구기관							세부과제연구기관
주관연구책임자			(인) 또는 서명				세부과제책임자
연 구 비 변 경 사 항
변 경 전(단위 : 원)							변 경 후(단위 : 원)
비목		계약액		선금액			비목		계약액		증감			선금액	증감
기 타 변 경 사 항
변 경 전								변 경 후
변경사유 (구체적으로 작성)
상기와 같이 연구수행계획의 변경을 신청합니다. 년 월 일 연구기관장 : (인) 또는 서명 ※연구지원부서 담당자 : 성명 (인) 전화 : 02-000-0000

※ 회의비는 변경대상에서 제외

※ 세부과제는 주관연구기관을 통해 제출

210㎜×297㎜(일반용지60g/㎡(재활용품))

[별지 제10호서식]

진도보고서
과 제 번호	계약시 부여
과 제 명	국문
	영문
주관연구기관	기관명(부서명)		소재지	대 표
주관연구책임자 (연구책임자)	성 명		소속 및 부서	전 공
연 구 기 간	년 월 일 ～ 년 월 일( 개월)
연 구 비	일금 천원정 (￦ )
참여연구원	명 (책임연구원: 명, 연구원: 명, 연구보조원: 명 보조원: 명)
년도 용역연구개발사업에 의하여 수행중인 연구과제의 진도보고서를 붙임과 같이 제출합니다. 붙임 : 1. 용역(자체)연구개발사업 진도보고서 5부 2. 진도보고서 수록 파일 1부 년 월 일 주관연구책임자(연구책임자) (인 또는 서명) 주관연구기관장(수행부서의장) (직인) 농림축산검역본부장 귀하

210㎜×297㎜(일반용지60g/㎡(재활용품))

진도보고서

가. 연구수행내용

※ 그동안 수행한 결과를 5페이지 내외로 작성

나. 연구의 진척도

※ 당초 계획서상의 진도계획과 비교하여 간략하게 작성

다. 연구수행에 따른 문제점 및 개선방향

※ 당초계획보다 진도상의 미흡한 부분에 대한 원인과 대책 등을 기술

라. 연구비 집행내역

비목명	당초 연구개발비	사용액	집행잔액
인건비
경비
일반관리비
계

마. 주요 연구변경사항

※ 해당되는 경우 연구의 목표, 연구책임자 등 중요협약변경사항을 간략히 기술

바. 기타 건의사항

※ 각 항목별 여백이 부족할 경우 별지 이용하여 작성

[별지 제11호서식]

회 의 록
과 제 명
과제번호					과제책임자								회의일시
내부참석자명단
외부참석자명단 (※다수일 경우 별도첨부)	성명			(인)			소속							전공분야
	성명			(인)			소속							전공분야
	성명			(인)			소속							전공분야
	성명			(인)			소속							전공분야
	성명			(인)			소속							전공분야
내 용
회의장소
회의비지출액	식음료대		금액								원	인원						명	※영수증 별도첨부
	자문료/ 회의수당		금액								원	인원						명
	자문료 혹은 회의수당 지급자

[별지 제12호서식]

용역연구사업 연구결과보고서
관리 번호	계약시 부여
과 제 명	국문
	영문
주관연구기관	기 관 명		소재지		대 표
주관연구 책임자	성 명		소속 및 부서		전 공
총연구기간	년 월 일 - 년 월 일( 년 개월)
총 연구비	천원
연구년차	연구기간			연구비
1차년도	201 . . ～ 201 . .			천원
2차년도	201 . . ～ 201 . .			천원
총참여연구원	명 (책임연구원: 명, 연구원: 명, 연구보조원: 명 보조원: 명)
년도 용역연구사업에 의하여 수행중인 연구과제의 연구결과보고서를 붙임과 같이 제출하며, 연구사업 관리시스템에 입력 합니다. 년 월 일 주관연구책임자 (인 또는 서명) 주관연구기관장 (직인) 농림축산검역본부장 귀하

210㎜×297㎜(일반용지60g/㎡(재활용품))

편집순서 1 : 겉표지

(뒷면)                              (측면)                              (앞면)

			과 제 명 2010 농 림 축 산 검 역 본 부
					연구결과보고서
					발간등록번호
				국문과제명 영문과제명 주관연구기관 : 농림축산검역본부
	주 의 ( 주 의 내 용 기 재 ) (□글 14 point 고딕체)

※ 주 의 내 용

주      의

1. 이 보고서는 농림축산검역본부에서 시행한 용역연구사업의 연구결과보고서입니다.

2. 이 보고서 내용을 발표할 때에는 반드시 농림축산검역본부에서 시행한 용역연구사업의 연구결과임을 밝혀야 합니다.

3. 국가과학기술 기밀유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 아니 됩니다.

편집순서 2 : 제출문

제    출    문

농림축산검역본부장  귀 하

이 보고서를 “ 과제명(주관연구기관명/주관연구책임자) ”과제의 연구결과보고서로 제출합니다.

201 .   .

주관연구기관명 :

주관연구책임자 :

제 1세부과제명 :

(제1세부연구기관/세부과제책임자):

제 2세부과제명 :

(제2세부연구기관/세부과제책임자):

제 3세부과제명 :

(제3세부연구기관/세부과제책임자):

위탁과제명 :

(위탁연구기관/위탁연구책임자):

편집순서 3 : 목차

목        차

Ⅰ. 연구개발결과 요약문

(한글)

(영문)

Ⅱ. 총괄연구개발과제 연구결과

제1장 총괄연구개발과제의 최종 연구개발 목표

제2장 총괄연구개발과제의 최종 연구개발 내용 및 방법

제3장 총괄연구개발과제의 최종 연구개발 결과

제4장 총괄연구개발과제의 연구결과 고찰 및 결론

제5장 총괄연구개발과제의 연구성과

제6장 참고문헌

제7장 첨부서류

Ⅲ. 제O세부연구개발과제 연구결과 (세부과제별로 작성)

제1장 제O세부연구개발과제의 최종 연구개발 목표

제2장 제O세부연구개발과제의 연구대상 및 방법

제3장. 제O세부연구개발과제의 최종 연구개발 결과

제4장 제O세부연구개발과제의 연구결과 고찰 및 결론

제5장 제O세부연구개발과제의 연구성과

제6장 참고문헌

제7장 첨부서류

※ 작성방법

○ 세부연구과제가 없는 경우 : 총괄연구과제 양식만을 작성

○ 세부연구과제가 있는 경우

- 총괄연구과제 작성양식을 주관연구책임자가 작성

- 주관연구책임자의 세부연구과제는 제1세부과제로 작성

편집순서 4 : 요약문

연구결과보고서 요약문

연구과제명
중심단어
주관연구기관		주관연구책임자
연구기간	201 . . ～ 201 . .
* 1페이지 내외로 요약함.

편집순서 5 : 요약문(영문)

Summary

Title of Project
Key Words
Institute		Project Leader
Project Period	201 . . - 201 . .
* 1페이지 내외로 요약함.

편집순서 6 : 총괄연구과제의 연구결과

총괄연구개발과제 연구결과

제1장 총괄연구개발과제의 최종 연구개발 목표

1.1 총괄연구개발과제의 목표

◦ 당초 연구계획을 참고하기 위한 자료임. 선정당시 ｢연구개발사업 계획서｣와 전년도 제출하였던 ｢연차실적․계획서｣상의 내용과 동일하게 작성해야 함.

◦ 연구배경, 연구목적, 범위 등에 대해 서술함.

1.2 총괄연구개발과제의 목표달성도

◦ 연구개발목표에 입각한 연구목표의 달성도 및 관련 분야 연구에의 기여도 등을 기술함.

1.3 국내․외 기술개발 현황

◦ 국내․외 관련분야에 대한 기술개발 현황과 연구결과가 국내․외 기술개발 현황에서 차지하는 위치등을 기술

제2장 총괄연구개발과제의 최종 연구개발 내용 및 방법

◦ 총괄연구개발과제의 이론적, 실험적 연구방법, 연구내용을 객관적으로 기술함.

제3장 총괄연구개발과제의 최종 연구개발 결과

◦ 연구결과 기술

제4장 총괄연구개발과제의 연구결과 고찰 및 결론

◦ 총괄연구개발과제의 연구결과 해석 및 다른 결과와의 비교분석 등에 대해 고찰하고 결론을 서술함.

제5장 총괄연구개발과제의 연구성과

5.1  활용성과

총괄과제명
총괄과제책임자	성명 / 소속 / 전공

가. 연구논문

번호	논문제목	저자명	저널명	집(권)	페이지	Impact factor	국내/국외	SCI여부
1
2

나. 학술발표

번호	발표제목	발표형태	발표자	학회명	연월일	발표지	국내/국제
1
2

다. 지적재산권

번호	출원/등록	특허명	출원(등록)인	출원(등록)국	출원(등록)번호	IPC분류
1
2

라. 정책활용

※ 기타 관련정책에 활용 예를 구체적으로 기술함.

마. 타연구/차기연구에 활용

※ 타연구 및 차기연구에 활용된 예를 구체적으로 기술함.

바. 언론홍보 및 대국민교육

※ 언론홍보 및 대국민교육 내용, 일자 등을 간략히 기술함.

사. 기타

※ 임상시험 , 관련 DB구축, 워크샾 또는 심포지움 개최 등의 경우 구체적으로 기술함.

5.2  활용계획

제6장 기타 중요변경사항

◦ 처음 선정 시와 비교하여 변경된 내용을 명시

제7장 참고문헌

제8장 첨부서류

◦ 본 연구개발사업의 성과로 기술된 게재된 학술지 논문 전체 사본(게재 허가를 받은 경우 게재 증명서)과 산업재산권 등록증(또는 출원서) 사본을 반드시 첨부할 것.

편집순서 7 : 세부연구과제의 연구결과

제O세부연구개발과제 연구결과

세부과제명 :

세부과제책임자 : 성명/소속

제1장 세부연구개발과제의 최종 연구개발 목표

1.1 세부연구개발과제의 목표

◦ 당초 연구계획을 참고하기 위한 자료임. 선정당시 ｢연구개발사업 계획서｣와 전년도 제출하였던 ｢연차실적․계획서｣상의 내용과 동일하게 작성해야 함.

◦ 연구배경, 연구목적, 범위 등에 대해 서술함.

1.2 세부연구개발과제의 목표달성도

◦ 연구개발목표에 입각한 연구목표의 달성도 및 관련 분야 연구에의 기여도 등을 기술함.

1.3 국내․외 기술개발 현황

◦ 국내․외 관련분야에 대한 기술개발 현황과 연구결과가 국내․외 기술개발 현황에서 차지하는 위치등을 기술

제2장 세부연구개발과제의 최종 연구개발 내용 및 방법

◦ 세부연구개발과제의 이론적, 실험적 연구방법, 연구내용을 객관적으로 기술함.

제3장 세부연구개발과제의 최종 연구개발 결과

◦ 연구결과 기술

제4장 세부연구개발과제의 연구결과 고찰 및 결론

◦ 세부연구개발과제의 연구결과 해석 및 다른 결과와의 비교분석 등에 대해 고찰하고 결론을 서술함.

제5장 세부연구개발과제의 연구성과

5.1  활용성과

세부과제명
세부과제책임자	성명 / 소속 / 전공

가. 연구논문

번호	논문제목	저자명	저널명	집(권)	페이지	Impact factor	국내/국외	SCI여부
1
2

나. 학술발표

번호	발표제목	발표형태	발표자	학회명	연월일	발표지	국내/국제
1
2

다. 지적재산권

번호	출원/등록	특허명	출원(등록)인	출원(등록)국	출원(등록)번호	IPC분류
1
2

라. 정책활용

※ 기타 관련정책에 활용 예를 구체적으로 기술함.

마. 타연구/차기연구에 활용

※ 타연구 및 차기연구에 활용된 예를 구체적으로 기술함.

바. 언론홍보 및 대국민교육

※ 언론홍보 및 대국민교육 내용, 일자 등을 간략히 기술함.

사. 기타

※ 임상시험 , 관련 DB구축, 워크샾 또는 심포지움 개최 등의 경우 구체적으로 기술함.

5.2  활용계획

제6장 기타 중요변경사항

◦처음 선정 시와 비교하여 변경된 내용을 명시

제7장 참고문헌

제8장 첨부서류

◦ 본 연구개발사업의 성과로 기술된 게재된 학술지 논문 전체 사본(게재 허가를 받은 경우 게재 증명서)과 산업재산권 등록증(또는 출원서) 사본을 반드시 첨부할 것.

본문작성 요령

1. 본문의 순서는 가급적 장, 절, 1, 가, (1), (가), ①, ㉮ 등으로 유지하되, 각 기관의 형식을 준용하며,

● 장은 HWP 16 point 고딕체

● 절은 HWP 14 point 신명조체

● 본문은 HWP 10 point 신명조체로 한다.

단, 본문의 내용 중 중요부문은 고딕체로 사용할 수 있다.

2. 장은 원칙적으로 페이지를 바꾸어 시작한다.

3. 본문은 HWP 10 point에서 낱말간격(자간)은 0, 줄간격은 200% 이내로 한다.

4. 페이지 번호는 하단 중앙 아래에 HWP 10 point로 한다.

5. 각주(註)는 해당 페이지 하단에 HWP 9 point로 표기하며, 본문과 구분토록 한다.

6. 도(圖)와 표(表)는 어떤 프로그램으로 작성하여도 관계없으며, 도(圖)와 표명(票名)은 (  ) 내에 영문으로 표기한다.

7. 페이지 수는 편집순서 2의 제출문부터 시작하여 편집순서 7까지 기재한다.

단, 삽입물이 있을 때에는 그 삽입물의 크기에 불문하고 1면을 한 페이지로 하여 일련번호를 붙인다.

8. 한글, 한문, 영문을 혼용한다.

9. 참고문헌(Reference) 인용의 경우 본문 중에 사용처를 반드시 표기한다.

10. 인쇄규격 :  A4 용지,  양면 좌철 제본

11. 참고사항

● 워드프로세서(□글 2002 이상) 사용

● 제출문에 기입하는 주관/세부연구기관은 최종 수행년도에 준하며, 당초 신청 시와 변경사항이 있을 때는 ｢제6장 기타 중요변경사항｣에 명시

편집순서 8 : 연구과제요약

총괄 연구과제 요약

과제 고유번호	자동부여				공개가능여부
과제명
연구책임자	성 명			주민등록번호 (앞번호만 기재)
	소속 기관명
	전자우편			전화번호

○ 연구목표 (400 ～600자)

○ 연구내용  (1000～1200자)

○ 연구성과(응용분야 및 활용범위포함)  (400 ～600자)

○ 총괄 참여연구원

성 명	주민등록번호(앞번호만 기재)	성 명	주민등록번호(앞번호만 기재)

Keywords (5개 내외)	한글
	영문

주1) 연구목표, 연구내용, 연구성과를 서술형으로 기재

2) 국가연구개발사업 DB를 통한 공개를 희망하지 않는 경우 공개가능여부란에 “공개불가”로 표시

3) 연구성과는 그간의 연구결과 및 기대성과를 서술

세부 연구과제 요약

과제 고유번호	자동부여				공개가능여부
주관과제명
제 0 세부과제명
연구책임자	성 명			주민등록번호 (앞번호만 기재)
	소속 기관명
	전자우편			전화번호

○ 연구목표 (400 ～600자)

○ 연구내용  (1000～1200자)

○ 연구성과(응용분야 및 활용범위포함)  (400 ～600자)

○ 참여연구원

성 명	주민등록번호(앞번호만 기재)	성 명	주민등록번호(앞번호만 기재)

Keywords (5개 내외)	한글
	영문

주1) 연구목표, 연구내용, 연구성과를 서술형으로 기재

2) 국가연구개발사업 DB를 통한 공개를 희망하지 않는 경우 공개가능여부란에 “공개불가”로 표시

3) 연구성과는 그간의 연구결과 및 기대성과를 서술

4) 세부과제가 없을시 작성하지 않음 (세부과제별로 작성)

[별지 제13호서식]

용역연구비 사용실적보고서

과제관리번호
과 제 명
주관연구기관
주관연구책임자	소 속		성 명
당해연도 연구개발비	천원
당 해 연 도 연구개발기간	201 . . . ～ 201 . . . ( 년 월)
용역연구개발사업관리규정 제25조의 규정에 의하여 위 용역연구개발사업 과 제에 대한 연구개발비 사용실적을 붙임과 같이 보고합니다. 붙임 : 1. 총 연구개발비 사용실적현황 1부. 2. 세부과제 연구개발비 사용실적보고 각1부. 3. 연구개발비 이자 사용 내역서 각1부. 첨부 : 1. 비목별내역서 각1부. 2. 자체회계검사의견서 각1부. 3. 증빙서류 사본 각1부. 201 년 월 일 주관연구책임자 : (인 또는 서명) 주관연구기관 : (직인) 농림축산검역본부장 귀하

210㎜×297㎜(일반용지60g/㎡(재활용품))

1. 총 연구개발비 사용실적현황

(단위 : 원)

비목 구 분			계 약 액	사용금액	증 감 (%)	증감사유
1) 인건비
2)경비	여 비	국내여비
		국외여비
	유인물비
	전산처리비
	시약 및 연구용 재료비
	회의비
	임차료
	교통통신비
	감가상각비
3) 일반관리비
이 윤
부 가 가 치 세
이 자 발 생 액
합 계

2. 제 O 세부과제 연구개발비 사용실적보고

◦ 세부과제명:

◦ 연구기관:                                           〔 직인 〕

◦ 책 임 자:                         (인 또는 서명)

(단위 : 원)

비 목 구 분			계 약 액		사용금액		증 감 (%)	증감사유
1) 인건비
2)경비	여 비	국내여비
		국외여비
	유인물비
	전산처리비
	시약 및 연구용 재료비
	회의비
	임차료
	교통통신비
	감가상각비
3) 일반관리비
이 윤
부 가 가 치 세
이 자 발 생 액
합 계
※ 이자발생액 사용내역 여부				사용( )		비사용( )
○ 이자사용내역서(회의비 사용금지)
- 비목 :
- 날짜 :
- 금액 :

3. 연구개발비 이자 사용 내역서

연구개발비 이자 사용 내역서

과 제 번 호
수행연구기관
연구개발비	원
이자발생기간	20 . . .～ 20 . . .
이자발생액
사용내역

1. 세부과제별로 작성하여야함.

2. 사용내역 기재시 해당과제 연구개발비로 사용한 경우, 연구개발사업관리규정 제18조6항에 의거 해당란에 간단히 기재하고, 반납한 경우에는 반납함, 반납예정인 경우에는 반납예정이라고 기재할 것.

※ 첨부 : 1. 비목별내역서 1부.
2. 자체회계감사의견서 1부.

비목별 내역서(현금출납부)

1) 인건비

일 자	직 급	소 속 (기관, 부서)	성 명 (주민등록번호, 앞번호만 기재)	금 액	비 고
소 계

2) 경 비

① 여비

㉠ 국내여비

일 자	직 급	소 속 (기관, 부서)	성 명	출장목적 (장소)	금 액	비고
소 계

㉡ 국외여비

일 자	직 급	소 속 (기관, 부서)	성 명	출장목적 (장소)	금 액	비고
소 계

② 유인물비

일 자	사 용 내 역(구체적으로 기재)	지급처	금 액	비고
소 계

※ 도서구입목록(유인물비 중 도서구입목록 별도기재)

일 자	도 서 명(출판사)	지급처	금 액	비고
소 계

③ 전산처리비

일 자	사 용 내 역(구체적으로 기재)	지급처	금 액	비고
소 계

④ 시약 및 연구용 재료비

일 자	사 용 내 역(구체적으로 기재)	지급처	금 액	비고
소 계

⑤ 회의비

일 자	사 용 내 역(구체적으로 기재)	지급처	금 액	비고
소 계

⑥ 임차료

일 자	사 용 내 역(구체적으로 기재)	지급처	금 액	비고
소 계

⑦ 교통통신비

일 자	사 용 내 역(구체적으로 기재)	지급처	금 액	비고
소 계

⑧ 감가상각비

일 자	사 용 내 역(구체적으로 기재)	지급처	금 액	비고
소 계

3) 일반관리비

일 자	사 용 내 역(구체적으로 기재)	지급처	금 액	비고
소 계

[별지 제14호서식]

자체회계검사의견서

1. 주관과제명 :

2. 세부과제명 :

3. 연구기관명

4. 회계검사의견:

위와 같이 용역연구개발사업의 사용실적에 대한 자체회계검사의견서를 제출합니다.

년       월      일

연구기관장 :                    (직인)

연구기관회계검사부서장

소속        직위       성명      (인 또는 서명)

농림축산검역본부장 귀하

[별지 제15호서식]

용역연구사업 검사조서
관리번호
과 제 명
주 관 연구기관	기관명	소재지		대 표
주관연구 책 임 자	성 명	소속 및 부서
연구기간	년 월 일 ～ 년 월 일( 개월)
연구비	일금 천원정 (￦ )
구 분	계 획		실 적
연구목표 및 내용	※ 각 항목별 여백이 부족할 경우에는 ‘별지 작성’이라고 기재한 후 별도 첨부

상기 용역연구사업이 당초 계획을 달성하였음을 확인․검사합니다.

년    월    일

검사자 : (소속)               (직위)

성명                 (인 또는 서명)

210㎜×297㎜(일반용지60g/㎡(재활용품))

[별지 제16호서식]

용역연구비 사용실적보고서 검토결과서
과제번호
과 제 명
주관연구기관 (책임자)		당해연도 연구기간
연 구 비	천원	검사부서
		선 금	원
		잔 금	원
검토내용
의 견

상기 용역연구사업의 연구용역비 사용실적 보고서를 확인․검사합니다.

년    월    일

검사자 : (소속)               (직위)

성명                 (인 또는 서명)

210㎜×297㎜(일반용지60g/㎡(재활용품))

[별지 제17호서식]

자체평가 의견서

과제번호
과제명
주관연구기관
연구담당자	총괄책임자
	세부연구 책임자	기관(부서)			성 명
		″			″
		″			″
연구기간	총 기 간			당해년도기간
연구비(원)	총 규 모			당해년도규모

1. 연구는 당초계획대로 진행되었는가?

□ 당초계획 이상으로 진행  □ 계획대로 진행	□ 계획대로 진행되지 못함

※ 계획대로 수행되지 않은 원인은?

2. 당초 예상했던 성과는 얻었는가?

□ 예상외 성과얻음	□ 어느 정도 얻음	□ 얻지 못함

3. 연구과정 및 성과가 농림축산검역검사 기술개발에 공헌했다고 보는가?

□ 공헌했음	□ 현재로서 불투명함	□ 그렇지 않음

4 얻어진 성과와 발표상황

4-1  산업·지적재산권 등

□ 국내출원/등록        출원   건,    등록    건

□ 해외출원/등록        출원   건,    등록    건

4-2 논문게재·발표 등

□ 국내학술지 게재	건

□ 해외학술지 게재	건

□ 국내학회 발표	건

□ 국내세미나 발표	건

□ 기 타	건

4-3  정책활용 등

□ 기준규격	건

□ 시험법	건

□ 대국민홍보	건

□ 제도개선	건

□ 기 타	건

4-4 수상 등

□ 있 다       상 명칭 및 일시 :

□ 없 다

5. 관련된 기술의 발전속도나 추세를 감안할 때 연구계획을 조정할 필요가 있다고 생각하십니까?

□ 없다         □ 약간 조정필요      □ 전반적인 조정필요

6. 연구과정에서의 애로 및 건의사항은?

작 성 자

구 분	소 속 기 관	직 위	성 명
총괄연구책임자			(인) 또는 서명

210㎜×297㎜(일반용지60g/㎡(재활용품))

[별지 제18호서식]

연구결과활용계획서

1. 연구과제 개요

연구과제명
주관연구기관		총괄연구책임자
연구비
연구기간
주요활용유형	□기준규격 □시험법 □대국민홍보 □제도개선 □ 기타( ) □ 미활용 (사유: )

2. 연구목표 대비 결과

당초목표	당초연구목표 대비 연구결과
①
②
③
․ ․ ․

* 결과에 대한 의견 첨부 가능

3. 도출결과내용

구분	핵 심 기 술 명
①
②
③
․ ․ ․

4. 연구결과별 활용유형

구분	활용유형(복수표기 가능)
	기준 규격	시험법	대국민홍보	제도 개선	기타
①
②
③

* 각 해당란에 v 표시

5. 각 연구결과별 구체적 활용계획

도출결과	도출결과의 사업부서 활용계획
①의 도출결과
②의 도출결과
③의 도출결과
․ ․

210㎜×297㎜(일반용지60g/㎡(재활용품))

[별지 제19호서식]

연구사업성과보고서

과제개요
과제명								과제번호
주관연구기관					주관연구책임자				성명
									소속
세부과제기관 및 책임자
연구연차		연구기간								연구비(단위:천원)
		시작년도	시작월	종료년도			종료월
1차년도		년	월	년			월
2차년도		년	월	년			월
3차년도		년	월	년			월
4차년도		년	월	년			월
연구성과 (핵심어 중심 요약 작성)
내 용	연구사업계획서					연구성과
연구목적
연구내용
주요 성과유형	□실용화성과 □정책기반성과 □홍보성과 □ 학술성과 기타
미활용	사유:

※ 기준규격 제․개정 예를 구체적으로 기술함.

※ 시험법 개발 예를 구체적으로 기술함.

※ 제도개선반영 예를 구체적으로 기술함.

※ 모니터링 예를 구체적으로 기술함.

※ 데이타베이스(DB)구축 예를 구체적으로 기술함.

※ 평가가이드라인 예를 구체적으로 기술함.

※ 언론홍보 내용, 일자 등을 간략히 기술함.

※ 대국민교육 내용, 일자 등을 간략히 기술함.

번호	개최제목	개최유형	개최내용	연월일	발표지	국내/국제
1
2

번호	발표제목	발표형태	발표자	학회명	연월일	발표지	국내/국제
1
2

번호	논문제목	저자명	저널명	집(권)	페이지	국내	국외	SCI 여부
1
2

※ 기타의 경우 구체적으로 기술함.

※ 작성요령：해당되는 항목은 빠짐없이 기록하되 란이 부족하면 별지작성 가능

과제번호
사 업 명
연구과제명
주관연구기관															주관연구책임자				(인) (전화： )
참 여 기 업															총 연구기간				. . ～ . . ( 년 월)
연구개발비 (천원)			연구기간															연구비(천원)
							시작년도			시작월		종료년도				종료월
			1차년도
			2차년도
			3차년도
			4차년도
연구목표 (200자 이내)
주요 연구내용 (500자이내)
연구성과의활용	연구성과활용 총괄 (해당되는 모든 란 기재)
	기술이전				통상실시권계약						기술지도 및 교육			정책건의					표준기술활용		기술잡지 게재
	계획	실적			계획				실적		계획		실적	계획			실적		계획	실적	계획	실적
	건	건			건				건		건		건	건			건		건	건	건	건
	특허										논문			학술대회 발표					홍보실적		해외업무 파견인원 (국제화협력)
	특허출원				특허등록
	계획	실적			계획			실적			계획		실적	계획			실적		계획	실적	계획	실적
	건 (국내： 건) (국외： 건) (PCT : 건)	건 (국내： 건) (국외： 건) (PCT: 건)			건 (국내： 건) (국외： 건)			건 (국내： 건) (국외： 건)			건 (SCI ： 건) (비SCI： 건		건 (SCI ： 건) (비SCI： 건)	건 (국내： 건) (국외： 건)			건 (국내： 건) (국외： 건)		건	건	명	명
	연구성과 활용에 따른 예상 기대효과 (200자 이내)
	연구성과 활용시 애로사항 및 건의사항 (500자 이내)

연구성과의활용	기술거래(이전)
	번호			기술실시계약명				기술실시대상업체						계약체결일자							당해년도계약액
	통상실시권 계약
	특허(출원)번호				발명의 명칭					실시업체		실시료(원)					계약일			계약기간				비고
	교육 및 지도활용 내역
	번호	지도·교육 내용													장소				기간(날짜)				발표자
	정책건의 및 활용
	번호	정책활용 상태 (반영/건의/미반영)				건의제목												주관부처			해당 법규명
	표준기술 활용
	번호	표준기술 제목														활용분야					비고
	지식재산권[발명특허, 실용신안, 의장, 상표, 규격), 신품종, 프로그램개발 등으로 구분하고, 세부적으로 전부(건별로)기록하며, 국외인 경우 반드시 국명을 기록합니다]
	구 분		지식재산권 등 명칭 (건별 각각 기재)				국 명		출원								등 록								기 타
									출원인		출원일		출원번호				등록인			등록일		등록번호

연구성과의활용

논문(국내외 전문학술지) 게재

번호

논문명

학술지명

주저자명

호

발표

시기

발행

기관

SCI여부

(SCI/비SCI)

IF

국내 및 국제 학술회의 발표(학술회의명을 세부적으로 전부(건별로) 기록하고, 국외인 경우 반드시 국명을

기록합니다. - 본 연구과제의 수행결과로 발표한 것만 기재합니다.)

번호

회의명칭

발표자

발표일시

장소

국명

홍보실적(신문, 방송, 저널 등)

번호

홍보유형

매체명

제목

일시

국제화 협력성과

유  치

파  견

번호

유치기간

국적

학위

전공

파견기간

파견국

학위

전공

※ 연구결과 활용중단일 경우 중단사유

농림축산검역검사기술개발사업의 연구개발결과 활용보고서를 제출합니다.

년        월        일

주관연구기관장 :

직 인

농림축산검역본부장  귀하

[별지 제20호서식]

참여연구원 변경통보서

과제번호
과 제 명
연구기관						연구책임자
변경 전				변경 후
성명	참여기간		인건비 수령여부	성명	참여기간		인건비 수령여부		변경사유

※ 각 세부과제별로 작성 후 사용실적보고서 제출시 함께 제출

※ 인건비 수령 여부란에 수령인은 ○ 표기할 것

※ 참여연구원 변경 시 각 기관의 참여연구원 변경 공문 함께 첨부