지방자치단체

계약심사 업무처리지침

2011. 5.

	행정안전부
	재정관리과

			목 차

제1장 계약심사제도의 의의 ······························· 1

제2장 계약심사대상 사업 ·································· 3

제3장 계약심사 업무처리 절차 ···························· 5

제4장 원가심사 ·············································· 6

제5장 저가심사 ············································· 14

제6장 설계변경심사 ········································ 27

제7장 보    칙 ·············································· 31

지방자치단체 계약심사 업무처리지침

제1장 계약심사제도의 의의

1. 계약심사제도의 개념

가. 계약심사제도는 효율적인 재정운영을 위하여 지방자치단체가 발주하는 사업(공사․용역․물품 등)의 입찰․계약을 하기 위한 기초금액 및 예정가격, 최저가 낙찰제 대상공사의 입찰금액, 설계변경 증감금액의 적정성을 심사 및 검토하는 제도이다.

설 계 (원가계산)	⇒	원가산정의적 정 성 심 사	⇒	입 찰	⇒	최저가 입찰시 저가심사	⇒	계 약	⇒	설계변경 심 사

나. 본 지침은 지방재정법 제3조의 지방자치단체 건전재정 운용원칙을 토대로 동법 시행령 제144조에 의하여 마련된 것으로 지방자치단체에서는 본 지침에 따라 계약심사 제도를 운영하여야 한다.

2. 계약심사제도의 목적

지방자치단체는 지방계약법 시행령 제10조에 따라 예정가격을 결정하여야 하는 경우 원가계산 전문성을 바탕으로 과다․과소 산정 여부를 효율적으로 검토하여 지방예산을 절감하고 계약의 목적․성질․규모 및 지역특수성 등을 고려하여 계약 목적물의 품질 향상을 도모하기 위하여 계약심사를 하여야 한다.

3. 계약심사의 구분

가. 지방자치단체는 기초금액(예정가격 결정 前 단계)을 작성할 때 행정안전부예규 지방자치단체 원가계산 및 예정가격 작성요령 제2장 제1절 2. 가. 1)에 따라 원가산정의 적정성 심사(이하 “원가심사”라 한다)를 하여야 한다. 원가심사의 주요 심사내용은 다음과 같다.

1) 설계서간 불일치 사항 여부

2) 원가계산 작성방식 및 실적공사비 적용의 적정성

3) 표준품셈 등 대가산정기준 적용의 적정성

4) 각종 법정경비요율의 적정성

5) 가격정보, 전문가격조사기관이 조사하여 공표한 가격, 견적가격 등 가격결정의 적정성

6) 산출된 물량의 적정 산출 여부

7) 기타 심사를 위해 필요한 사항 검토 등

나. 지방자치단체는 최저가 낙찰제 대상공사의 입찰시 낙찰자 결정을 위해 입찰금액의 적정성 심사(이하 “저가심사”라 한다)를 하여야 한다. 저가심사의 주요 심사내용은 다음과 같다.

1) 부적정공종의 판정

2) 입찰금액 적정성 심사대상 결정 등

다. 지방자치단체는 공사계약 체결 후 설계변경을 하고자 하는 경우 설계변경을 하기 전에 증감금액의 적정성 심사(이하 “설계변경심사”라 한다)를 하여야 한다.

4. 유사․중복 업무의 연계 추진

가. 지방자치단체의 장은 계약심사 기능과 통합 또는 연계하여 예산절감 효과를 극대화할 수 있다고 판단되는 아래와 같은 기능을 통합 또는 연계할 수 있다.

1) 설계 경제성검토(VE) 기능

2) 설계 및 공법의 적정성 검토

3) 신기술․신공법의 적용 가능성 검토

4) 기타 계약심사로 갈음할 수 있는 업무

나. 지방자치단체의 장은 계약심사업무가 다른 법령에 따른 업무와 유사한 경우에는 법령 범위 내에서 연계하여 효율적으로 추진되도록 할 수 있다.

제2장 계약심사대상 사업

1. 의무적 심사대상 사업

가. 시․도는 계약심사 전담부서를 설치하여 다음 대상기관의 사업에 대하여 의무적으로 계약심사를 하여야 한다.

1) 시․도 계약심사 대상기관

① 시․도 본청 및 사업소 사업

② 시․도 설립 지방공기업 사업

③ 시․도 출연기관(단, 50%미만 출연기관은 제외) 사업

④ 시․군․구 사업 중 시․도비 또는 국비보조사업

2) 시․도 계약심사 대상사업

심사 내용	의무적 심사대상 사업
원가심사	▫공사 : 추정금액 5억원(종합공사가 아닌 공사는 3억원) 이상 ▫용역 : 추정금액 2억원 이상 ▫물품 : 추정금액 2천만원 이상
저가심사	▫지방계약법 시행령 제42조제1항에 의한 최저가 낙찰제 대상공사의 최저가 입찰시 저가심사를 위한 심사위원회 구성 및 운영 ※ PQ심사 및 입찰과 낙찰자 결정은 해당부서 및 기관에서 실시
설계변경 심사	▫계약금액 20억원 이상 공사의 1회 설계변경이 당해 계약금액의 10% 이상 증가하는 경우

나. 시․군․구는 계약심사 전담인력을 배치하여 다음 대상기관의 사업에 대하여 의무적으로 계약심사를 하여야 한다.

1) 시․군․구 계약심사 대상기관

① 시․군․구 본청 및 사업소, 읍․면․동 사업

② 시․군․구 설립 지방공기업 사업

③ 시․군․구 출연기관(단, 50%미만 출연기관은 제외) 사업

2) 시․군․구 계약심사 대상사업

심사 내용	의무적 심사대상 사업
원가심사	▫공사 : 추정금액 3억원(종합공사가 아닌 공사는 2억원) 이상 ▫용역 : 추정금액 7천만원 이상 ▫물품 : 추정금액 2천만원 이상
저가심사	▫시․도에 심사 의뢰
설계변경 심사	▫계약금액 5억원 이상 공사의 1회 설계변경이 당해 계약금액의 10% 이상 증가하는 경우

다. 시․도의 장은 인력․조직 상황 등을 감안하여 저가심사의 시행 여부를 결정할 수 있다.

2. 임의적 심사대상 사업

가. 지방자치단체의 장은 의무적 심사대상 사업 외에 심사대상 금액이나 심사범위를 확대하여 운영할 수 있다. 이 경우 지방자치단체의 규칙 등으로 그 내용을 정하여야 한다.

나. 설계변경 심사 중 설계변경 여부에 대한 타당성 심사는 사업부서가 요청하는 경우 계약심사부서에서 그 요청 건에 대한 심사 가능 여부를 고려하여 심사할 수 있다.

3. 심사제외 대상 사업

가. 지방자치단체 예산으로 편성되어 추진되는 사업이 아니거나, 행정절차가 자치단체가 아닌 국가에서 추진하거나 시급한 국가사업은 심사대상에서 제외한다.

나. 지방자치단체에서 다음과 같은 사유로 계약심사를 제외할 필요가 있다고 판단하는 경우 심사대상에서 제외할 수 있다.

1) 예정가격을 미리 작성하지 않는 사업으로서 지방자치단체가 계약심사의 실익이 없다고 판단한 경우

2) 천재지변, 긴급재해 복구 등 긴급한 사정으로 5일 이내에 계약심사가 불가능한 경우

3) 계약심사의 실익이 없다고 판단되는 물품(완제품) 구매는 제외 가능

예시) 상품권, 유류, 종량제 봉투, 예술품 등

4) 그 밖에 지방자치단체의 장이 필요하다고 인정하는 경우

다. 지방자치단체의 장은 “나. 1) 및 4)”에 해당하는 경우를 판단할 때 계약심사부서(시군구의 경우 시도의 계약심사부서)의 의견을 고려하여야 한다.

라. 지방자치단체의 장이 계약심사업무를 지방계약법 제7조에 따라 회계관계공무원, 중앙행정기관의 장, 다른 지방자치단체의 장 또는 대통령령으로 정하는 전문기관에 위임하거나 위탁한 경우는 “나. 4)”에 해당하는 경우로 본다. 그 예는 다음과 같다.

1) 지방자치단체의 장이 조달사업에 관한 법률 시행령 제15조의2(지방자치단체 공사원가 사전검토) 규정에 따라 조달청장에게 공사원가 사전검토를 요청한 경우

2) 조달사업에 관한 법률에 의한 조달청 제3자단가 계약품목물품이나 조달청을 통한 관급자재 구매 등 조달청에서 자체 원가심사를 한 경우

제3장 계약심사 업무처리 절차

가. 지방자치단체의 사업부서, 계약심사부서(시군구의 계약심사 업무담당자 포함), 계약부서는 효율적인 재정운영을 위하여 상호 협력하여야 한다.

1) 사업부서는 계약심사 요청 전에 제출서류를 확인하면서 설계서간 불일치 사항 또는 산출된 물량의 적정 여부 등을 미리 검토하여야 한다.

2) 계약부서는 계약심사부서의 심사결과와 달리 사업부서에서 계약을 의뢰한 경우 예정가격조서상에 조정내용 및 사유를 명시하여야 한다.

나. 사업부서에서 심사요청한 서류에 누락 또는 오류가 있어 계약심사부서에서 보완 요청을 한 경우 그 소요기간은 심사기간에서 제외한다.

다. 심사결과에 대하여 사업부서가 이견이 있는 경우에는 그 이견내용을 계약부서에 통보할 수 있다. 계약부서는 그 이견내용을 검토하여 기초금액을 결정할 수 있으며 필요한 경우 관계 전문가의 의견을 고려할 수 있다.

① 심사요청 접수		▫사업부서 → 심사부서
② 심사요청서류 검토		▫제출서류 확인 , 누락시 서류보완 요청 (심사부서→사업부서)
③ 심 사		▫원가심사, 설계변경심사, 저가심사 실시
④ 심사결과 1차보고		▫심사 업무 담당자 → 심사 담당(팀장 혹은 계장)
⑤ 심사요청 부서와 협의		▫심사결과를 사업부서와 협의(이견 있을시 해당사항 재검토)
⑥ 심사결과서 작성		▫심사결과 요약서 및 세부 심사내역서 작성
⑦ 심사결과 최종보고		▫심사 업무 담당자 → 심사담당 → 과장(필요시 국장)
⑧ 심사결과 결재		▫심사결과 기안 및 결재
⑨ 심사결과 통보 및 실적 관리		▫심사부서 → 사업부서 및 계약부서, 실적 DB 관리

제4장 원가심사

제1절 공사분야 원가심사

1. 심사대상 공사의 분류

가. 공사분야 계약심사담당자는 사업부서에서 제출한 서류를 검토하여 설계서간 불일치 사항, 품셈 등 대가산정기준과 단가 적용의 적정성, 불필요한 공종 포함 여부 등을 조사․분석하여 사업비가 적정하게 산정되었는지 확인하고, 과다․과소 산정되었거나 적절하지 않은 내용에 대해서는 그 근거자료를 첨부하여 조정하여야 한다.

나. 심사대상 공사는 ｢건설산업기본법｣ 제2조 제4호에 따라 건설공사, 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사, 문화재 수리, 기타공사로 분류한다.

1) 건설공사는 토목공사, 건축공사, 산업설비공사, 조경 및 환경시설 공사 등 시설물을 설치ㆍ유지ㆍ보수하는 공사 (시설물을 설치하기 위한 부지조성공사를 포함), 기계설비 기타 구조물의 설치 및 해체공사 등을 말한다.

2) 전기공사는 「전기공사업법」 제2조에 따라 전기설비 (전기사업법 제2조 제16호), 전력 사용 장소에서 전력을 이용하기 위한 전기계장설비, 전기에 의한 신호표지에 해당하는 설비 등을 설치‧유지‧보수하는 공사 및 이에 따른 부대공사를 말한다.

3) 정보통신공사는 「정보통신공사업법」 제2조에 따라 정보통신설비의 설치 및 유지·보수에 관한 공사와 이에 따르는 부대공사를 말하고, 정보통신설비는 유선, 무선, 광선, 그 밖의 전자적 방식으로 부호·문자·음향 또는 영상 등의 정보를 저장·제어 · 처리하거나 송수신하기 위한 기계 · 기구 · 선로 및 그 밖에 필요한 설비를 말한다.

4) 소방시설공사는 「소방시설공사업법」 제2조에 따라 소방시설을 신설, 증설, 개설, 이전 및 정비하는 공사와 이에 따르는 부대공사를 말한다.

5) 문화재수리는 「문화재수리 등에 관한 법률」 제2조에 따라 지정문화재(무형문화재는 제외), 가지정문화재, 주위의 시설물 또는 조경의 보수․복원․정비 및 손상 방지를 위한 조치를 말한다.

6) 기타공사는 위 1)에서 5)까지 정한 공사에 해당하지 않는 공사로 지하수 개발, 소음․진동 방지시설 설치공사, 오수처리 시설 설치 공사 등을 말한다.

다. ｢건설산업기본법｣ 외 다른 법령에 의한 공사는 “나. 6)”의 기타공사에 해당하는 것으로 본다.

2. 심사 절차

가. 사업부서는 심사요청을 할 때 다음 서류를 제출하여야 한다. 계약심사담당자는 제출된 서류를 검토하여 누락된 서류의 보완을 요청하여야 하며, 사업부서는 그 보완요구에 응하여야 한다.

1) 계약심사 요청서

2) 설계도면, 공사시방서, 현장설명서, 과업내용서

3) 설계내역서(비목별 기초계산서, 수량산출서, 노무비산출근거, 기계경비 산출서, 일위대가표 및 단가산출서, 견적서 등)

4) 기타 필요한 서류

▫소프트웨어 참고자료(엑셀 내역화일, Auto Cad 도면)

▫품셈과 실적공사비를 동시에 적용하는 경우 품셈을 적용한 내역서와 실적공사비를 적용한 내역서

▫신기술․신공법을 적용한 경우 관련자료

▫방침서, 계획서, 기술심사조건 등 기타 보조자료

나. 계약심사담당자는 관련 법령 및 대가기준, 기타 심사 참고자료에 따라 산정내용의 적정성, 가격의 과다․과소 등을 검토하여 기초금액을 확정한다. 이때 계약수량, 이행전망, 이행기간, 수급상황, 계약조건, 기타 계약이행에 따르는 제반여건을 고려하여야 한다.

1) 예규 지방자치단체 원가계산 및 예정가격 작성요령

2) 관련 법령에서 정한 대가기준(원가계산기준 등)

3) 표준품셈, 실적공사비

4) 기타 법정요율

5) 거래실례가격(가격정보 등)

6) 기타 심사 참고자료

다. 계약심사담당자는 “나”에 따라 기초금액을 확정할 때 불가피하게 원가계산방법으로 산정된 금액과 다르게 작성할 때에는 그 조정사유를 명시하여야 한다.

라. 계약심사담당자는 심사결과를 확정하기 전에 심사내용에 대하여 사업부서의 의견을 수렴하여야 하며, 이견이 있는 경우에는 최선의 공사시공을 위하여 우선되어야 할 내용으로 계약목적물의 기능 및 안전을 확보할 수 있도록 협의하여 확정하여야 한다.

마. 계약심사담당자는 “라”에 따라 확정한 심사결과에 대하여 심사결과서를 작성하여 사업부서와 계약부서에 동시에 통보하여야 한다.

바. 사업부서는 “마”의 심사결과에 대하여 1회에 한하여 재심사를 요청할 수 있다. 다만, 동일 사업건에 대하여 일부 내용을 변경하여 재심사를 요청하는 경우 효율성을 위하여 그 변경된 내용만을 발췌하고 그에 대한 추가자료를 첨부하여야 한다.

사. “바”에도 불구하고 재심사결과에 이견이 있는 경우에는 사업부서는 계약부서에 그 이견내용을 통보할 수 있다. 계약부서는 그 이견내용을 검토하여 기초금액을 결정할 수 있으며 필요한 경우 관계 전문가의 의견을 고려할 수 있다.

3. 실적 관리

가. 계약심사담당자는 심사 개시부터 종료까지 해당 심사건에 대한 관련 서류를 보관하여야 하며, 사업부서에 심사결과 통보시 그 서류 일체를 반환하여야 한다. 다만, 사업부서의 결정에 따라 불필요한 서류를 반환하지 않고 처리할 수 있다.

나. 사업부서는 해당 사업건에 대한 계약심사 전․후의 서류를 사업 종료 후 감사 등 사후처리 예상 종료시점까지 보관하여야 한다. 사후처리 예상 종료시점은 관련 규정이 있는 경우 그 규정에 따라야 하며, 별도의 규정이 없는 경우 3년으로 한다.

다. 계약심사담당자는 매년 1월1일부터 12월 31일까지 심사통보일을 기준으로 중앙부처의 통계 기준에 따라 심사한 실적을 취합하고 관리하여야 한다. 동일 사업에 대하여 재심사를 요청한 경우 실적은 최종 심사통보일 및 내용을 기준으로 하여 단일건으로 취합한다.

라. 중앙부처에서 “다”의 실적 제출을 요구한 때에는 그 취합자료를 지체없이 제공하여야 하며, 보완사항에 대한 추가조치가 있을 때에는 정한 기한내에 성실히 이행하여야 한다.

제2절 용역분야 원가심사

1. 심사대상 용역의 분류

가. 용역분야 계약심사담당자는 사업부서에서 제출한 서류를 검토하여 과업내용서와 설계내역서 등을 근거로 대가산정기준과 단가 적용의 적정성, 불필요한 비목 포함 여부 등을 조사․분석하여 사업비가 적정하게 산정되었는지 확인하고, 과다․과소 산정되었거나 적절하지 않은 내용에 대해서는 그 근거자료를 첨부하여 조정하여야 한다.

나. 심사대상 용역은 예규 「지방자치단체 용역계약 일반조건」 제1절 3.에 따라 기술용역, 학술용역, 일반용역으로 분류한다.

1) 기술용역이라 함은 「건설기술관리법」제2조제3호, 「엔지니어링산업진흥법」제2조제1호, 「건축사법」제2조제3호 및 제4호, 「전력기술관리법」제2조제3호 및 제4호, 「정보통신공사업법」제2조제5호, 「소방시설공사업법」제2조제1호 가목 및 다목, 「주택법」제24조제1항, 「측량․수로조사 및 지적에 관한 법률」제2조제1호와 이에 준하는 용역을 말한다.

2) 학술연구용역이라 함은 학문분야의 기초과학과 응용과학에 관한 연구용역 및 이에 준하는 용역을 말한다.

3) 일반용역이라 함은 기술용역과 학술연구용역을 제외한 모든 용역을 말한다.

2. 심사 절차

가. 사업부서는 심사요청을 할 때 다음 서류를 제출하여야 한다. 계약심사담당자는 제출된 서류를 검토하여 누락된 서류의 보완을 요청하여야 하며, 사업부서는 그 보완요구에 응하여야 한다.

1) 계약심사 요청서

2) 과업내용서

3) 설계내역서(비목별 기초계산서, 수량산출서, 노무비산출근거, 일위대가표 및 단가산출서, 견적서 등)

4) 기타 필요한 서류

▫소프트웨어 참고자료(엑셀 내역화일 등)

▫방침서, 계획서 등 기타 보조자료

나. 계약심사담당자는 관련 법령 및 대가기준, 기타 심사 참고자료에 따라 산정내용의 적정성, 가격의 과다․과소 등을 검토하여 기초금액을 확정한다. 이때 계약수량, 이행전망, 이행기간, 수급상황, 계약조건, 기타 계약이행에 따르는 제반여건을 고려하여야 한다.

1) 예규 지방자치단체 원가계산 및 예정가격 작성요령

2) 관련 법령에서 정한 대가기준(원가계산기준 등)

3) 표준품셈

4) 기타 법정요율

5) 거래실례가격(가격정보 등)

6) 기타 심사 참고자료

다. 계약심사담당자는 “나”에 따라 기초금액을 확정할 때 불가피하게 원가계산방법으로 산정된 금액과 다르게 작성할 때에는 그 조정사유를 명시하여야 한다.

라. 계약심사담당자는 심사결과를 확정하기 전에 심사내용에 대하여 사업부서의 의견을 수렴하여야 하며, 이견이 있는 경우에는 용역수행을 위하여 우선되어야 할 내용으로 협의하여 확정하여야 한다.

마. 계약심사담당자는 “라”에 따라 확정한 심사결과에 대하여 심사결과서를 작성하여 사업부서와 계약부서에 동시에 통보하여야 한다.

바. 사업부서는 “마”의 심사결과에 대하여 1회에 한하여 재심사를 요청할 수 있다. 다만, 동일 사업건에 대하여 일부 내용을 변경하여 재심사를 요청하는 경우 효율성을 위하여 그 변경된 내용만을 발췌하고 그에 대한 추가자료를 첨부하여야 한다.

사. “바”에도 불구하고 재심사결과에 이견이 있는 경우에는 사업부서는 계약부서에 그 이견내용을 통보할 수 있다. 계약부서는 그 이견내용을 검토하여 기초금액을 결정할 수 있으며 필요한 경우 관계 전문가의 의견을 고려할 수 있다.

3. 실적 관리

가. 용역분야 원가심사의 실적관리는 제4장 제1절 3.의 규정을 준용한다.

제3절 물품분야 원가심사

1. 심사대상 물품의 분류

가. 물품분야 계약심사담당자는 사업부서에서 제출한 서류를 검토하여 규격서와 설계내역서 등을 근거로 대가산정기준과 단가 적용의 적정성, 불필요한 비목 포함 여부 등을 조사․분석하여 사업비가 적정하게 산정되었는지 확인하고, 과다․과소 산정되었거나 적절하지 않은 내용에 대해서는 그 근거자료를 첨부하여 조정하여야 한다.

나. 심사대상 물품은 물품의 제조․구매와 완제품의 구매로 분류한다.

1) 물품의 제조․구매는 별도의 주문에 의하여 제작절차를 거치는 것으로 원칙적으로 해당 제조업자만 입찰참가자격이 있는 경우를 말한다.

2) 완제품의 구매는 이미 제조되어진 완성품을 그대로 구입하는 것으로 제조업자는 물론 도․소매업자도 입찰참가자격이 있는 경우를 말한다.

2. 심사 절차

가. 사업부서는 심사요청을 할 때 다음 서류를 제출하여야 한다. 계약심사담당자는 제출된 서류를 검토하여 누락된 서류의 보완을 요청하여야 하며, 사업부서는 그 보완요구에 응하여야 한다.

1) 계약심사 요청서

2) 산출기초조사서

3) 규격서, 사양서 등

4) 설계내역서(제조원가계산서, 일위대가표 등)

5) 기타 필요한 서류

▫과업내용서, 시방서 등

▫수입물품의 경우 수입원, 수입물품원가계산서 등

▫수리의 경우 수리명세서, 수리단위별 내역서 등

▫임차의 경우 임차대상․기간․장소 및 임차조건 등

▫시장재고, 유통여부 등 기타 참고자료

나. 계약심사담당자는 관련 법령 및 대가기준, 기타 심사 참고자료에 따라 산정내용의 적정성, 가격의 과다․과소 등을 검토하여 기초금액을 확정한다. 이때 계약수량, 이행전망, 이행기간, 수급상황, 계약조건, 기타 계약이행에 따르는 제반여건을 고려하여야 한다.

1) 예규 지방자치단체 원가계산 및 예정가격 작성요령

2) 관련 법령에서 정한 대가기준(원가계산기준 등)

3) 표준품셈

4) 기타 법정요율

5) 거래실례가격(가격정보 등)

6) 기타 심사 참고자료

다. 계약심사담당자는 “나”에 따라 기초금액을 확정할 때 불가피하게 원가계산방법으로 산정된 금액과 다르게 작성할 때에는 그 조정사유를 명시하여야 한다.

라. 계약심사담당자는 심사결과를 확정하기 전에 심사내용에 대하여 사업부서의 의견을 수렴하여야 하며, 이견이 있는 경우에는 물품의 구매(제조를 포함)를 위하여 우선되어야 할 내용으로 협의하여 확정하여야 한다.

마. 계약심사담당자는 “라”에 따라 확정한 심사결과에 대하여 심사결과서를 작성하여 사업부서와 계약부서에 동시에 통보하여야 한다.

바. 사업부서는 “마”의 심사결과에 대하여 1회에 한하여 재심사를 요청할 수 있다. 다만, 동일 사업건에 대하여 일부 내용을 변경하여 재심사를 요청하는 경우 효율성을 위하여 그 변경된 내용만을 발췌하고 그에 대한 추가자료를 첨부하여야 한다.

사. “바”에도 불구하고 재심사결과에 이견이 있는 경우에는 사업부서는 계약부서에 그 이견내용을 통보할 수 있다. 계약부서는 그 이견내용을 검토하여 기초금액을 결정할 수 있으며 필요한 경우 관계 전문가의 의견을 고려할 수 있다.

3. 실적 관리

가. 물품분야 원가심사의 실적관리는 제4장 제1절 3.의 규정을 준용한다.

제5장 저가심사

제1절 저가심사

1. 저가심사의 대상

가. 공사 입찰에서 최저가 방식으로 낙찰자를 결정하는 경우에는 덤핑입찰 및 부실시공을 방지하기 위하여 입찰 금액의 적정성을 심사하여야 한다.

나. “가”에서 최저가 방식이란 시공경험․기술능력․경영상태 및 신인도 등을 종합적으로 평가(이하 입찰참가자격사전심사(PQ)라 함)하여 시공능력이 있는 적격업체만 입찰참가자격을 부여한 후 최저가격으로 입찰한 자부터 순서대로 입찰금액의 적정성을 심사하여 낙찰자를 결정하는 방식을 말한다.

입찰공고	⇨	입찰참가자격사전심사		⇨	입 찰 (최저가입찰)	⇨	입찰가격 적정성심사 (저가심사)	⇨	낙 찰 자 결 정
		1단계	2단계
		경영상태	이행능력

다. 저가심사 대상은 지방계약법 시행령 제42조제1항(국가계약법 시행령 제42조제4항에서 정하는 추정가격 이상 공사)에 의한 공사이며, 제외대상 공사는 행정안전부예규 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정 기준」제2장 제1절 3. 나.에 정한 공사로 한다.

라. 저가심사는 행정안전부예규 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정 기준」제2장 제6절에서 정한 저가심사 기준에 따라야 한다. 위 기준과 이 장에서 정한 내용이 다를 때에는 위 기준에 정한 바에 따른다.

마. 시․군․구는 저가심사를 시․도에 의뢰하여야 한다.

2. 저가심사의 절차

① 심사요청 접수		▫사업부서(시군구등 포함) → 심사부서(총괄담당) ※ PQ심사 및 입찰이 완료된 후 저가심사를 의뢰
② 심사요청서류 검토		▫심사대상 여부 확인, 제출서류 누락여부 확인, 내역화일 확인 ▫제출서류 누락시 사업부서에 보완지시, 담당별 서류배분
③ 심 사(1)		▫전체 평균입찰금액, 공종 평균입찰금액, 공종 기준금액 산정 ▫부적정 공종판정, 입찰금액 적정성 심사 대상 결정
④ 심사서류 제출 요구		▫부적정 공종에 대한 입찰금액 사유서를 10일 이내에 제출토록 요구(심사부서→1순위 입찰자)
⑤ 제출서류 검토		▫제출서류가 불명확한 경우 보완요구(3일이내) ▫보완서류가 제출되지 않은 경우 당초 제출된 서류만으로 심사
⑥ 심 사(2)		▫입찰금액 적정성 심사위원회 개최 및 심사
⑦ 심사결과 결재		▫심사결과 기안 및 결재
⑧ 심사 결과 통보 및 실적관리		▫심사부서 → 사업부서 및 계약부서 ▫심사결과 및 실적 DB 관리

3. 심사의 요청

가. 사업부서는 심사요청을 할 때 다음 서류를 제출하여야 한다. 계약심사담당자는 제출된 서류를 검토하여 누락된 서류의 보완을 요청하여야 하며, 사업부서는 그 보완요구에 응하여야 한다.

1) 계약심사 요청서

2) 설계도면, 공사시방서, 현장설명서, 과업내용서

3) 설계내역서(비목별 기초계산서, 수량산출서, 노무비산출근거, 기계경비 산출서, 일위대가표 및 단가산출서, 견적서 등)

4) 입찰결과 현황, PQ 심사결과 등

5) 기타 필요한 서류

4. 주요 검토사항

1) 저가 심사방법의 구분

․사업부서에서 다음 유형을 구분하여 심사 요청을 하여야 한다.

A 유형	B 유형	C 유형
◦ PQ심사 통과자 수가 20인 이상인 경우	◦ PQ심사 통과자 수가 20인 미만인 경우	◦ 추정가격 1,500억원 이상 공사중 새로운 기술․공법․기자재 등에 의한 절감사유 제안을 인정할 필요가 있는 경우

2) 심사단계별 주요 검토사항

․시․도의 계약심사 담당자는 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」제2장 사전심사 및 저가심사 기준을 참조하여 다음 내용을 검토하여야 한다.

항 목	검 토 내 용	비고
전체입찰자 평균입찰금액 산정 (A․B 유형)	◦ 입찰자들이 제출한 전체 입찰금액을 기준으로 입찰자 평균입찰금액을 〔자료1〕과 같이 산정	심사부서 공무원
공종평균 입찰금액산정 (A․B 유형)	◦ 각 공종별로 입찰자들이 제출한 공종별 입찰금액을 기준으로 공종평균입찰금액을 〔자료1〕과 같이 산정	″
공종 기준금액 산정 (A․B 유형)	◦ 공종기준금액을 아래 산식에 따라 산정 - 건축공사 발주기관이 작성한 공종별 금액 x 80% + 공종평균입찰금액 x 20% - 토목공사와 그밖에 공사 발주기관이 작성한 공종금액 x 70% + 공종평균입찰금액 x 30% ※ 건축공사, 토목공사 등 공사의 종류는 해당 심사대상공사의 주된 공사 기준 ※ 공종기준금액 산정시 원단위 미만은 버림	″
부적정공종의 판정 (A․B 유형)	◦ 공종입찰금액이 공종금액의 110%를 초과하거나 공종기준금액보다 20% 이상 낮은 경우는 해당 공종입찰금액이 부적정한 것으로 판정 ※ 해당 공사의 난이도, 특성 등을 감안하여 부적정한 입찰금액의 판정기준을 5%p의 범위안에서 가․감 조정이 가능하며 이 경우 변경된 기준을 입찰공고시 명시해야 함 ⇒ 심사부서는 공고에 명시된 내용대로 심사 ◦ 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 모든 공종의 입찰금액을 부적정한 것으로 봄 - 이윤이나 공종에 음(-)의 입찰금액이 있는 경우. 다만 발주기관의 금액이 음(-)의 금액인 경우는 제외 - 간접노무비, 경비 등 합계, 일반관리비, 발주기관이 금액이나 비율을 지정하여 그 금액이나 비율대로 투찰하게 한 항목이나 부가가치세법 등 다른 법령에서 요구되는 비용으로서 해당법령에서 비율이 정해져 있는 항목에 대한 항목별 입찰금액의 합계가 발주기관이 지정하여 투찰하게 하거나 해당법령에서 정해진 금액이나 비율에 따라 산출된 금액의 합계보다 1000분의 3이상 낮은 경우가 하나라도 있는 경우 - 공종의 전체나 일부 세부공종에 실적공사비 단가가 적용된 경우로서 산출내역서상 실적공사비 단가에 따른 공종이나 일부 세부공종 입찰금액이 발주기관이 작성한 산출내역서상의 실적공사비 단가에 따른 금액보다 1000분의 3이상 낮은 경우가 하나라도 있는 경우 - 공종기준금액보다 100분의 50이상 낮거나 높은 공종의 입찰금액이 하나라도 있는 경우 - 입찰시 제출토록 한 입찰금액사유서를 제출하지 아니한 공종이 하나라도 있는 경우
부적정 공종수(數) 산출 (A 유형)	◦ 전체 공종수 중에서 부적정 공종수가 얼마인지 파악 ◦ 부적정 공종수는 다음 기준에 따라 산출 - 공종기준금액의 순위에서 상위 100분의 10 범위 이내에 해당하는 공종(전체공종수가 10개 미만인 경우 공종별 기준금액이 가장 큰 공종) □ 공종의 입찰금액이 공종기준금액의 100분의 80미만 100분의 60이상 : 1.5개 □ 공종의 입찰금액이 공종기준금액의 100분의 60미만 100분의 50이상 : 3.0개 - 공종기준금액의 순위에서 상위 100분의 10 범위 이외에 해당하는 공종(전체공종수가 10개 미만인 경우 공종별 기준금액이 가장 큰 공종이외의 공종) □ 공종의 입찰금액이 공종기준금액의 100분의 80미만 100분의 60이상 : 1.0개 □ 공종의 입찰금액이 공종기준금액의 100분의 60미만 100분의 50이상 : 1.5개 - 발주기관이 작성한 공종금액의 100분의 10(범위를 조정한 경우 조정된 율)을 초과하는 공종 : 1.0개
입찰금액 적정성 심사대상 결정 (A 유형)	◦ 최저가로 입찰한 자부터 순차적으로 심사하여 부적정 공종수가 전체 공종수의 20%(입찰자가 10인 이내인 경우 부적정 공종수가 30%) 미만이면 입찰금액 적정성 심사대상으로 결정 - 부적정공종수가 20%(입찰자가 10인 이내인 경우 30%) 이상이면 자동 탈락 ◦ 전체공종수가 10개 미만인 경우에는 부적정 공종수가 2개 이하이면 입찰금액 적정성 심사대상으로 결정
입찰금액 적정성 심사대상 결정 (B 유형)	◦ 최저가격으로 입찰한 자부터 순서대로 심사 실시 ◦ 다음중 어느 하나에 해당하는 자는 심사대상에서 제외 - 이윤이나 공종에 음(-)의 입찰금액이 있는 경우. 다만 발주기관의 금액이 음(-)의 금액인 경우 제외 - 간접노무비, 경비 등 합계, 일반관리비, 발주기관이 금액이나 비율을 지정하여 그 금액이나 비율대로 투찰하게 한 항목이나 부가가치세법 등 다른 법령에서 요구되는 비용으로서 해당법령에서 비율이 정해져 있는 항목에 대한 항목별 입찰금액의 합계가 발주기관이 지정하여 투찰하도록 하거나 해당법령에서 정해진 금액이나 비율에 따라 산출된 금액의 합계보다 1000분의 3이상 낮은 경우가 하나라도 있는 경우 - 공종의 전체나 일부 세부공종에 대하여 실적공사비 단가가 적용된 경우로서 산출내역서상 실적공사비 단가에 따른 공종이나 일부 세부공종 입찰금액이 발주기관이 작성한 산출내역서상의 실적공사비 단가에 따른 금액보다 1000분의 3이상 낮은 경우가 하나라도 있는 경우. - 발주기관이 작성한 금액보다 100분의 50이상 낮거나 높은 공종의 입찰금액이 하나라도 있는 경우. - 입찰시 제출토록 한 입찰금액사유서를 제출하지 아니한 공종이 하나라도 있는 경우
심사서류 제출 및 검토 (A․B 유형)	◦ 입찰금액 적정성 심사대상자로 하여금 부적정 공종에 대한 입찰금액 사유서를 10일 이내에 제출하게 함 ※서류제출서식은 행안부 예규｢지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준｣ 〔별표2〕 참조 ◦ 제출된 입찰금액 사유서의 내용이 불명확하여 인지할 수 없는 경우 보완을 요구해야 하며, 보완서류는 요구한 날로부터 3일 이내에 제출하게 함 - 보완서류가 제출되지 않은 경우에는 당초 제출된 서류만으로 심사하되 당초 제출된 서류가 불명확하여 심사가 곤란한 경우에는 심사에서 제외
입찰금액 적정성 심사대상 결정 (C 유형)	◦ 최저가격으로 입찰한 자부터 순서대로 심사를 실시 ◦ 다음 중 어느 하나에 해당하는 자는 심사대상에서 제외하고 낙찰자 결정에서 배제함 - 이윤이나 공종에 음(-)의 입찰금액이 있는 경우. 다만 발주기관의 금액이 음(-)의 금액인 경우는 제외 - 간접노무비, 경비 등 합계, 일반관리비, 발주기관이 금액이나 비율을 지정하여 그 금액이나 비율대로 투찰하도록 한 항목이나 부가가치세법 등 다른 법령에서 요구되는 비용으로서 해당법령에서 비율이 정해져 있는 항목에 대한 항목별 입찰금액의 합계가 발주기관이 지정하여 투찰하도록 하거나 해당법령에서 정해진 금액이나 비율에 따라 산출된 금액의 합계보다 1000분의 3이상 낮은 경우가 하나라도 있는 경우 - 공종의 전체나 일부 세부공종에 대하여 실적공사비 단가가 적용된 경우로서 산출내역서상 실적공사비 단가에 따른 공종이나 일부 세부공종 입찰금액이 발주기관이 작성한 산출내역서상의 실적공사비 단가에 따른 금액보다 1000분의 3이상 낮은 경우가 하나라도 있는 경우. 다만 새로운 기술․공법 등에 따른 공사비 절감이 제안된 공종이나 일부 세부공종의 경우는 그러하지 아니하다. - 발주기관이 작성한 공종금액보다 100분의 50이상 낮거나 높은 공종의 입찰금액이 하나라도 있는 경우. 다만 새로운 기술․공법 등에 따른 공사비 절감이 제안된 공종이나 일부 세부공종의 경우에는 그러하지 아니하다. - 절감 제안설계서(새로운 기술․공법 등에 따른 절감제안을 한 자에 한한다)를 제출하지 아니한 경우 - 입찰시 제출토록 한 입찰금액 사유서를 제출하지 아니한 공종이 하나라도 있는 경우
입찰금액 적정성 주관적 심사 (A․B 유형)	◦ 입찰금액 적정성 심사 실시 - 계약담당자는 입찰금액 적정성 심사위원회(이하 “심사위원회”란 한다)를 구성하고 입찰금액 적정성 심사대상자로 결정된 자부터 입찰시 제출한 입찰금액사유서 및 부적정 공종으로 판명되어 추가로 제출하게 한 입찰금액 사유서를 첨부하여 심사위원회에 상정한다. ◦ 심사항목과 심사기준 - 다음 각호의 사유는 공종별 입찰금액 절감사유로 인정하지 아니한다. □ 공사목적물의 변경 등 설계서의 변경에 속하는 사항. 다만 설계서에 정한 가설재료와 시공장비 등을 변경하여 공사금액을 절감하는 사유는 허용 □ 보유조건으로 사회적 부작용이 예상되는 다음의 사항 - 골재채취장, 사토장, 토취장, 재료(가설재료 포함) 및 장비보유(소유 및 임대포함) 사항 - 인근현장의 자재, 인력, 장비 유용 등 사유 □ 사회적 기여, 공여 등에 따른 절감 등 검증이 곤란한 추상적인 사항. 다만, 노무비 절감은 장비투입(인력시공을 기계시공으로 변경하는 경우를 말함)에 따른 경우에 한하여 절감사유로 인정 □ 절감사유 증빙의 신뢰성 확보가 곤란한 다음의 사항 - 하도급, 외주 등에 따른 공사비 절감사항 등 절감사유 인정시 사회적 약자에게 불이익이 예상되는 사항 - 부적정 공종 이외의 공종의 금액을 부적정 공종의 금액에 분배하여 절감하는 사항 □ 기타 절감사유가 관련법규 등에 위반되는 사항 ◦ 부적정공종의 입찰금액 절감사유는 [별표 3]에 따라 심사한다.
설계자문위원회 심의 (C 유형)	◦ 계약담당자는 입찰금액 적정성 심사대상자가 입찰시 새로운 기술․공법 등에 따른 공사비 절감을 제안한 경우에는 우선 절감제안서에 대하여 「건설기술관리법시행령」제21조에 따른 설계자문위원회의 심의를 받아 적격판정을 받은 경우에 한하여 최종적으로 입찰금액 적정성 심사대상자로 결정해야 한다. 다만, 평가점수는 2단계심사에 반영하지 아니한다. ◦ 설계자문위원회 심의를 의뢰하는 경우 다음의 사항을 심의토록하고 종합적으로 적격여부를 판정토록 하여야 한다. - 기능, 성능, 품질 등이 발주기관의 설계서와 동등이상인지 여부 - 공기연장 수반여부 - 공사 중 소음, 진동 등 증가 여부 - 구조내력상 대폭적인 변경으로 기본기능 저하 여부 - 유지보수비용 증가 여부 - 그 밖의 필요한 사항
보완서류 제출 (C 유형)	◦ 제출된 산출내역서, 절감 제안설계서 및 입찰금액 사유서의 내용이 불명확한 경우 보완을 요구하여야 하며 보완서류는 요구한 날로부터 3일 이내에 제출하게 함 - 보완서류가 제출되지 않은 경우 당초 제출된 서류만으로 심사하되 당초 제출된 서류가 불명확하여 심사가 곤란한 경우에는 심사에서 제외하고 낙찰자 결정에서 배제
입찰금액 적정성 주관적심사 (C 유형)	◦ 입찰금액 적정성 심사 실시 - 계약담당자는 입찰금액 적정성 심사대상자로 최종 결정된 자부터 제출된 심사서류를 첨부하여 입찰금액 적정성 심사위원회에 상정한다. ◦ 심사항목 및 심사기준 - 입찰금액 적정성 심사방법(A)를 준용하여 [별표4]에 따라 심사한다. 다만, 새로운 기술․공법 등에 따른 공사비 절감을 제안한 경우에는 설계서의 변경에 속하는 사항이라 할지라도 절감사유로 인정한다.
심사결과 협의 (A․B․C 유형)	◦ 저가심사 결과를 사업부서 및 계약부서와 협의

	“공종”의 구분방법
① 적정성 심사를 위한 공종의 구분은 시공의 순서와 독립성, 공종간의 연관성, 공종의 금액 등을 감안하여 구분하되 가능한 30개 이상의 공종으로 구분하여야 한다. ② 제1항에 따른 공종의 구분은 해당 공사의 설계금액을 기준으로 하며, 해당 공종의 금액이 전체 공사금액(제5항의 항목 제외)의 5%를 초과하지 않도록 구분해야 한다. 다만, 단일 세부공종이 5%를 초과하고 세부공종의 특성상 구분하는 것이 곤란한 경우에는 그러하지 아니한다. ③ 제2항에도 불구하고 입찰금액 적정성 심사(B)의 경우에는 공종금액이 공종간 시공상의 연계성, 심사의 효율성 등을 고려하여 필요하다고 인정하는 경우에는 전체 공사금액(제5항의 항목 제외)의 5%를 초과할 수 있다. ④ 단위 구조물이 2개 이상인 경우 각각의 단위 구조물을 하나의 공종으로 구분하며, 해당 구조물의 공사금액이 전체 공사금액(제5항의 항목 제외)의 5%를 초과하는 경우에는 제2항에 따라 세부공종으로 구분한다. 다만, 단위 구조물의 금액이 적은 경우 등 필요한 경우에는 2개 이상의 단위 구조물을 묶어 하나의 공종으로 구분할 수 있다. ⑤ 간접노무비, 경비 등 합계, 일반관리비, 법정경비, PS항목, 부가가치세, 이윤, 그밖에 발주기관이 필요하다고 인정하는 세부공종은 적정성심사를 위한 공종에 포함시키지 아니한다.

〔자료 1〕

	전체 입찰자 평균입찰금액 및 공종평균입찰금액 산정방법
① 전체 입찰자 평균입찰금액 산정은 다음 각 호에 해당하는 입찰을 제외한 후 산술평균(원단위 미만 버림)하여 산정한다. 1. 지방계약법 시행령 제39조제4항에 따른 무효인 입찰의 경우 2. 입찰금액이 예정가격보다 높은 입찰의 경우 3. 부적정공종 판정시 모든 공종의 입찰금액을 부정적공종으로 판정하는 경우(공종기준금액보다 100분의 50이상 낮거나 높은 공종의 입찰금액이 하나라도 있는 경우는 제외) ② 공종평균입찰금액의 산정은 제1항 각호에 해당하는 입찰과 전체입찰자 평균입찰금액보다 100분의 20이상 낮은 입찰을 제외한 공종입찰금액으로 다음 각 호와 같이 산정한다. 1. 공종입찰금액이 10개 이상인 경우에는 공종입찰금액 순위에서 상위 100분의 30이상과 하위 100분의 10이하에 해당하는 입찰금액을 제외하고 산술평균하여 산정한다. 다만, 입찰금액 순위 기준 상위 100분의 30 또는 하위 100분의 10에 해당하는 입찰금액이 2개 이상인 경우 이를 모두 제외한다. 2. 공종입찰금액이 10개미만 5개이상인 경우 최상위와 최하위에 해당하는 입찰금액을 제외하고 산술평균하여 산정한다. 다만 최상위 또는 최하위에 해당하는 입찰금액이 2개 이상인 경우 각각 1개의 입찰금액만 제외한다. 3. 공종입찰금액이 5개 미만인 경우에는 제외하는 입찰금액 없이 산술평균하여 산정한다. ③ 제2항에 따라 산정된 공종평균입찰금액과 100분의 30이상 차이 나는 공종입찰금액이 있는 경우 이를 제외하고 산술평균하여 공종평균입찰금액을 다시 산정한다. ④ 제2항과 제3항에 따라 공종평균입찰금액이 산정되지 아니하는 공종은 제1항 각 호에 해당하는 입찰과 전체입찰자 평균입찰금액보다 100분의 20이상 낮은 입찰을 제외한 공종입찰금액을 산술평균하여 공종평균입찰금액을 산정한다. ⑤ 공종평균입찰금액 산정시 원단위 미만은 평균 산정 단계마다 버린다. ⑥ 심사대상 공종(또는 세부공종)이 누락된 경우에는 해당 공종(또는 세부공종)의 금액을 ‘0’으로 본다 ⑦ 공종(또는 세부공종)이 변경된 경우는 전체 입찰자 평균입찰금액과 공종평균입찰금액 산정시 변경된 공종(또는 세부공종)을 제외하지 아니한다. ⑧ 공종(또는 세부공종)의 수량이 변경된 경우는 전체 입찰자 평균입찰금액 및 공종평균입찰금액 산정을 위하여 이를 수정하지 아니한다.

5. 심사결과 통보

가. 계약심사담당자는 확정한 심사결과에 대하여 심사결과서를 작성하여 사업부서와 계약부서에 동시에 통보하여야 한다.

나. “가”의 심사결과서는 심사결과요약서, 분야별 심사내역서, 기타 심사조건을 말한다.

6. 실적 관리

가. 계약심사담당자는 심사 개시부터 종료까지 해당 심사건에 대한 관련 서류를 보관하여야 하며, 사업부서에 심사결과 통보시 그 서류 일체를 반환하여야 한다. 다만, 사업부서의 결정에 따라 불필요한 서류를 반환하지 않고 처리할 수 있다.

나. 사업부서는 해당 사업건에 대한 계약심사 전․후의 서류를 사업 종료 후 감사 등 사후처리 예상 종료시점까지 보관하여야 한다. 사후처리 예상 종료시점은 관련 규정이 있는 경우 그 규정에 따라야 하며, 별도의 규정이 없는 경우 3년으로 한다.

다. 계약심사담당자는 매년 1월1일부터 12월 31일까지 심사통보일을 기준으로 중앙부처의 통계 기준에 따라 심사한 실적을 취합하고 관리하여야 한다. 동일 사업에 대하여 재심사를 요청한 경우 실적은 최종 심사통보일 및 내용을 기준으로 하여 단일건으로 취합한다.

라. 중앙부처에서 “다”의 실적 제출을 요구한 때에는 그 취합자료를 지체없이 제공하여야 하며, 보완사항에 대한 추가조치가 있을 때에는 정한 기한내에 성실히 이행하여야 한다.

제2절 저가심사위원회 구성 및 운영

1. 구성 주체

가. 시․도지사는 최저가 낙찰대상공사의 입찰금액 적정성 심사를 위하여 지방계약법 시행령 제42조의2제4항에 따라 위원회(이하 ‘저가심사위원회’라 한다)의 구성과 운영에 필요한 사항을 시․도의 규칙으로 정하여야 한다.

나. 저가심사위원회는 시·도 본청의 계약심사부서에서 사업부서(시·군·구 포함)의 요청에 의하여 해당사업별로 구성할 수 있다.

2. 위원의 자격요건

가. 저가심사위원회의 위원 자격요건은 다음과 같다.

1) 국가 및 다른 시도 및 시도 관할 시군 자치단체공무원 중 5년이상 근무경력을 가진 7급 이상 공무원

2) 정부투자기관․출연기관․지방공기업 기술직렬 4급 이상 직원 또는 동등이상 경력자

3) 민간 전문가로서 아래 자격요건을 갖춘 자

▪토목공학분야 대학교수(조교수이상) 중 관련 견적전문가

▪당해공사심사분야 설계용역업무 등 공사비 책정분야(적산업무 등)경력이 7년 이상인 자

▪당해심사분야 공사비 책정업무를 수행한 경험이 있는 자로서 3년 이상 근무경력을 가진 기술사 또는 박사학위 소지자

▪기타 공정한 심사를 위하거나 및 전문성이 있다고 판단되어 당해 시도지사가 정하는 자 (당해 시도 소속공무원 ,지방의원 또는 시도 관할 시군구 공무원, 지방의원은 제외)

나. 위원장은 위원 중에서 위원들의 선출에 의하여 결정한다.

3. 위원회 구성요령

가. 지방자치단체의 사업부서는 지방계약법 시행령 제42조제1항에 의하여 최저가 낙찰대상 공사인 경우 시․도 계약심사부서에 저가심사위원회 구성을 입찰공고일로부터 5일 이내에 문서로 요청하여야 한다.

나. 시․도 계약심사부서에서는 전문분야를 토목, 건축, 전기․통신분야로 구분하여 당해 심사대상사업에 맞는 전문가를 위원후보로 선정하여야 한다.

다. 시․도 계약심사부서에서는 자격을 갖춘 자로 국가 및 자치단체 공무원․준정부기관․지방공기업 15명, 민간전문가 15명, 총 30명의 예비위원 명부를 작성하여야 한다. 예비위원은 각 분야별로 번호를 부여하고, 위원명단은 철저하게 보안에 부쳐야 하며, 사업부서에는 분야별 번호를 송부하여야 한다.

예시) 공무원․준정부기관․지방공기업- 1·2·3·4·5·6·7·8·9·10·11·12·13·14·15

라. 사업부서의 심사담당자는 관련부서 공무원 입회하에 배부된 번호를 무작위로 각 분야별(공무원․준정부기관․지방공기업 4명, 민간전문가 3명)로 추첨한다.

※ 불참자가 있는 경우를 예상하여 , 민간전문가 1, 공무원․투자․출연기관 지방공기업에서  2명을 추가(총 10명)하여 추첨할 수 있음

※ 시·도별로 번호 무작위 추첨 프로그램을 운용할 수 있음

마. 사업부서에서는 추첨된 번호로 심사위원을 심사 전날까지 확정하고 이를 보안에 부쳐야 한다.

바. 사업부서에서는 선정된 위원에게 보안유지를 조건으로 회의 참석을 요청하여야 한다.

사. 심사자료는 심사당일날 위원에게 배부해야 하며, 심사 당일날 자료검토 시간을 충분히 주어야 한다.

예시) 오전에 검토, 오후에 심사

아. 심사담당자는 필요한 경우 심사 당일 심사위원이 모두 있는 장소에서 입찰 당사자를 불러 심사에 필요한 설명을 하도록 할 수 있다. 다만 입찰 당사자는 위원 개별에게 설명을 하여서는 아니된다.

자. 시․도에서는 심사위원을 선정할 때 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 위원이 포함되지 않도록 사전에 확인하여야 한다.

1) 해당 심사대상공사의 시행으로 인하여 이행당사자가 되는 경우 (대리관계, 하도급 관계 포함)

2) 최근 3년 이내에 해당 심사 대상업체에 재직한 경우

3) 공공기관에서 실시하는 설계 등 용역의 자문위원으로 사회적 물의를 일으킨 경우

4) 기타 공정한 심의를 할 수 없다고 판단되는 경우

제6장 설계변경심사

제1절 설계변경심사

1. 설계변경심사의 대상

가. 설계변경심사는 사업부서에서 공사의 시공 중에 예측하지 못했던 사태의 발생이나 계획의 변경 등으로 설계변경을 하고자 하는 경우 설계변경을 하기 전에 계약심사부서에서 설계변경의 적정성을 검토하는 것을 말한다.

나. “가”의 적정성 검토에는 지방계약법 시행령 제74조에 의한 설계변경으로 인한 계약금액 조정과 동법 시행령 제75조에 의한 운반거리 변경 등 설계변경 심사가 가능하다고 인정되는 경우를 포함한다.

다. 설계변경심사 대상은 공사의 계약금액(설계변경 전의 계약금액)이 시․도는 20억원(시․군․구는 5억원) 이상으로 1회 설계변경 금액이 계약금액의 10% 이상 증가하는 경우로 한다.

라. 지방자치단체의 장은 “다”의 의무적 심사대상 사업 외에 심사대상 금액이나 심사범위를 확대하여 운영할 수 있다.

마. 사업부서에서 설계변경심사를 요청하는 1회 설계변경의 기준은 예규 지방자치단체 공사계약 일반조건 제7절 1. 가. 2)의 ‘설계변경 당시’ 정의에 따라 판단한다.

바. 설계변경심사 제외 대상사업은 다음과 같다.

1) 재해 및 재난복구사업으로서 사업을 시급하게 추진해야 하는 사업의 경우(항구복구사업으로서 심사기간이 10일 이내인 경우는 특별한 사유가 없는 한 심사 실시)

2) 계약부서(또는 사업부서)에서 이미 계약상대자와 협의하여 우선 시공을 한 설계변경으로 설계변경심사의 실효성이 없는 경우

3) 기타 사업부서에서 계약의 특성상 설계변경 심사를 하는 것이 적정하지 않다고 판단되는 경우로서 자치단체 계약심사부서와 사전 협의하는 경우

① 심사요청 접수		▫사업부서 → 심사부서(총괄담당) ※ 설계변경이 이루어지기 전에 신청
② 심사요청서류 검토		▫심사대상 여부 확인, 제출서류 누락여부 확인, 내역화일 확인 ▫제출서류 누락시 사업부서에 보완지시, 담당별 서류배분
③ 심 사		▫설계변경 조서, 원가계산서, 내역서, 일위대가서, 단가조사서, 기계경비 산출서, 설계도면 등 검토
④ 심사결과 1차보고		▫협조분야 심사내역 수합(토목, 기계, 조경 등) ▫심사 업무 담당자 → 심사 담당(팀장 혹은 계장),
⑤ 심사요청 부서와 협의		▫심사결과를 사업부서와 협의(이견 있을시 해당사항 재검토)
⑥ 심사결과서 작성		▫심사결과 요약서 및 세부 심사 내역서 작성
⑦ 심사결과 최종보고		▫심사업무 담당자 → 계약심사담당 → 과장(필요시 국장)
⑧ 심사결과 결재		▫심사결과 기안 및 결재
⑨ 심사 결과 통보 및 실적관리		▫심사부서 → 사업부서 및 계약부서 ▫심사결과 및 실적 DB 관리

2. 설계변경심사의 절차

3. 심사의 요청

가. 사업부서는 심사요청을 할 때 다음 서류를 제출하여야 한다. 계약심사담당자는 제출된 서류를 검토하여 누락된 서류의 보완을 요청하여야 하며, 사업부서는 그 보완요구에 응하여야 한다.

1) 계약심사 요청서

2) 설계도면, 공사시방서, 현장설명서, 과업내용서

3) 설계내역서(비목별 기초계산서, 수량산출서, 노무비산출근거, 기계경비 산출서, 일위대가표 및 단가산출서, 견적서 등)

4) 기타 필요한 서류

▫소프트웨어 참고자료(엑셀 내역화일, Auto Cad 도면)

▫품셈과 실적공사비를 동시에 적용하는 경우 품셈을 적용한 내역서와 실적공사비를 적용한 내역서

▫신기술․신공법을 적용한 경우 관련자료

▫설계변경 이유조서 등 기타 보조자료

구 분	검토 사항
1. 설계변경의 타당성	◦ 별도로 발주해야 할 사항이 아닌지 여부 ◦ 설계변경이 불가피한지 여부 ◦ 향후 동일 내용으로 설계변경이 발생할 가능성이 없는지 여부 등
2. 설계변경 물량(수량) 산출의 적성성	◦ 거리, 기간, 위치 등을 고려하여 가장 합리적인 방법으로 물량(수량) 산출이 이루어졌는지 여부
3. 설계변경 공법의 적정성	◦ 설계변경에 따른 신기술, 신공법 등을 적용하는 경우 신기술, 신공법의 적정성 여부
4. 설계변경 단가산출의 적정성 및 설계서간 모순이 없는지 여부	◦ 설계변경 물량에 대한 일위대가서, 단가산출의 적정성 ◦ 설계변경물량의 설계도면, 물량내역서, 시방서 등과의 일치여부
5. 설계변경에 따른 자재 등의 적합 여부	◦ 설계변경되어 증가되는 부분, 주요자재의 규격․품질․수량의 적정성 여부
6. 설계변경을 위한 관련 법령 검토 여부	◦ 설계변경에 따른 환경 관련 법령 등 관련 법령에 저촉되는지 여부 검토

4. 주요 검토사항

5. 심사결과 통보

가. 계약심사담당자는 확정한 심사결과에 대하여 심사결과서를 작성하여 사업부서와 계약부서에 동시에 통보하여야 한다.

나. “가”의 심사결과서는 심사결과요약서, 분야별 심사내역서, 기타 심사조건을 말한다.

다. 심사결과는 아래와 같은 유형으로 통보하여야 한다.

원안 통과	수 정	재검토
◦ 심사요청 내용대로 설계변경(원안 통과)	◦ 심사요청 내용을 수정하여 설계변경	◦ 설계변경에 대해 재검토 지시 ※ 재검토 사유명기

라. 심사결과가 재검토에 해당하는 경우 사업부서에서는 자료를 정리하여 횟수에 제한없이 다시 심사요청을 할 수 있다.

마. 심사결과가 수정에 해당하는 경우로서 사업부서에서 수용할 수 없다고 판단되면 그 사유를 첨부하여 1회에 한하여 재심사를 요청할 수 있다.

6. 실적 관리

가. 계약심사담당자는 심사 개시부터 종료까지 해당 심사건에 대한 관련 서류를 보관하여야 하며, 사업부서에 심사결과 통보시 그 서류 일체를 반환하여야 한다. 다만, 사업부서의 결정에 따라 불필요한 서류를 반환하지 않고 처리할 수 있다.

나. 사업부서는 해당 사업건에 대한 계약심사 전․후의 서류를 사업 종료 후 감사 등 사후처리 예상 종료시점까지 보관하여야 한다. 사후처리 예상 종료시점은 관련 규정이 있는 경우 그 규정에 따라야 하며, 별도의 규정이 없는 경우 3년으로 한다.

다. 계약심사담당자는 매년 1월1일부터 12월 31일까지 심사통보일을 기준으로 중앙부처의 통계 기준에 따라 심사한 실적을 취합하고 관리하여야 한다. 동일 사업에 대하여 재심사를 요청한 경우 실적은 최종 심사통보일 및 내용을 기준으로 하여 단일건으로 취합한다.

라. 중앙부처에서 “다”의 실적 제출을 요구한 때에는 그 취합자료를 지체없이 제공하여야 하며, 보완사항에 대한 추가조치가 있을 때에는 정한 기한내에 성실히 이행하여야 한다.

제7장 보  칙

제1절 계약심사시 주의할 사항

1. 계약심사 심사금액 산정

가. 다른 법령에서 그 대가기준(원가계산기준)을 규정하고 있는 경우에는 해당 법령이 정하는 기준에 따라 원가계산을 할 수 있다. 그 대가기준의 적용기준일 판단일은 계약심사 요청서류 접수일부터 시행토록 한 경우로 한다.

나. 사업부서에서 위 대가기준에 따른 적정한 가격을 확보하지 않고 심사를 요청한 경우 계약심사부서에서 부족하게 산정된 부분을 증액할 수 있다.

다. 원가계산방법으로 심사할 때에는 사업부서에서 제시한 계약수량․이행의 전망․이행기간․수급상황․계약조건․기타 제반여건을 참작하여 부당감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하고, 불가피하게 원가계산에 의하여 산정된 금액과 다르게 심사금액을 정하고자 할 때에는 그 조정사유(원가산정기준의 차이 등)를 심사결과서에 명시하여야 한다. 단, 관련 법령이나 원가산정개념에 위배되는 임의적인 해석은 불가하다.

2. 계약심사 절감금액의 사용

가. 계약심사 절감금액(사업부서의 요청금액에서 심사부서의 심사금액을 뺀 차액을 말한다)은 「지방자치단체 세출예산 집행기준」에 따라 처리하여야 한다.

3. 세부기준 마련

가. 행정안전부 장관이 정한 계약심사 업무처리지침 내용 외에 지방자치단체가 계약심사 운용에 필요한 세부사항에 관하여는 지방자치단체의 장이 업무처리규칙으로 결정할 수 있다.

나. 계약심사 처리기간은 심사부서 및 업무담당자의 여건에 따라 업무처리규칙으로 결정한다. 결정한 내용이 없는 경우 처리기간의 산정은 민원사무처리규정을 준용한다.

다. 본 지침의 서식은 참고자료로 시․도의 계약심사부서에서 별도의 서식을 정할 수 있다.

제2절 계약심사의 활성화

1. 전문성 확보 노력

가. 계약심사부서에서는 심사 우수사례 및 부진사례를 발굴 및 선정하여 사례집을 발간하거나 사업부서 및 계약부서, 계약심사 업무담당자를 대상으로 교육을 할 수 있다.

나. 계약심사부서에서는 신기술 또는 특수공법 적용의 적정성, 공법 및 규격 변경 등에 대한 적정성 검토를 위하여 관련 분야의 전문가를 대상으로 「계약심사 원가분석 자문단」을 구성 및 운영할 수 있다.

<서식 공사 원가심사-1>

공사계약 심사요청서

시 행	0000과-
시행일자
수 신 자
접수번호
접수일자

담당자						결재
협 조

공 사 명			요청기관
공사위치
공사기간		계약방법
공사금액	․ 총공사비 : 천원 - 도 급 비 : - 관 급 비 : - 이 설 비 :	․ 금회공사비 : 천원 - 도 급 비 : - 관 급 비 : - 이 설 비 :
설 계 자	․ 상 호 : ․ 대 표 자 : ․ 책임기술자 : (전화번호 : )
발 주 처	․ 담 당 자 : (전화번호 : )
◦ 공사개요 :
◦ 첨부 서류 1. 설계도서 각1부(설계도면, 공사시방서, 현장설명서, 과업내용서, 설계내역서 등) 2. 기타 심사에 필요한 서류

발신명의

<서식 공사 원가심사-2>

심사결과 요약서

공 사 명 :

(단위 : 원)

구 분			요청내용	심사내용	증 감	비 고
순공사원가	재료비	직접재료비
		간접재료비
		작업부산물
		소 계
	노무비	직접노무비
		간접노무비
		소 계
	제경비	운 반 비
		기계경비
		산재보험료
		고용보험료
		건강보험료
		연금보험료
		노인장기요양보험료
		퇴직공제부금비
		안전관리비
		기타경비
		환경보전비
		공사이행보증수수료
		하도급발급수수료
		소 계
계
일반관리비
이 윤
[공급가액]
부가가치세
[도 급 액]
관급자재비
이 설 비
[총공사비]

※ 참고자료인 ｢조달청 원가계산 제비율 적용기준｣의 기타경비 항목 : 수도광열비, 복리후생비, 소모품비 및 사무용품비, 여비․교통통신비, 세금과공과, 도서인쇄비

<서식 공사 원가심사-3>

주요심사내용

▣ 공 사 명 :

□ 사업개요

위 치
공사개요
공사기간

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액  :              천원

◦ 심사금액  :              천원

◦ 절 감 액  :               천원

◦ 절 감 률  :       -      %

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 :         외   종

-

-

◦ 일위대가 조정 (         외    개공종)

-

-

□ 기타사항

◦ (계약심사조건 등 심사와 관련 특별히 보고할 사항)

○○○○ 건설공사(필요시)

▣ 위 치 도

▣ 투 시 도

<서식 용역 원가심사-1>

용역계약 심사요청서

담당자						결재
협 조

시 행	0000과-
시행일자
수 신 자
접 수
접수일자

용 역 명			요청기관
용역위치
용역기간		계약방법
용역금액	․ 총용역비 : 천원	․ 금회용역비 : 천원
예정원가 작 성 자	․ 담당부서 : ․ 작 성 자 : (전화번호 )
◦ 용역개요 :
◦ 첨부 서류 1. 과업내용서 1부 2. 설계내역서 1부 3. 기타 심사에 필요한 서류(학술연구용역의 경우 과업참여자의 이력서 등)

발신명의

< 서식 용역 원가심사-2 >

심사결과 요약서

용 역 명 :

(단위 : 원)

구 분			요청내용	심사내용	증 감	비 고
						요청(심사)
순공사원가	재료비	직접재료비
		간접재료비
		소 계
	노무비	직접노무비
		간접노무비
		소 계
	제경비	경 비
		여 비
		유 인 물 비
		전산처리비
		시약 및 연구용재료비
		회 의 비
		임 차 료
		교통통신비
		감가상각비
		연금 및 보험료
		기 타 경 비
		소 계
계
일반관리비
이 윤
[총 원 가〕
부가가치세
[총용역비〕

※ 학술연구용역의 사례이며, 일반용역의 경우는 경비 항목이 달라질 수 있음.

<서식 용역 원가심사-3>

주요심사내용

▣ 용 역 명 :

□ 사업개요

위 치
용역개요	◦ 요청기관 : ◦ 용 역 비 : ◦ 용역내용 : ◦ 계약방법
용역기간

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액  :              천원

◦ 심사금액  :              천원

◦ 절 감 액  :               천원

◦ 절 감 률  :       -      %

□ 주요 심사내용

◦ 단가 조정 :         외   종

-

-

◦ 일위대가 조정 (         외    개공종)

-

-

□ 기타사항

◦ (계약심사조건 등 심사와 관련 특별히 보고할 사항)

<서식 물품 원가심사-1>

물품구매계약 심사요청서

시 행	0000과-
시행일자	. . .
수 신 자
접 수
접수일자	. . .

담당자		팀 장	과 장			결재
협 조

건 명		요청기관
산출금액
구 매 예정일자
계약방법
수의계약시 계약대상 업 체	․ 상 호 : 대표자 : ․ 주 소 : ․ 전화번호 :
기 타
◦ 첨부 서류 1. 산출기초조사서 1부 2. 규격서 및 사양서 1부 3. 설계내역서 1부 4. 기타 심사에 필요한 서류

	발신명의

물품구매 산출기초조사서

◦ 건  명 :

품 명	규 격	단 위	수 량	산 출 조 사 근 거				산출가격(원)
								단 가	금액
공급가액
부 가 세
합 계

작성자              성명        (인)

확인자              성명        (인)

<서식 물품 원가심사-2>

물품제조(수리)계약 심사요청서

담당자						결재
협 조

시 행	0000과-
시행일자
수 신 자
접 수
접수일자

건 명		요청기관
산출금액	원
제 조 (수 리) 예정일자
계약방법
수의계약시 계약대상 업 체	․ 상 호 : 대표자 : ․ 주 소 : ․ 전화번호 :
기 타
◦ 첨부 서류 1. 산출기초조사서 1부 2. 제조(수리) 규격서 및 사양서 1부 3. 설계내역서 1부 4. 기타 심사에 필요한 서류

	발신명의

제조원가계산서
◦ 품 명 :		◦ 수 량 :
◦ 규 격 :		◦ 제조기간 :

구 분 비 목			금 액	구 성 비	비 고
제조원가	재료비	직접재료비
		간접재료비
		작업설․부산물등(△)
		소 계
	노무비	직접노무비
		간접노무비
		소 계
	경비	전 력 비
		수도광열비
		운 반 비
		감가상각비
		수리수선비
		특허권사용료
		기 술 료
		연구개발비
		시험검사료
		지급임차료
		보 험 료
		복리후생비
		보 관 비
		외주가공비
		안전관리비
		소모품비
		여비․교통비․통신비
		세금과공과
		페기물처리비
		도서인쇄비
		지급수수료
		기타법정경비
		소 계
일반관리비 ( )%
이 윤 ( )%
총 원 가
부 가 가 치 세
총 계

<서식 물품 원가심사-3>

인쇄물계약 심사요청서

담당자						결재
협 조

시 행	0000과-
시행일자
수 신 자
접 수
접수일자

요청기관		담당자			전화번호
건 명
산출금액	원		계약방법
수의계약시 계약대상 업 체	․상 호 : (대 표 자 : ) ․주 소 : ․전화번호 :
◦ 인쇄물내역 1. 규 격 : 절( ㎜ × ㎜) 2. 수 량 : 3. 면 수 : 표지 면, 내지 면 4. 용지종류 : 표지 ( g), 내지 ( g) 5. 인쇄색도 : 표지 도(단․양면), 내지 도(단․양면) 6. 제본종류 : 7. 특수사양 : 8. 기 타 :
◦ 첨부 서류 1. 인쇄물산출기초조사서 1부 2. 사양서 또는 과업내용서 1부 3. 수의계약사유서(수의계약의 경우) 4. 기획편집료 지출 또는 지출예정시에는 내역서 5. 기타 심사에 필요한 서류

	발신명의

인쇄물 산출기초조사서
◦ 품 명 :
◦ 산출근거		(단위 : 원)

구 분	산출금액	산 출 근 거	비 고
용 지 대
전자조판 및편집료
필름출력비
인쇄판비
인 쇄 비
제 본 비
기 타
계
일반관리비
소 계
이 윤
합 계
공급가액
부가가치세
총 계

※ 경인쇄의 경우 “인쇄비란”에 산출근거와 산출금액을 표기하고,  산출금액에 부가세만 가산적용.

산출자                            (인)

확인자             과장           (인)

<서식 물품 원가심사-4>

인쇄물기획․편집 계약 심사요청서

시 행	0000과-
시행일자
수 신 자
접 수
접수일자

담당자					결재
협 조

요청기관		담당자			전화번호
건 명
산출금액	원		계약방법
수의계약시 계약대상 업 체	․상 호 : (대 표 자 : ) ․주 소 : ․전화번호 :
◦ 기획편집내역 1. 규 격 : 2. 색 도 : 3. 면 수 : 표지 면, 내지 면 4. 기타(특수작업비용 : 도표, 일러스트 등)
◦ 첨부 서류 1. 산출기초조사서 1부. 2. 사양서 또는 과업내용서 1부. 3. 수의계약사유서(수의계약의 경우) 4. 기타 심사에 필요한 서류

	발신명의

인쇄물기획 ․ 편집 산출기초조사서
◦ 품 명 :
◦ 산출근거		(단위 : 원)

구 분	산출금액	산 출 근 거	비 고
기획료 또는 디자인비
전자조판 및 편집료			기획편집 심사에 '전자조판 및 편집료’를 산정한 경우, 인쇄물 심사요청서에는 반드시 제외
필름출력비			기획편집 심사에‘필름출력비’를 산정한 경우, 인쇄물 심사요청서에는 반드시 제외
기타 비용
계
일반관리(5%이내)
소 계
이 윤(10%이내)
합 계
공급가액
부가가치세(10%)
총 계

산출자                            (인)

확인자             과장           (인)

<서식 물품 원가심사-5>

주요심사내용

▣ 건 명 :

□ 개요

품 명
구매 내역 및 금액
계약방법

□ 심사평가 결과

◦ 구매금액  :              천원

◦ 심사금액  :              천원

◦ 절 감 액  :               천원

◦ 절 감 률  :       -      %

□ 주요 심사내용

◦ 단가 조정 :         외   종

-

-

□ 기타사항

◦ (계약심사조건 등 심사와 관련 특별히 보고할 사항)

<서식 저가심사-1>

공사 저가심사요청서

시 행	0000과-
시행일자	. . .
수 신 자
접 수
접수일자	. . .

담당자		팀 장	과 장			결재
협 조

공사명		요청기관
공사위치
공사기간
공사추정금액
공사개요
설계자	상호 : 대표자 : 책임기술자 : (전화 : )
발주자	담당자 : (전화 : )
◦ 첨부 서류: 입찰참가자격 사전심사 결과 및 입찰자별 가격 투찰 현황 기타 저가심사에 필요한 자료 (설계내역서,시방서, 설계도면, 과업내용, 비목별 기초계산서, 기계경비 산출서등) 설계프로그램에 의한 설계도서(엑셀 내역화일, Auto Cad 도면)

	발신명의

<서식 설계변경심사-1>

설계변경 심사요청서

시 행	0000과-
시행일자	. . .
수 신 자
접 수
접수일자	. . .

담당자		팀 장	과 장			결재
협 조

공사명		요청기관
공사위치
공사기간
계약금액(최초)
공사개요
설계자	상호 : 대표자 : 책임기술자 : (전화 : )
발주자	담당자 : (전화 : )
◦ 설계변경 사유(구체적으로 서술) -
◦ 첨부 서류-

	발신명의