【별표 8】

국방정보화사업 업무 흐름도(정보시스템 구축사업)

구축사업2)

중기계획/예산

검토 및 편성

(정보화국)

중기계획

검토 및 수립

(정보화국)

ISPㆍISMP 예산 요구서 제출

(소요제기기관)

ISPㆍISMP 예산

검토 및 편성

(정보화국)

중기계획

요구서 제출

(소요제기기관)

구축사업1)

중기계획/예산

요구서 제출

(소요제기기관)

ISPㆍISMP 수립

(소요제기기관/ 집행기관)

□ 중기계획 및 예산편성

1) ISPㆍISMP 최종 산출물을 검토하여 사업순기 및 예산을 조정하거나, 중기계획 및 예산 편성에서 제외할 수 있음

2) PMO 사업이 포함된 경우 ISPㆍISMP 결과물을 참고하여 PMO 사업의 필요성 검토

국방CIO실무협의회

국방CIO실무협의회

국방CIO실무협의회

: 필요시에만 수행

□ 정보화전략계획(ISP)/정보시스템마스터플랜(ISMP) 수립

ISPㆍISMP 한시조직1) 편성

(소요제기기관)

사업계획서 작성

(소요제기기관)

ISPㆍISMP 수행

(소요제기기관)

검수

(소요제기기관)

인계인수

(소요제기기관 →집행기관)

종결

(소요제기기관)

PMO/감리2)

사업 발주

(소요제기기관)

1) 필요시 제40조제4항에 따라 ISPㆍISMP 한시조직을 편성할 수 있으며, 편성 기준은 [별표 9] 국방정보화사업 한시조직 편성
기준 참고

2) 임의사항으로, 국방정보화국장이 PMO(전자정부법 제64조의2) 및 감리(같은 법 시행령 제71조)의 필요성을 인정한 사업에 한함

: 필요시에만 수행

□ 정보시스템 구축 사업

사업 한시조직 편성1)

(소요제기기관)

사업계획서ㆍ제안요청서 작성

(집행기관)

과업심의,

발주/계약 등

(집행기관)

사업 관리

(집행기관)

시험평가
계획 수립

(소요제기기관)

PMO2)/감리3)

사업 발주

(집행기관)

시험평가단

구성

(소요제기기관)

획득정보자원

정보등록

(집행기관)

시험평가

실시

(시험평가단

등)

검수/
체계인수

(집행기관)

사업종결

보고

(집행기관)

운영/
유지보수

(유지보수책임기관)

1) 필요시 제40조제4항에 따라 한시조직을 집행기관에 편성할 수 있으며, 사업 한시조직 편성 기준은 [별표 9] 국방정보화사업
한시조직 편성 기준 참고

2) 대국민 서비스 및 행정의 효율성에 미치는 영향이 큰 사업, 사업의 난이도가 높아 특별한 관리가 필요한 사업 등이며,
중기계획 및 예산 편성 시 국방정보화국장이 PMO 사업의 필요성을 인정한 사업에 한함

3) 사업비 5억원 이상의 정보시스템 구축 사업은 필수(전자정부법 시행령 제71조)